문서번호	도시철도사업부-8647
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선1과장	도시철도사업부장
김태성		김용선	08/28 이철
협 조
	재무예산과장			홍은미
	주무관			박노성
	주무관			박중모
	주무관			박성준

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

설계변경(총차3회, 3차1회) 검토보고

2020. 8.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

설계변경(총차3회, 3차1회) 검토보고

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 건설사업관리단으로부터 설계변경 자문결과를 반영한 설계변경(총차3회, 3차1회) 승인 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

	1		공사개요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 암사역 ~ 암사역사 생태공원 ~ 현대홈타운앞

○ 규    모 : 연장 1,184m(정거장 1개소 포함), 모란차량기지 유치선(7편성)

○ 계약금액 : 90,742백만원(3차 23,200백만원)

○ 공사기간 : ’17.8.23.~’23.8.21.(3차 ’20.1.1.~’20.12.31.)

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜동해종합기술공사 외 3개사

	2		공사비 현황

○ 총차 변경 내용

(단위 : 백만원)

구 분	최 초	1회 변경	2회 변경	3회 변경(금회)	비 고
총 차	******	******	******	******

○ 차수별 집행 내용

(단위 : 백만원)

구 분	전 체	1차	2차	3차	장 래	비 고
차수별	******	******	******	******	******

	3		설계변경 현황

○ 관련근거

- 공사계약일반조건 제6절(공사의 설계변경) 및 제7절(계약금액의 변경)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제12조(설계변경 등)

○ 추진경위

- ’17.08.18. : 공사계약

- ’17.08.23. : 공사착공

- ’19.06.26. : 총차 1회 계약변경

- ’19.06.28. : 2차공사 계약

- ’19.12.16. : 총차 2회 계약변경

- ’19.12.26. : 3차공사 계약

○ 계약금액 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총차(3회)	******	*****4	*****	********** **************
3차(1회)	******	******	*	*******************************

※ 공사기간 변경없음

○ 총차(3회) 계약금액 조정 내역 : “별첨 #1‘ 참조

3차(1회) 계약금액 조정 내역 : “별첨 #2‘ 참조

○ 변경사유

- *******************************************************

- ***************************************************************************************

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 변동에 따른 실정보고에 대한 자문결과를 반영한 설계변경(총차3회, 3차1회) 내역은 적정하게 반영되었으므로 공사계약 일반조건 제7절에 의거 설계변경으로 인한 계약금액 조정은 타당하다 판단됨

	4		조치계획

○ 건설사업관리단의 설계변경 검토의견은 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(총차3회, 3차1회) 시행코자 함.

붙임  1. 총차(3회) 계약금액 조정 내역 1부.

2. 3차(1회) 계약금액 조정 내역 1부.

3. 건설사업관리단 설계변경 승인 요청 공문 1부.  끝.

【별첨 #1】총차(3회) 계약금액 조정 내역

1. 공사비 변경 내용

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	가설공	*********	*********	*
	본선개착1	**********	**********	*******	①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫
	정거장	**********	**********	*******	①,⑤,⑥,⑦,⑧,⑩,⑪
	본선개착2	*********	*********	******	①,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑪
	모란차량기지	*******	*******	*
	건축공사	*********	*********	*
	지장물 이설	*********	*********	*******	⑬
	소 계	**********	**********	*********
간접공사비	간접노무비 등	**********	**********	*******
	매립폐기물	*******	*******	******
	임목폐기물	***	***	*
	소 계	**********	**********	*******
일반관리비		*********	*********	*******
이 윤		*****	*****	**
PS금액		*******	*******	*
제요율적용 제외공종		*******	*******	*******	①
암매각 대금 공제		*******	*******	******	④
물가변동(1,2,3회)		*********	*********	*********
합 계		**********	**********	*********

2. 계약금액 증감 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감
****		**********	**********	*********
****************		**********	**********	*********
	**************	*******	*******	*******
	**************************	******	*	*******
	**********************	*******	*********	********
	*********	*********	*********	******
	*****************	*******	*******	********
	***********************	**********	**********	*******
	*************************	*********	*********	******
	***********	*********	*********	*********
	*******************	*********	*********	******
	*************************	*********	*********	*******
	**********************************	*	*********	******
	****************	*******	*******	******
	******************	*********	*********	*******
******************		*********	*********	*********
	************** **********************	*********	*********	*******
	************** **********************	*********	*********	*******
	************** **************************	*	*********	*********

【별첨 #2】3차(1회) 계약금액 조정 내역

1. 주요 물량 변경

구 분	공 종	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증 감
본선1	토공굴착	㎥	*******	******	*******
	토공 및 가시설	㎥	*****	*****	****
정거장	토공굴착	㎥	******	******	*
	구조물	㎥	*****	*****	*
본선2	토공굴착	㎥	******	******	*

2. 공사비 변경 내용

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	가설공	*******	*******	*
	본선개착1	**********	*********	**********	- ************ ******************,⑪,⑫) - *************(32억)
	정거장	*********	*********	*********	- ************ ********)
	본선개착2	*******	*******	*******	- ************ ********) - ************(2억)
	지장물 이설	*******	*******	*******	***********(⑬)
	소 계	**********	**********	********
간접공사비	간접노무비 등	*********	*********	*******
	소 계	*******	*******	*******
일반관리비		*********	*********	*******
이 윤		***	***	**
PS금액		******	******	*
제요율적용 제외공종		******	******	******	***********
암매각 대금 공제		*******	*******	******	*********
물가변동(1,2,3회)		*********	*********	*******	*************************
합 계		*******	*******	*******