문서번호	한강관광사업과-2163
결재일자	2020.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한강관광사업과장	총무부장
정영상	김호규	09/09 기봉호

「서울함공원 미디어월 설치공사」

현장 실정사항 검토보고

2020. 9.

한강사업본부

(한강관광사업과)

「서울함공원 미디어월 설치공사」

현장 실정사항 검토보고

「서울함공원 미디어월 설치공사 - 금속구조물」추진과 관련하여 시공사인 아산유리(주)로부터 제출된 사인공사, 테두리 디자인 문양 설치 및 시공물량 증·감 등 실정보고에 대한 타당성 검토 보고임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울함공원 미디어월 설치공사 - 금속구조물

○ 공사위치 : 망원한강공원(마포구 마포나루길 407) 서울함공원

○ 공사내용 : 미디어월 금속구조물 및 미디어글라스 제작 설치

○ 계약금액 : 112,156천원

○ 계약기간 : ’20. 6. 5. ~ ’20. 9. 30.

○ 시 공 사 : 아산유리(주)

2		보고내용

○ 근    거 : 아산-09-03호

○ 내    용 : 사인공사, 테두리 디자인 문양 설치 및 기초 추가 보강 등

○ 주요 변경사항

연 번	구 분	내 용	비고
1	설계 외 추가시공	사인공사(금속 비체널 간판)
2	설계 외 추가시공	테두리 디자인 문양설치 및 디자인변경
3	규격 변경	BASE PLATE, RIB PLATE 규격 변경 설치
4	설계 외 추가시공	보차도경계석(200×200×1000㎜) 설치
5	물량 변경	기타 잡철물 제작설치 등 시공물량 변경

○ 현황 및 변경사유

- 외부 사인공사 및 테두리 디자인 문양 설치 및 디자인변경

□ 당초 설계시 미디어월 외부 사인공사 및 테두리 주변 문양설치가 반영되어 있지 않아 설계변경 시 반영

(당초설계)

(변경설계)

- 미디어월 BASE PLATE, RIB PLATE 규격 변경

□ 미디어월 테두리 주변 문양설치 디자인 변경에 따라 안전성 확보를 위한 구조계산에 의거 BASE PLATE, RIB PLATE 규격 변경

(변경 기초평면도)

- 미디어월 주변 경계석 설치

□ 미디어월 당초 잔디구간에서 보도블럭 구간으로 이동 변경, 기초면적증가 및 주변 마감을 위한 경계석 설치 필요

- 잡철물설치 물량 변경 등 기타 수량 등 변경

□ 구조변경으로 인한, 잡철물 제작설치 물량 변경

□ 철근 규격 변경(D19 → D16)

□ 합판거푸집 손료(재료비) 설계 오류에 따른 변경 등

○ 공사비 증·감 내역

- 사인공사***********

□ 미디어월 프레임 외부 사인공사 시행

- 테두리 디자인문양 설치***********

□ 미디어월 테두리 디자인문양 설치 시행

- 경계석 설치*********

□ 미디어월 주변 마감을 위한 경계석 설치 시행

- BASE PLATE, RIB PLATE 규격 변경***********

□ 미디어월 BASE PLATE, RIB PLATE 규격 변경 시행

- 기타 수량변경, 제경비 변동사항 반영 등************

□ 잡철물 제작설치 물량 증가, 철근규격 변경, 합판거푸집 변경 시행 등

□ 각종 보험료 등 제경비 변동사항 반영

○ 도급비 변경내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감 내역		비고
공급가액	***********	***********	**	**********
부가가치세	**********	**********	**	*********
도 급 비	***********	***********	**	**********

3		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 사인공사, 테두리 디자인문양 설치 및 기초추가 보강 등 에 대한 시공사의 검토의견이 타당하므로 원활한 공사 추진을 위한 실정보고 사항을 승인하고, 낙찰차액 및 이설비**********를 활용하여 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.