등록번호

문화체육과-28293

주무관

문화체육시설팀장

문화체육과장

복지문화국장

부구청장

등록일자

2020.9.9.

이자경

김정수

조영아

송광덕

09/09

서영관

결재일자

2020.9.9.

공개구분

부분공개(5)

협  조

- 북아현 문화체육센터 신축공사 - 준공기한 연장 계획

서 대 문 구

문화체육과

- 북아현 문화체육센터 신축공사 -

준공기한 연장 계획

북아현 문화체육센터 신축공사 분야별 건축공사(건축·기계설비/전기/정보통신/소방) 및 별도 공사(용역) 기한연장 사유가 발생하여 다음과 같이 검토하고 계약변경 조치하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢ 북아현 문화체육센터 신축공사 준공기한 연기 의뢰 (건축과-5172, ’20.9.9.)

▢ 실정보고(설계변경) 및 준공기한 연기 검토보고 (건축과-4077, ’20.8.26.)

▢ 기술검토의견서[실정보고 검토] (건설사업관리단 itm997 제20-0143호, ’20.8.18.)

Ⅱ		추진경과 및 향후계획

▢ ’19. 03. 13.	: 공사 착공

▢ ’19. 04. ~ 05.	: 철도협의 및 유해위험방지계획 승인, 가설공사 추진

▢ ’19. 05. ~ 11.	: 토목공사(흙막이/터파기), 계측관리용역 추진

▢ ’19. 12.	: 1차 공사 준공 및 2차 공사 계약 체결

▢ ’19. 11. ~ ’20. 06.	: 골조공사(철근콘크리트/철골), 인테리어 설계용역 완료

▢ ’20. 07. ~	: 내부 마감공사(조적/창호) 및 외장공사(벽체) 추진 중
※ 실공정률 (2020. 08. 31. 기준) 70%

▢ ’20. 10. ~	: 마감공사(바닥/인테리어 등)

▢ ’20. 11. ~	: 마감공사(도장/사인물 등)

▢ ’20. 12. 15.	: 공사 준공

Ⅲ		공사개요

▢ 공 사 명 : 북아현 문화체육센터 신축공사(장기계속계약, 총액계약)

▢ 위    치 : 서울특별시 서대문구 북아현동 1012-2 (대지면적 1,703.7㎡)

▢ 건축규모 : 지하3층/지상4층, 연면적 5,307.15㎡

▢ 계약현황

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

▢ 감 리 자 : ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소 / ㈜이음엔지니어링

Ⅳ		계약변경사항

▢ 준공기한 연장

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

▢ 연장귀책 : 서대문구청장 (계약상대자 지체상금 미부과)

Ⅴ		검토의견 및 조치계획

▢ 감독부서(건축과)

○ 건설사업관리단 검토 결과, 건축공사 준공기한 연장 일수가 적정한 것으로 검토되었으며, 주 공정의 준공기한이 연장됨에 따라 별도 공사(분리발주 포함) 및 용역의 준공기한, 관급자재 납품기한도 함께 연장토록 하고, 발주부서인 문화체육과에 준공기한 연장 요청토록 함.

▢ 발주부서(문화체육과)

○ 건설사업관리단 기술검토의견 및 건축과 검토보고 사항을 확인하였으며, 감독부서의 조치의견에 따라 준공기한 연장 계약변경을 추진하고자 함.

Ⅵ		행정사항

▢ 변경계약 체결	재  무  과

※「북아현 문화체육센터 신축공사-장기계속계약」분야별 공사 설계변경(총차 제2회, 2차 제1회)은 별도 방침 받아 시행 예정

붙임 1. 준공기한 연기 의뢰(건축과) 1부.
2. 실정보고 및 준공기한 연기 검토보고(건축과) 1부.
3. 기술검토의견서(건설사업관리단) 1부.  끝.