				★차장			팀장	도로환경처장	도로관리본부장
문서번호		도로환경처-6140
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2020.09.17.					기획조정실장
공개여부		공개
- 2020년 자동차전용도로 녹지관리공사(연간단가) 등 7건 - 낙찰차액 사용계획
			2020. 9
						도로환경처

2020년 자동차전용도로 녹지관리공사(연간단가) 등 7건 -

낙찰차액 사용계획

「2020년 자동차전용도로 녹지관리공사(연간단가)」등 7건 공사의 낙찰차액을 사용하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 대    상 : 올림픽대로 등 11개 노선 157.93㎞, 녹지대 1,789천㎡

□ 공사기간 : 2020년 4월 ~ 12월

□ 계약금액 : 2,133백만원(경상적: 1,234백만원, 자본적: 898백만원)

(단위:백만원)

구 분	잠 실	행 주	강 변	동 부	한 남	여 의	위험수목정비공사
계약금액	306	331	312	285	357	365	176
도급업체	태림조경 (주)	㈜네이쳐 드림	삼미조경 공사(주)	수림조경 산업(주)	(주)도원조경	㈜영림원	대호조경 (주)
공 정 률	60%	60%	60%	60%	60%	60%	90%

Ⅱ		추 진 사 유

□ 자동차전용도로 녹지관리공사(연간단가) 등 6건

○ 주요 공종 적정 관리수준 미확보(예산부족)로 수목생육 저하 및 경관 저해

- 풀깎기(1.8회/년), 풀뽑기(0.4회/년) 정비 물량 부족

※ '20년 녹지관리 종합계획 기준: 풀깎기 2~5회, 풀뽑기 3~4회

(단위:백만원)

공 종	최소시행적정횟수	계 약 물 량			추 가 작 업 물 량			비 고 (과부족)
		횟수	물량(천㎡)	금 액	횟수	물량(천㎡)	금 액
소 계				1,371			158
풀깎기	2회	1.8	2,560	1,289	0.2	230	116	-
풀뽑기	1회	0.4	107	82	0.2	57	42	-0.4회

□ 자동차전용도로 위험수목정비공사

○ 집중호우 및 태풍피해로 인한 위험수목, 차량저촉가지 등 정비수목 추가 발생

□「건설일자리 혁신 방안」관련 고용개선지원비* 및 전자인력관리시스템  단말기 공사원가 반영 필요

(고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼 시행(市건설혁신과-8427))

*고용개선지원비 : 건설일용근로자의 고용환경 개선과 사회보장 강화를 위한 주휴수당, 건강보험료‧국민연금 및 고용개선장려금 지원

Ⅲ		낙찰차액 사용계획

□ 낙찰차액 현황                                            (단위:천원)

구 분	발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	비 고
계	2,445,000	2,133,237	311,763
2020년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실) 등 4건	1,415,000	1,234,435	180,565	경상적 대행사업비
2020년 자동차전용도로 녹지관리공사(한남) 등 2건	830,000	722,315	107,685	자본적 대행사업비
2020년 자동차전용도로 위험수목 정비공사	200,000	176,487	23,513

□ 낙찰차액 사용계획

○ 자동차전용도로 녹지관리공사(연간단가) 등 6건(158,315천원)

- 안전사고 및 민원발생 예방과 경관개선을 위한 녹지관리 물량 추가 시행

‧ 풀깎기(1.8회/년→2회/년), 풀뽑기(0.4회/년→0.6회/년)

(단위:천원)

공 종	단위	물 량		금 액
		당 초	변 경	당 초	변 경	증‧감
소 계				1,370,964	1,529,279	158,315
풀깎기	㎡	2,560천	2,790천	1,289,077	1,405,164	116,087
풀뽑기	㎡	107천	164천	81,887	124,115	42,228

○ 자동차전용도로 위험수목정비공사(22,696천원)

- 집중호우 및 태풍피해 위험수목 추가 발생에 따른 정비

(단위:천원)

공 종	물 량		금 액			비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경	증‧감
소 계			164,221	186,917	22,696
수목제거	100주	110주	67,306	70,564	3,258
약 전 지	700주	830주	96,915	116,353	19,438

○ 고용개선지원비 반영(43,587천원)

- 주휴수당 : 직접노무비×5.4%×1.4(제경비)

- 건강보험료‧국민연금 : 직접노무비×7.83%×50%×0.5

- 고용개선장려금 : 직접노무비×5.4%×20%×0.5

○ 전자인력관리시스템 단말기 반영(6,600천원)

- 1,100천원×6개소 = 6,600천원  ※ 위험수목정비공사 제외

□ 낙찰차액 사용 내용                                       (단위:천원)

구 분		발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	낙찰차액 사용금액	비 고
계		2,445,000	2,133,237	311,763	231,198
경상적	소 계	1,415,000	1,234,435	180,565	100,000
	자동차전용도로 녹지관리공사(잠실)	350,000	306,650	43,350	21,839	계 약 금 액 7%~ 9.8%
	자동차전용도로 녹지관리공사(행주)	380,000	330,707	49,293	26,787
	자동차전용도로 녹지관리공사(강변)	360,000	311,793	48,207	30,466
	자동차전용도로 녹지관리공사(동부)	325,000	285,285	39,715	20,908
자본적	소 계	1,030,000	898,802	131,198	131,198
	자동차전용도로 경관개선공사(한남)	410,000	356,987	53,013	53,013	계 약 금 액 14.9%
	자동차전용도로 경관개선공사(여의)	420,000	365,328	54,672	54,672
	자동차전용도로 위험수목 정비공사	200,000	176,487	23,513	23,513	계 약 금 액 13.3%

※금액은 현장여건에 따라 변동될 수 있음

Ⅳ		행 정 사 항

□ 낙찰차액 사용계획 보고(→市도로시설과) 및 추산액 조정의뢰(→기획조정실)

□ 추가 물량 우선 시행 및 고용개선지원비 등 추후 설계변경시 반영.  끝.