투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	기성검사 결과 제출(국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)건설공사)-2차2회

1. 이산2020-5662호(2020.09.17)와 관련입니다.

2. 건설사업관리단으로부터 제출된 「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)건설공사」의 2차2회 기성검사 결과를 아래와 같이 제출하오니 대금지급 등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)건설공사(2차)

나. 도 급 자 : 한신공영(주) 대표이사 태기전외 1개사

다. 도 급 비 : 8,900백만원(총차 70,105백만원)

라. 공사기간 : 2019.11.25.~2020.12.31.(총차 2018.08.08.~2022.12.31.)

마. 기성검사 결과(2차 2회기성)

1) 건  명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)건설공사(2차) 제2회 기성

2) 기성검사자(기술지원감리원) : 홍석철(구조), 박찬휘(시공)

3) 입  회  자 : 공사관리관(홍민철), 책임기술자(이상오), 현장대리인(이섭우)

4) 기성검사일 : 2020.9.16.

5) 기성검사 현황 및 기성금 집행

(단위:원)

계약금액	기성 집행현황				비고
	전회까지 기성금액	금회 기성금 집행		기성금액 누계
		금 액	기성율
8,900,000,000	2,267,100,000	1,102,200,000	12.38%	3,369,300,000	기성율 누계 : 37.85%

6) 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 국회대로 지하차도 및 상부 공원화, 시설비

붙임 : 기성검사 조서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	홍민철		방재시설과장	김태중		방재시설부장	09/22 박홍봉
협조자	주무관	노진우
시행	방재시설부-13293	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	mchong@seoul.go.kr	/	부분공개(7)