문서번호		기계1사업소-9100		차장		P/L(파트장)	소장		본부장
등록일자		2020.09.24.
									09/24
결재일자		2020.09.24.
공개여부		대시민공개
				협조	기계처 처장
방침번호		본부장-208
	- 2020년도 기계1사업소 - 사업계획 및 성과관리계획 변경 보고
2020 . 09.
기술본부 기계1사업소

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

	2020년도 기계1사업소 사업계획 및 성과관리계획 변경보고

2020년도 기계1사업소 사업계획 및 성과관리계획이 코로나19 등 재난상황으로 인해 주요 추진시기 및 내용의 변경이 불가피하여 사업계획을 변경하고자 함.

관련근거

1

가. 기술계획처-1039호(2020.02.06.) 『2020년도 성과관리계획 제출 (기술본부)』

나. 기획처-1390호(2020.04.01.) 『2020년도 성과관리계획 통보』

다. 기획처-4032호(2020.09.01.) 『공사 비상경영계획 관련 사업 변경계획 제출 요청』

라. 기술계획처-6476호(2020.09.10.) 『노후시설 개량 기술본부장 주관 회의 결과알림(20년 8월)』

사업계획 변경추진

2

가. 주요사업 변경 계획 현황

연번	주요사업 현황	변경 계획	변경사유
1	역사 바닥유도등 개량	추진일정 및 물량 변경	국비지원축소로 집행보류
2	노후 급배수 설비 개량	추진일정 및 물량 변경	국비지원축소로 집행보류

나. 사업별 세부 변경내용

연번	주요사업	세부내용			비고
		구 분	변경 전	변경 후
1	역사 바닥유도등 개량	사 업 비	4,800백만원	78백만원	붙임 #1
		사업물량	24역	설계용역 30역
		추진일정	‘20. 1월 ~ 12월	‘20. 1월 ~ 5월
2	노후 급배수 설비 개량	사 업 비	1,901백만원	850백만원	붙임 #2
		사업물량	25개역	20개역
		추진일정	‘20. 1월 ~ 12월	‘20. 1월 ~ 11월

결  론

3

√ 주요사업별 성과관리계획을 붙임과 같이 변경하여 성과목표에 차질이 없도록 진행하고자 함.

□ 붙임 : 1. 역사 바닥유도등 개량  1부

2. 노후 급배수 설비 개량  1부.  끝.