문서번호	물재생계획과-12604
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
협조

장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역

설계변경 검토보고

2020. 9.

물재생계획과

장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역

설계변경 검토보고

우리 시에서 시행 중인  ｢장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역｣ 에 대한 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계

○ 도 급 비 : 1,470백만원

○ 용역기간 : 2019. 10. 29 ~ 2021. 7. 19

○ 수 행 사 : ㈜KG엔지니어링 외 2개사

□ 주요 과업내용

○ 장위-4 소구역(장위동 일대) 하수관로 전구간 조사

○ 정비대상 관로 선정 및 고품질 하수관로 구축방안 마련(설계)

- 수리적·구조적 불량관로 정비방안 마련

- 분류식 전환 검토 및 배수체계개선 방안 마련 등

Ⅱ		추 진 경 위

□ 2019. 4. : 토구별 소구역 정비사업 추진계획 수립

□ 2019. 8. : 기술용역(기본 및 실시설계) 시행계획 수립

□ 2019. 9. : 기본 및 실시설계 용역 발주

□ 2019.10. : 용역착수 및 추진

□ 2020. 3. : 기술용역 현안사항 및 조치계획 보고

※ 당초 : 분뇨 직투입 → 조정 : 분뇨 직투입 유보 (법적근거 및 월류수 처리대책 미비)

Ⅲ		주요 설계변경 내용

구 분		변경 전	변경 후	증・감	사유
측량조사	맨홀조사	14.5km	26.3km	증) 11.8	전수조사 실시
지반 및 지하 매설물 조사	배수설비조사	300동	-	감) 300	조사 불필요
유량 및 수질조사	유량조사	16회	40회	증) 24	과업내용서 조사기준 반영
	수질조사	192회	108회	감) 84
빗물받이조사		0개소	1,915개소	증)4,941	전수조사 실시

※ 관련근거 : 물재생계획과-4219(2020.3.12)호 ‘과업내용 조정 알림’

Ⅳ		설계변경 금액

(단위:원)

용 역 명	구 분	금 액		증 ․ 감
		당 초	변 경
장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	총차분	1,470,380,000	1,473,649,000	증)3,269,000
	1차분	500,000,000	500,000,000	-

※ 과업내용 조정(조사 확대)에 따른 직접경비 증액된 사항임

Ⅴ		조 치 계 획

□ 설계물량 변경사항을 반영하여 설계변경(정산) 및 기성(1차분) 준공 처리하고자 함

붙임 1. 계약변경 요청 공문(실정보고서, 설계변경내역서 포함) 1부.

2. 관련근거(과업내용 조정 알림 공문) 1부.  끝.