문서번호	시설과-1522
결재일자	2020.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		하종식	05/08 박종수
협조
	재무팀장		곽선아

『길동생태공원 노후시설 정비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2020. 5.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『길동생태공원 노후시설 정비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「길동생태공원 노후시설 정비공사」에 필요한 관급자재의 납품기한을 본 공사 일정에 맞춰 남품기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 길동생태공원 노후시설 정비공사

❍ 위     치 : 길동생태공원(서울시 강동구 천호대로1291)

❍ 공사기간 : 2020.03.30.~2020.05.28.

❍ 도 급 비 : 97,772천원

❍ 도 급 자 : 주식회사 성진조경 대표 김성찬

❍ 사업내용 : 노후 데크 정비 등

□ 관급자재 현황 및 검토 내용

❍ 건    명 :  길동생태공원 노후시설 정비공사 관급자재 구매

❍ 관급자재

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	납품기한 (당초)	납품기한 (변경)	비 고
23406491	덱	T30mm, 멀바우	m2	304	2020.5.15	2020.5.27.

❍ 연기사유 : 납품기한을 본 공사 일정에 맞춰 납품기한 연기

❍ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

❍ 계약부서(공원운영과)로 관급자재 납품기한 연기요청 하고자 함.  끝.