문서번호	정수시설과-6986
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		代서광호	10/07 김중영
협조
	주무관		장현순

설계변경 시행 보고(제2회) 뚝도아리수정수센터 조경관리용역

2020.10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 시행보고(제2회)

《 뚝도아리수정수센터 조경관리용역 》

정수생산 시설을 방문하는 시민에게 안전하고 깨끗한 아리수 이미지를 제공하고자 추진중인“뚝도아리수 정수센터 조경관리용역”에 대하여 현장여건에 따른 일부 공종별 계약물량 변경에 따라 설계변경하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

용 역 개 요

▢ 용 역 명 : 2020년 뚝도아리수정수센터 조경관리용역

▢ 규    모

○ 잔디깍기 : 68,130㎡            ○ 풀 깍 기 : 73,840㎡

○ 풀 뽑 기 : 66,610㎡            ○ 관목전정 :  1,820㎡

▢ 총용역비 : 111,789천원

○ 도급비 101,789천원/  관급비 10,000천원

▢ 용역기간 : 2020.3.19. ~ 12.21

***************************

설계변경 현황

▢ 변경 내용

○ 변경사유 : 공종 간 계약 물량 조정

- 해충방지 관련 풀깍기, 잔디깍기 물량 증가

- 희망일자리 공공근로 인원 활용으로 풀뽑기 물량 감소 등

○ 물량 증 ․ 감 현황

공 종	단위	물 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
잔디깍기	㎡	33,630	68,134	증34,504
풀 깍 기	㎡	39,231	73,845	증34,614
풀 뽑 기	㎡	85,943	66,612	감19,331
관목전정	㎡	2,340	1,823	감517

▢ 설계변경(제2회)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비	111,789,600	111,789,600	-
도 급 비	101,789,600	101,789,600	-
관 급 비	10,000,000	10,000,000	-

조 치 의 견

▢ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 용역 추진에 만전을

기하고자 함.

첨   부 : 설계변경 내역서(제2회) 1부.  끝.