문서번호	시설과-7764
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	시설과장		관리부장
정승우	김지만	代이춘한		10/20 오성문
협 조
	주무관		박진선

『- 기린나라 소방시설 개선 공사 -』

설계변경 및 공사기간 연기 검토 보고

2020년 10월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 기린나라 소방시설 개선 공사 -

설계변경 및 공사기간 연기검토 보고

『서울대공원 기린나라 소방시설 개선』중 일부 설계내역서에 미반영된 부분이 있어 소방공사(기계, 전기) 설계변경 및 공사기간 연기을 추진하여 추가공사를 시행하고자 함.

Ⅰ		추진근거

2020년 기린나라 소방시설 개선 공사 계획

▷ 시설과-1400(2020.2.18.)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 서울대공원 기린나라 소방시설 개선 공사

공사기간 : 2020. 8.3. ~  10.25.

공사범위 : 지하1층 ~ 지상3층

시 공 사 :*****************

계약금액 : *************

주요 공사내용

- 기존 소방시설(전기,기계) 철거 1식

- 기존 스프링클러 및 옥내소화전 철거 및 설치 1식

- 펌프 및 펌프실 배관 공사 1식

- 전기소방 공사 1식

Ⅲ		추가 공사 내역

주요 공사내역

▷ 소방기계분야

- 덕트 상,하 스프링클러 배관 추가 설치

- 옥내 소화전함 호수신설 및 관창신설

▷ 소방전기분야 : 훼손된 기존 전기 배선(당초 계획 물량보다 증가)

세부 변경사항

구 분	품명	단 위	수량	공사비 증감
합 계				***********
소방기계공사	- 밸브 개폐용 SUPPORT & HANDRIL 강관용접 백강관평면배관(무용접) 바깥나사게이트(댐퍼스위치) 무용접후렌지아답터니플 무용접고정식커플링(아연도) 백강관 평면 배관 관보온(가교발포+매직) 옥내 소화전 관창시설 등	식개개개개개식개개	1 2 2 4 8 1 1 24 14	***********
소방전기공사	- 강제전선관 - 1종금속제가요전선관	개개	73 13	**********

Ⅳ		검토 의견

***************************************

**********************************

**************************************************

*****************

*********************************************************

***************************************************************

Ⅴ		계약기간 변경 내역

공사명	계약 기간		비 고
	변경 전	변경 후
****************************	********** ***********	********** ***********	******
*************************	*********** ***********	*********** ***********	******

귀책사유 ; 서울대공원

지체상금 부과여부 ; 미부과

Ⅵ		설계변경 소요예산

추정금액 : ********

예산확보 : ‘2020년 기린나라 소방시설 개선공사’ 계약 후 남은 집행잔액 및 낙찰차액을 사용

(단위 : 천원)

예산액	발주액	계약금액	집행잔액
			소계	미집행액	낙찰차액
*******	*******	*******	******	***	******

예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 공원시설 유지보수 및 정비, 시설비(기린나라 소방시설 개선 공사)

Ⅶ		향후계획

신속한 공정관리를 위하여 설계변경 사항에 대하여 선 작업지시 후 준공 전 물량 증감에 대한 실사를 철저히 한 후 설계변경(정산) 시행

설계변경시 기존 품목은 계약단가, 신규 품목은 낙찰률 적용단가 반영

붙임 : 관련 공문 1부. 끝.