등록번호

자치행정과-19790

주무관

마을공동체지원팀장

자치행정과장

주민자치국장

등록일자

2020.10.20.

이은주

김재희

임난숙

전결 10/20

김판덕

결재일자

2020.10.20.

공개구분

부분공개(5)

협  조

천연옹달샘 마을활력소 CCTV 구매·설치공사 계획

서 대 문 구

자치행정과

천연옹달샘 마을활력소 CCTV 구매·설치공사 계획

주민공동체 공공공간인 천연옹달샘 마을활력소에 무인경비용역업체를 통해 CCTV를 임차운영중이나, 무인경비용역 연간단가계약에 따라 매년 CCTV교체에 따른 행정력소모 등 문제해결을 위해 구매로 전환하여 운영의 효율성을 제고하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

○ 추진근거

-「서울특별시 마을공동체 활성화 지원 조례」제17조 제3항

- 천연옹달샘 마을활력소 운영협약 체결 계획 : ’19.5.29.(자치행정과-10091호)

- 천연옹달샘 공공요금 관련 안내 : ’20.1.8.(시 지역공동체담당관-250호)

- 천연옹달샘 마을활력소 공공요금 및 시설유지관리 시-구 이관에 따른 관리계획 : ’20.1.13. (자치행정과-823호)

○ 천연옹달샘 시설 개요

- 위치/규모 : 독립문로 10길 6 / 연면적 165㎡(지상 2층)

· 1층 : 다목적실, 공유주방, 사무실(개방공간), 화장실

· 2층 : 옹달샘1·2(소규모 프로그램실), 복도 및 휴게실, 베란다

- 개 소 일 : 2017. 3. 8.

○ 추진배경

- 천연옹달샘 CCTV는 ’17년 1월 서울시에서 무인경비용역업체*****으로부터 임차하여 ’20년 2월까지 요금을 선납하다가 공공요금 등 시설장비관리주체 및 예산이 시에서 우리구로 2020년 1월 이관, 관리중임.

- 무인경비용역은 대기업이 아닌 중소기업 계약 대상으로서(일자리경제과-58779호, ’19.12.5.) 2021년 1월부터 중소기업으로 연간단가계약 체결되어야 하며, 현재 대기업으로부터 임차중인 CCTV도 철거해야 함.

- CCTV를 임차하는 방식의 기존 무인경비용역 방식은 업체 변경시 CCTV교체 설치에 따른 예산낭비와 행정력 소모 등의 문제가 발생할 수 있음.
따라서 CCTV는 한번에 구매·설치하고 별도로 무인경비용역만 매년 연간단가계약을 체결하여 예산 절감 및 효율성을 높이고자 함.

Ⅱ		세부 추진계획

○ 추진내용 : CCTV 구매·설치 공사

- 현재 임차 운영중인 CCTV 사양에 준하여 구매·설치공사 추진 : ****************************

○ 추진시기 : 2020년 11월~12월

- 현재 CCTV까지 임차 운영중인 무인경비용역업체*****와의 서비스를 12월말로 종료하고 2021.1.1. 새로운 무인경비용역업체와의 연간단가 용역 착수 전에 시기를 맞추어 구매·설치 공사 필요

- CCTV 구매·설치는 정보통신기술을 행정업무에 응용하는 사업에 해당함에 따라 공사발주 전 사전절차로 정보화사업 사전협의 추진

○ 추진방법 : 1인 견적 수의계약

- 수의계약 근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제5호 가목, 제30조 제1항 제2호

- 수의계약 사유 : *************************************************************

○ 계약대상자

- 업체명 : ***********

- 주  소 : ****************

- 사업자등록번호 : ************

○ 소요예산 : 2,600천원(시비)

- 재원확보 방안 : 시비보조금 교부 신청

- 예산과목(11월 간주처리 예정) : 자치행정과, 활기찬 주민자치 실현,
마을공동체만들기, 마을공동체 인식확산, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		향 후 일 정

○ 정보화사업 사전협의(스마트정보과) : 10월~11월

○ 시비보조금 교부 신청 : 10월~11월

○ 보조금 교부 및 간주처리 : 11월

○ 수의계약 체결 : 12월중

○ CCTV 구매․설치공사 : 12월말

붙임 산출기초조사서 1부.  끝.