문서번호	기전과-6019
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
박상갑		석대창	10/22 변봉섭
협조	주무관		김해중
	주무관		조소현

상도터널 진입차단시설 설치 계획

2020. 10.

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 진입차단시설 설치 계획

터널진입차단시설을 설치하여 터널 내 화재시 터널로 진입하는 차량을 차단함으로써 2차 안전 사고를 방지하고자 합니다.

1		추 진 근 거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토교통부예규-제139호, 2020.08.31.)

○ 도로터널 방재시설 개선사업 변경계획(도로시설과-8942, 2020.08.06.)

- 3등급 터널 ⇒ 2등급 수준으로 강화

- ‘21~’22년도 개선사업 우선집행

2		시 설 현 황

○ 상도터널 현황

터 널 명	상도터널
규 모	열	폭	연장		높이	차로수
	상, 하행	9.2m	568m		7.1m	왕복4차로
터널등급	연장 3등급			방재 3등급
주요 방재시설	옥내소화전, 정보표지판, 비상경보‧방송설비

2		추 진 배 경

○ 3등급 터널 ⇒ 2등급 수준으로 강화

- 방재 3등급 상도터널에 2등급 방재시설 설치 기준을 적용하여 중규모터널에 대한 방재시설 강화 추진

3		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 상도터널 진입차단시설 설치

○ 사 업 비

구 분	금 액
실시설계	*****
설치공사	******
관급자재	******
합 계	******

○ 기    간 : 2020. 10. ~ 12.

○ 위    치

상행(한강대교 방면)	하행(상도역 방면)

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 노후 방재시설 보수, 시설비

4		추 진 계 획

○ 실시설계 용역

- 설계내용 : 터널진입차단시설 설계 1식

- 비    용 : ********

- 기    간 : 착수일로부터 30일

- 계약방법 : 수의계약(추정가격 20,000천원 이하인 용역 계약)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

- 용역사유 : 주변 교통 환경 및 차량 운전자의 시인성을 고려한 진입차단시설의 위치선정 등 공사 설계에 전문성이 요구됨.

○ 공사발주

- 공사내역

내 용	금 액
문형식 지주 기초 공사	******
전기, 통신 배선 공사
기타(교통관리비 등)

- 발주방법 : 경쟁입찰

- 기    간 : 착공일로부터 50일

○ 관급자재 구매

- 구매내역

내 용	금 액
문형식 지주	******
차단막 설비
차단막 시트

- 구매방법 : 조달 구매(현장설치도, 제3자 단가)

- 납품기한 : 계약일로부터 180일

5		행 정 사 항

○ 실시설계 용역 타당성 심사 요청  →  기술심사 담당관

○ 도로기전시설물 예산 재배정 요청  →  도로시설과

6		추 진 일 정

○ 2020. 10.   실시설계 용역 타당성심사 의뢰 및 용역 발주

○ 2020. 10.   예산 재배정 요청

○ 2020. 11.   공사 발주 및 관급자재 구매

○ 2020. 12.   공사 준공

붙임  실시 설계 용역 산출내역서 1부.  끝.