문서번호	정수과-9273
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박준호		최종인	11/18 代박진기
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.11.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거공사   시행중 시공물량 증감, 제경비 납부 정산에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

공사현황

- 공 사 명 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거공사

- 공사개요 : 조류차단막, 오일휀스 철거 및 설치 780m

취수구 스크린 주변 이물질제거 및 수초제거 20개소 720㎡

조류차단막, 오일휀스 구매 40m

- 도 급 액 : **************************

- 착 공 일 : 2020. 05. 27.

- 준공기한 : 2020. 11. 22.

- 도 급 자 : *************

심의위원회 심의결과

- 위 원 장 : 정수과장 최종인

- 위    원 : 공업6급 이금재외 3명, 간사 1명

- 일    시 : 2020.11.17.(화) 09:30 ~ 10:30(2층 정수과 회의실)

- 안    건 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거,설치 및 이물질 제거공사

설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

- 심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

- 시공물량 증감 적용 적정성 검토

- 제경비 산출 적용 적정성 검토

- 제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 용역비                                            (단위:원)

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초	변경
공급가액	**********	**********	감) *********
부가가치세	*********	*********	감) *******
도 급 비	**********	**********	감) *********

조치의견

- 위와 같이 시공물량 증감 및 제경비 납부 정산에 따른 감액으로 인한 설계변경을

자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 내역서   1부.

2. 계약금액조정 검증확인서  1부.

3. 심의위원회 의견서   1부.  끝.