문서번호	급수운영과-18253
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
제영도	양재덕	한희선		11/25 안병희
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「2020년 거마배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역」 준공기한 연기 보고

2020. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

「2020년 거마배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역」

준공기한 연기 보고

“시설물의 안전관리에 관한 특별법”에 의거 시행중인 「2020년 거마배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역」의 기술심의가 지연되어 다음과 같이 준공기한을 다음과 같이 연기 하고자 함.

Ⅰ		용역개요

용 역 명: 2020년 거마배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역

계약금액: 86,948,000원

용역기간: 2020. 4. 2.~11. 27.

용역업체: 에스큐엔지니어링(주) 대표 이래철

Ⅱ		용역 추진현황

기술용역 타당성 심사요청(강동 → 기술심사담당관)

○ 급수운영과-17179(2019.10.31.)

기술용역 타당성 심사결과 통보

○ 기술심사담당관-20708(2019.11.13.)

용역 발주 시행(2020.2.27.)

용역 계약 체결(2020.3.25.)

정밀안전진단용역 기술심의 요청(강동 → 기술심사담당관)

○ 급수운영과-15775(2020.10.15.)

건설기술심의 소위원회 개최 통보

○ 기술심사담당관-19201(2020.11.18.)

○ 심의일시: 2020.12.2.(수) 13:00~

(심의일시 변경 : 당초 12.1.(화) 14:00 → 12.2.(수) 13:00)

Ⅲ		준공기한 연기사유

○ 건설기술심의 소위원회 개최가 준공 이후로 결정되어, 위원회의 검토의견을 보완 반영하고 용역보고서 재작성 등을 위하여는 1개월 이상 소요 예상되며

○ 위원별 검토의견을 보완 반영하고 위원별 확인 결과를 용역준공전까지 제출하여야 하기에 준공기한의 연기가 필요함.

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 준공기한 연기가 불가피한 실정이기에 아래와 같이 준공기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

▷ 당 초: 2020. 4. 2.~2020. 11. 27.

▷ 변 경: 2020. 4. 2.~2020. 12. 31.

○ 지체상금 부과여부: 미부과

▷ 근거: 지방자치단체 용역계약 일반조건 제7절“1”(지체상금)

(그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우)

붙임  건설기술심의 소위원회 개최 통보 공문 1부.  끝.