경복궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업

	< 사 업 개 요 >
□ 사 업 명 : 경복궁 광화문월대 등 복원 및 주변정비사업 □ 사업기간 : 2018~2023(6개년) - 역사광장 조성 및 우회도로 개설은 2021년 까지 추진예정<서울시 추진> - 광화문 월대 및 해태상 이전 등 문화재 복원은 2023년 까지 추진예정<문화재청 추진> □ 사 업 비 : 58,000백만원 추산(국비 29,000백만원, 지방비 29,000백만원) □ 사업내용 - 문화재복원 : 광화문월대, 해태상 이전 등 - 주변정비 : 도로이설(우회도로 개설) 및 역사광장 조성 (36,200㎡)등

□ 보조금 교부결정 내역(‘20년)

ㅇ 사 업 비 : 10,200백만원(국비 5,100, 지방비 5,100)

- 2차 교부결정금액 : 2,550백만원(국비)

ㅇ 사업내용

- 도로이설(우회도로 개설) 및 역사광장 조성(1차) 공사비 및 감리비

ㅇ 사업 세부지침

- 사업추진 시 우리 청과 협의하여 추진한다.

ㆍ 광화문 월대 및 동서십자각 권역 등의 온전한 복원을 위한 역사광장  및 우회도로 레벨 등에 대해서는 향후 광화문 월대 정밀발굴조사 결과를 토대로 문화재 관련 전문가의 자문을 받아 추진한다.

ㅇ 보조 사업자 : 서울특별시장

ㅇ 교부 결정액 : 2,550백만원(공사비 2,344, 감리비 206)

ㅇ 예산과목 : 2200-2231-301-330-03(자치단체 자본보조)

□ 향후계획

ㅇ 도로이설(우회도로 개설) 및 역사광장 조성 공사 추진(‘20년~‘21년/서울시)

ㅇ 문화재 발굴ㆍ복원설계ㆍ복원공사 추진(‘21년~‘23년/문화재청)

참고 1		연도별 사업비 및 사업계획

□ 사업비 투자계획

ㅇ 연차별 투자계획

(단위:백만원)

계	연도별
	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
58,000	80	26,671	15,300	150	13,799	2,000

ㅇ 사업비 분담액(국비 / 지방비)

(단위:백만원)

구분	연도별
	계	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
계	58,000	80	26,671	10,200	5,250	13,799	2,000
국비	29,000	80	13,336	5,100	2,700	5,784	2,000
시비	29,000		13,335	5,100	2,550	8,015	-

□ 사업내용

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비	비 고
문화재 복원	․광화문 월대 복원, 동서십자각 궁장 연결 등	40억원
설계 및 감리비	․기본설계, 실시설계, 감리비 등	42억원
주변정비	․사직-율곡로 도로 이설, 역사광장 조성 등	249억원
보상비	․건물 및 토지보상	249억원
합계		580억원

* 580억원(문화재 복원 40억원 / 주변정비 540억원)

※ 도로이설 포함 사유 ‣ 도로이설은 문화재 발굴 및 복원을 위한 선행 작업임 ‣ 율곡로, 삼청로 등 도로 이설이 선행되지 않으면, 월대 복원 불가함	광화문 월대 위치(붉은 면)

참고 2		사업개요 및 조감도 등

사업개요
조 감 도

단 면 도