＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신	총무과장
(경유)
제목	연구실 증축 2차 공사(전기.정보통신.소방전기) 준공기한 연기 의뢰

1. 청사 증축공사와 관련하여 선행공정인 건축공사가 지연되어 연구실 증축 2차 공사(전기·정보통신·소방전기) 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 준공기한 변경내용

계약명	계약자	계약기간(2차공사)		총차계약금액 (2차계약금액)
		변경 전	변경 후
서울물연구원 연구실 증축 전기공사	㈜은하전기 대표 정기덕	’19.03.29 ~’19.11.08	’19.03.29 ~’19.11.29	205,471,960원 (155,471,960원)
서울물연구원 연구실 증축 정보통신공사	㈜일동전력 대표 오정미	’19.03.29 ~’19.11.08	’19.03.29 ~’19.11.29	73,198,720원 (58,198,720원)
서울물연구원 연구실 증축 소방전기공사	㈜태주공영 대표 우종수	’19.03.29 ~’19.11.08	’19.03.29 ~’19.11.28	55,337,700원 (40,337,700원)

- 지체상금 부과 : 미부과

나. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 서비스장비확충 및 환경개선,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기 사유서 각 1부.

2. 연구실 증축 2차 공사(전기·정보통신·소방) 준공기한 연기 보고 1부.  끝.

	수도연구부장
주무관	최병석		배급수과장	백승학		수도연구부장	11/07 代백승학
협조자
시행	배급수연구과-8178	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	3146-1831	/전송	3146-1836	/	cbs63@seoul.go.kr	/	부분공개(6)