문서번호	정수시설과-12385
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송		전훈	11/30 조성태
협 조

고도정수시설 수위계측시스템 구매설치 설계변경 보고

2020. 11.

암사아리수정수센터

정수시설과

고도정수시설 수위계측시스템 구매설치 설계변경 보고

우리센터에서 시행중인「고도정수시설 수위계측시스템 제작구매설치」와 관련하여 제경비 정산을 위한 설계변경을 시행코자 함

□ 사업개요

❍ 건    명 : 고도정수시설 수위계측시스템 제작구매설치

❍ 계약금액 :**************

❍ 계약기간 : ***********************

❍ 사업내용

************************

❍ 계약업체 : ***************

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경내용

계 약 금 액	당 초	*************
	변 경	*************
	증·감액	***********
계 약 기 간	당 초	2020. 08. 31. ~ 11. 30.
	변 경	변경없음

※ 금회 계약금액 변경에 따른 세부내역 : 붙임참조

❍ 변경사유

- 물품/공사 혼재계약(제작구매설치)에 따라 계약내역서상 공사부분에 반영된

미집행 제경비(퇴직공제부금비 210,504원) 감액에 따른 계약금액 변경

□ 향후계획

❍ 조달청 변경 계약(정산) 요청 후 준공검사 실시

붙임 : 변경(정산) 내역서 1부 . 끝.