문서번호	자전거정책과-12973
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

				시 민
주무관	자전거시설팀장	자전거정책과장		보행친화기획관
김근섭	권오정	代나형선		전결 12/03 마채숙
협 조

2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역

설계변경 검토보고

2020. 12

도시교통실

(자전거정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역

설계변경 검토 보고

「2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선  용역」관련 자전거도로 설계 시행물량 조정, 한강교량 자전거도로 설계반영 및 과업기간 연장 등 설계 변경에 대해 검토 보고 드림

□ 관련근거

○ 용역 과업 지시(자전거정책과-4211호,’20.4.6,-4726호 ’20.4.21,-6716호,’20.6.18)

- 한강교량(2개소) 자전거도로 설계 등 5건 과업 지시 (※붙임1: 세부 과업내용)

○ 용역 실정 보고 제출 (******제20-3434호, 2020.12.3)

- 과업 및 과업내역중 미시행 공정 조정

- 자전거도로 설계 과업 수행에 따른 비용 정산 반영

- 한강교량 자전거도로 설계 관련 과업기간(90일,’21.3.10) 연장 요청 등

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역

○ 용역기간 : *****************

○ 계약금액 : *********

○ 용역내용  : 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 안에 대한 기본 및 실시설계 등

○ 용 역 사 : ***************

□ 설계변경 주요사항

《설계변경 사항 》

① 과업 불필요 및 미시행 공정 조정 :************

- 자전거도로 설치계획 검토, 기본설계, 간단 자전거도로 실시설계, 자전거도로 실시설계, 측량비 공정 제외

② 과업 수행 결과 변경사항 반영 : **********

- 한강교량(6개소) 자전거도로 설치 기본구상

□올림픽대교, 영동대교, 양화대교, 성수대교, 동작대교, 양화대교, 가양대교

- 자전거 우선도로 시인성 개선(4.7㎞) 설계

□사직로, 삼일대로, 우정국로, 새문안로

- 노원구 온곡중학교 주변 개선 설계

- 성북천 및 청계천로 교차점 자전거횡단시설 설계

- 한강교량(2개소) 자전거도로 설치 기본 및 실시설계

□동작대교, 올림픽대교

과 업 내 용	연장(㎞)			산출금액 (천원)	비고
	기본구상	기본설계	실시설계
계				*******
1. 한강교량(6개소) 자전거도로 설치 기본구상	7.19	-	-	******	완료
2. 자전거우선도로 시인성 개선 설계	-	4.70	4.70	******	완료
3. 노원로 온곡중학교 주변 개선 설계	-	0.35	0.35	******	완료
4. 성북천-청계천로 자전거횡단시설 설계	-	0.12	-	*****	완료
5. 한강교량 자전거도로(2개소) 기본 및 실시설계	-	2.43	2.43	******	진행

③ 자문비 정산 및 보험료 조정*********

- 자문 및 주민설명회 정산(감 115천원)

- 손해배상보험료 조정(감 370천원)

《과업기한(준공기한) 연장》

○ 당    초 :******************************

○ 변    경 : *******************************

○ 연장사유

한강교량(2개소) 자전거도로 기본 및 실시설계 등 추가사업 및 서울지방경찰청 교통안전시설 협의와 심의 등 과업 완료를 위해 과업기간 연장 ********

《설계변경 총괄 내용》

구 분	변 경 내 용	비 고
계 약 금 액	당초 : *************(부가세 포함)	증 *****천원
	변경 : ************ (부가세 포함)
용 역 기 간	당초 : *****************************	증 90일
	변경 : *****************************

□ 조치계획

○ 위와 같이 설계 변경 시행하여 용역 추진에 철저를 기하고자 함

붙임  1. 과업지시 세부내용 1부↓.

2. 설계변경금액 증감내역 및 세부내역서 1부↓.

3. 용역사 실정보고 1부.

4. 변경 설계서 1부.  끝.

붙임1)

2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역

과업지시 세부내용

구 분	용역 과업지시 내용	규모	추진사항	비고
1	한강교량 자전거도로 설치가능 방안(기본구상) 검토	올림픽, 영동, 성수, 양화, 동작, 가양대교 자전거도로 설치	과업 완료
2	자전거 우선도로 시인성 개선 등을 위한 현장조사 및 설계도서 작성	사직로, 새문안로, 우정국로 삼일대로	과업 완료
3	노원로 온곡중학교 주변 자전거도로 현장확인 및 정비검토	노원로 온곡중학교 자전거도로 정비	과업 완료
4	성북천과 청계천로(북측)에 만나는 지점 횡단보도 설계	자전거횡단도, 신호등 포함	과업완료
5	한강교량 2개소(동작대교, 올림픽대교) 자전거도로 설치 실시설계	자전거도로 설치 기본 및 실시설계	기본 및 실시설계 중 ※ 한강교량 4개소 자전거도로 설치 투자심사서류 작성은 자체 추진으로 제외

붙임2)

설계변경 금액 증감내역 및 세부내역서

(금액:원)

공 종		규격	수량	단위	계	비 고
1. 자전거도로 사고다발지점 조사분석	당 초	15지점	1	식	16,897,410
	변 경	15지점	1	식	**********	*
2. 자전거도로 설치 계획 검토	당 초	6km	1	식	**********
	변 경	-	1	식	**	***********
3. 기본설계	당 초	5.4km	1	식	***********
	변 경	-	1	식	**	************
4. 자전거도로 실시설계(간단한 경우)	당 초	3km	1	식	**********
	변 경	-	1	식	**	***********
4. 자전거도로 실시설계	당 초	5.4km			***********
	변 경	-	1	식	**	************
5. 한강교량(6개소) 자전거도로 설치 기본구상	당 초	-
	변 경	7.19km	1	식	***********	*************
6. 자전거우선도로 시인성 개선	당 초	-
	변 경	4.70km	1	식	**************	*************
7. 노원로 온곡중학교 주변 개선	당 초	-
	변 경	0.35km	1	식	**********	************
8. 성북천-청계천로 자전거횡단시설 설계	당 초	-
	변 경	0.12km	1	식	**********	************
9. 한강교량(2개소) 기본 및 실시설계	당 초	-
	변 경	2.43km	1	식	***********	*************
10. 측량비	당 초	-	1	식	**********
	변 경	-	1	식	**	***********
11. 자문 및 주민설명회	당 초	-	1	식	***********
	변 경	-	1	식	**********	*********
소 계	당 초	-			**********
	변 경	-			**********	************
12. 제경비	당 초	-			************
	변 경	-			***********	***********
13. 기술료	당 초	-			***********
	변 경	-			***********	***********
14. 손해배상보험료	당 초	-	1	식	********
	변 경	-	1	식	********	*********
소 계	당 초	-			**********
	변 경	-			**********	***********
15. 순용역비	당 초	-			*************
	변 경	-			************	***********
16. 부가가치세	당 초	-			***********
	변 경	-			***********	*********
합 계(도급비)	당 초	-			************
	변 경	-			************	***********