문서번호	도로보수과-11344
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		이화신	12/10 고영준
협 조

『2020년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

설계변경(제2차) 검토 보고

2020 . 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『 2020년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부 』

설계변경(제2차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중에 있는『2020년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경(제2차-정산)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2020년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 과속방지턱 도색 1,000㎡, 교통부속물 설치 300경간

부속물 세척 11,000㎡, 도로표지병 설치 1,260개

○ 공사기간 : 2020. 03. 25. ~ 2020. 12. 31.

○ 도 급 액 :*************

○ 도 급 자 : ****************

Ⅱ		설계 변경 사유

○ 도로보수과-7367호(2020.08.18.) 작업지시(4차)에 따른 물량 증감

○ 도로보수과-10151호(2020.11.9.) 작업지시(5차)에 따른 물량 증감

○ 도로 및 교통 부속물 순찰 지적사항, 120 민원사항, 관할 경찰서 요청 사항에 따른 시공 물량 변경

Ⅲ		주요 변경내용

○ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구분		수 량		증·감
		당 초	변 경
총 공 사 비		448,450,000	447,790,000	감) 660,000
도급비	공급가액	319,563,764	369,400,000	증)49,836,236
	부가가치세	31,956,376	36,940,000	증) 4,983,624
	계	351,520,140	406,340,000	증)54,819,860
관 급 자 재 비		72,929,860	31,450,000	감)41,479,860
이 전 비		24,000,000	10,000,000	감)14,000,000

- 예산과목(도급비)

·(일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(336,000,000)

·(교통사업특별회계) 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,교통안전시설물관리, 교통안전관련 도로부속물 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(112,450,000)

○ 주요공종 변경 내역

연번	공종	규격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	과속방지턱 도색	수동식	㎡	3,500	3,518	증)	18
2	도로부속물세척		㎡	5,200	10,889	증)	5,689
3	교통부속물 설치	독립형	경간	570	786	증)	216
4	교통부속물 설치	연결형	경간	160	158	감)	2
5	교통부속물 철거		경간	740	884	증)	144
6	시선유도봉 설치	Φ200×80×750mm	개	40	49	증)	9
7	도로표지병 설치	일반(양면)	개	400	910	증)	510
8	옹벽 보수공	단면보수	㎡	0	105.41	증)	105.41
		표면보수	㎡	0	51	증)	51
		콘크리트열화단면제거	㎥	0	5.26	증)	5.26

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고 내용과 같이 물량 증·감 사항에 대하여는 설계변경(정산)시행하고 변경계약 체결 후 준공처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경(제2차) 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서(2회) 1부.

3. 제비율검증표 1부.  끝.