코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	지급자재(조경석) 계약변경 검토 보고

「고덕강일 공공주택지구 14단지 아파트 건설공사 조경석 조달구매」와 관련하여 변경사항이 발생하여 다음과 같이 검토·보고합니다.

1. 계약현황

가. 계 약 명: 고덕강일 공공주택지구 14단지 아파트 건설공사 조경석 조달구매

나. 업 체 명: ㈜백마산업개발

다. 계약금액: 8,075,910원

라. 납품기한: 2020. 12. 11.

2. 변경사유 : 단지 북서측 1401동 주변 녹지 단차 극복을 위한 조경석 물량 추가

3. 위치 및 현황사진

위치도	현황사진

4. 변경내용 : 계약금액 변경(증 1,520,310원)

규격	단위	단가	당초		변경		증·감		비고
			수량	금액(원)	수량	금액(원)	수량	금액(원)
400x500x600	ton	28,180	272.98	9,212,887	326.93	9,212,887	53.95	1,520,311
500x600x700	ton	28,480	6.67	189,961	6.67	189,962	-	-
600x700x850	ton	30,770	5.00	153,850	5.00	153,850	-	-
600x800x900	ton	32,940	1.2	39,528	1.20	39,528	-	-
합계(부가세 포함)			285.85	8,075,910	339.8	9,596,220	53.95	1,520,310

5. 행정사항 : 위 사항에 대하여 계약부에 계약 변경 요청

붙임  1. 어린이놀이터 특화 등 설계변경 검토 보고 1부

2. 변경내역서(조경석) 1부

3. 조경석 변경 요청 1부.  끝.

부 원						토목조경공사부장				건설사업처장	전결	11/25
		전기택						휴가			강홍극
협조자

시행			토목조경공사부-5182				(2020.11.25)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8943			전송	02-3410-8996		/	florany@i-sh.co.kr					/	비공개(5)