문서번호		신호처-4973		차장		팀장	처장		본부장
등록일자		2020.10.12.
									10/12
결재일자		2020.10.12.
공개여부		대시민공개
				협조	기획처 처장
방침번호		본부장-215
	『1 ~ 9호선 지능형 SMART 통합관제 구축』 추진 전담반 연장 운영 계획(안)
2020.10.
신 호 처 SMART통합관제구축추진TF

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	■	□
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	■	□
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

『1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축』

추진 전담반 연장 운영 계획(안)

1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 사업의 원활한 추진을 위해 【SMART통합관제구축추진TF】 조직을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1		관 련 근 거

□ 임시조직(TF) 운영지침

○『임시조직(TF) 운영지침 추진(안)』 기획처-2514호(‘17. 10. 13.)

□ 관제센터 통합 구축 추진계획 방침수립

○『1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획(안)』 신호처-1985(‘18. 5. 3.)

□ 관제센터 통합 구축 추진 전담반 운영계획 방침수립

○『1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진 전담반 운영계획(안)』

사장-20077호(’18. 6. 25.)

□ 관제센터 통합 구축 추진 전담반 2차 운영계획 방침수립

○『1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축 추진 전담반 2차 운영 계획(안)』

본부장-51호(’19. 03. 18.)

2		추 진 경 과

□ 지하철 관제센터 통합구축 타당성 조사 용역

○ ‘14.06.03. ~ ’15.01.28. : 서울공공투자관리센터(서울연구원)

□ 지하철 관제센터 통합구축 사업 이관

○ ‘17.03.14. : 서울시 → 舊)서울메트로

□ 시 투자심사 2단계심사(중앙투자심사 동시 진행)

○ ‘17.08.30. ~ ’17.11.20 : 조건부 추진

□ 지하철 통합관제센터 신축공사 설계용역 시행

○ 용역기간 : ‘18.08.07. ~ ’19.12.30.(완료)

□ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역 시행

○ 용역기간 : ‘19.08.05. ~ ’20.11.30.(진행중)

□ 군자기기 후생관 대체건물 설치공사 시행

○ 사업기간 : ‘19.12.27. ~ ’20.07.22.(완료)

□ 4호선 노후관제설비 개량공사 시행

○ 사업기간 : ‘20.06.25. ~ ’21.08.19.(진행중)

3		사업개요

□ 사업명 : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축

□ 위  치 : 군자차량기지 후생관 및 창고부지

□ 대지면적 : 11,311㎡

□ 규  모

○ 건축 : 지하2층~지상6층(건축면적 5,199㎡, 연면적 28,036㎡)

○ 시스템 : 1~9호선(신호, 전력, 통신, 설비, PSD, 검수 등) 관제 설비

○ 사업비 : 239,131백만원

○ 사업기간 : 2017. 3 ~ 2024. 12

□ 추진목표

○ 공간적, 기능적 통합으로 상호 유기적 지원 관리 및 중복업무 방지

○ 분야별 열차운행 정보를 관제사에게 통합 제공하는 지능형 관제 구축

4		추진 전담반 연장 운영 필요성

□ 용역계약기간의 1차 및 2차 연장에 따른 지속적 업무 수행 필요

○ 통합관제 시스템구축 설계용역 계약기간 변경내용

용역명	계약기간
	최초	1차 변경	2차 변경
1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역	2019. 08.05. ~ 2020. 05.30. (300일)	2019. 08.05. ~ 2020. 08.28. (390일), 연장90일	2019. 08.05. ~ 2020. 11.30. (484일), 연장94일
	※ 변경(연장) 사유 ‐ 1차 변경 : COVID-19 감염병 지역 확산 차단을 위한 고 강도 사회적 거리두기 캠페인 국가적 시행에 (3.22.~5.5. 45일간) 따른 서울시 설계VE (경제성 심사) 지연 ‐ 2차 변경 : 5차례의 공사 임원회의를 통한 설계내역 변경 및 추가 요구사항 발생

□ 설계용역 완료 후 시공단계 발주를 위한 사전업무 및 사업관리 필요

○ 사업 진행 과정 특성상 시공단계부터 사업규모 대폭 확대

○ 시공단계 발주업무 및 사업관리를 위한 조직 필요

○ 사업추진 절차

구분	일반적 절차	통합관제 구축 사업
		시행사항	시행주체
계획단계	①사업구상	· 추진계획 수립(’13.07.16.) · 타당성조사 용역 (‘14.06.03.~’15.01.28.)	서울시
	②예비타당성 조사
	③타당성 조사
	④기본계획
건설단계	⑤기본설계	· 신축공사 설계용역【완료】 (‘18.08.07.~’19.12.30.) · 시스템구축 설계용역【진행중】 (‘19.08.05.~’20.11.30.)	서울교통공사
	⑥실시설계
	⑦시공	향후
	⑧시운전
운영단계	⑨운영 및 유지보수

5		운영계획

□ 조 직 명 : SMART 통합관제 구축 추진 T/F

□ 운영기간 : 2020. 4. ~ 2021. 3. (1년)

(※ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축 사업 완료 시 까지 임시조직 연장 운영 예정)

○ 지난 1년 운영성과

- 통합관제센터 신축공사 설계용역 완료 (‘18.08.07. ~ ’19.12.30.)

- 군자기기 후생관 대체건물 설치공사 완료 (‘19.12.27. ~ ’20.07.22.)

- 통합관제 시스템구축 설계용역 시행 (‘19.08.05. ~ ’20.11.30.)

- 4호선 노후관제설비 개량공사 시행 (‘20.06.25. ~ ’21.08.19.)

□ 주요업무

○ 통합관제 구축 관련 시스템 분야 설계, 발주, 계약, 공정 등 관리

○ 통합관제센터 중·장기 운영 계획 수립 및 시스템 운영 표준화 마련

○ 통합관제 구축 사업 관련 각종 행정사항(예산 등) 관리

□ 조직구성

○ 기 운영조직(SMART 통합관제 구축 T/F) 연장

○ 발령사항 종료 도래시점에 인사처에 인사내신 요청 예정

○ TF 구성원 : 12명(전임 6명, 겸임 6명)

연번	소속	성명	사번	직위(직급)	발령사항	비고
1	신호처	오구식	21703813	팀장(3급)	‘18.07.01.~별도명령시까지	전임 (파견)
2		이창용	21707040	차장(4급)	‘20.04.01.~‘21.03.31.
3		장현철	21710630	차장(4급)	‘18.08.20.~별도명령시까지
4		김용성	21713257	과장(5급)	‘20.04.01.~‘21.03.31.
5		김경명	21714142	과장(5급)	‘20.01.15.~‘21.01.14.
6		조성연	21717460	주임(7급)	‘20.01.15.~‘20.12.31.
7	건축처	김대우	21704247	부장(3급)	‘20.04.01.~‘21.03.31.	겸임
8		김민영	21713630	과장(5급)
9	종합 관제단	김성곤	21705262	부장(3급)
10		양인석	21705149	부장(3급)
11		오성효	21705799	부장(3급)
12	하남기술센터	홍광표	21706245	소장(3급)

6		결 론

「1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축」 사업의 전담반 조직(SMART 통합관제 구축 추진 T/F) 연장을 통해 본 사업을 지속적으로 추진 및 사업관리함으로서 통합관제 구축사업에 만전을 다하겠습니다.

붙임 : 1. 1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획(안) 1부

2. 1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진 전담반 운영계획(안) 1부

3. 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축 추진 전담반 2차 운영 계획(안) 1부

4. 설계변경(계약기간 연장) 시행 보고 1부

5. 설계변경(계약기간 및 계약금액) 시행 보고 1부

6. 인사발령사항 1식.  끝.