등록번호

스마트정보과-7867

주무관

공공데이터관리팀장

스마트정보과장

도시재생국장

등록일자

2020.12.14.

신사라

정병훈

김용신

12/15

박성주

결재일자

2020.12.15.

공개구분

부분공개(5)

협  조

예산팀장

기민희

계약팀장

이향란

- 2020 서대문구 사회조사 -

사업예산 사고이월 계획

서 대 문 구

스마트정보과

- 2020 서대문구 사회조사 -

사업예산 사고이월 계획

「2020년 서대문구 사회조사」 사업 추진 중 코로나19로 인한 방역활동 강화로 본조사 일정을 기 연기 시행한바, 연내 사업기간 부족으로 인하여 부득이하게 사고이월 조치하여 사회조사 최종보고서 작성 및 공표를 완료하고자 함

Ⅰ	관련근거

□ 스마트정보과-2607호(「2020 서대문구 사회조사」본조사 추진일정 연기 검토 보고/2020.8.26.)

□ 스마트정보과-3651호(서대문구 사회조사 재시행 추진/2020.9.18.)

□ ㈜케이스텟리서치( 2020 서대문구 사회조사 용역 계약기간 연장요청 /2020.11.19.)

□ 스마트정보과-6724호(사회조사 용역 준공기한 연기 검토보고/2020.11.23.)

□ 스마트정보과-7014호(사회조사 용역 준공기한 연장 시행/2020.11.27.)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : 2020 서대문구 사회조사(제2회)

□ 계약기간 : 2020. 4. 24. ~ 2020. 1. 25.

□ 계약금액 : 101,200천원

□ 계약업체 : ㈜케이스탯리서치

□ 주요 과업내용

- 서대문구 사회조사 사회지표 설계 및 개발
- 모집단 및 표본추출 대상 설계
- 행정자료조사 및 사회조사(가구면접) 실시

- 분석결과 보고서 및 배포용 자료 발간

Ⅲ	추진경과

□ ’20.4.24.~4.29.  : 용역계약 및 과업 착수

□ ’20.5.04.~7.22.  : 사회조사 지표 발굴 및 검토

□ ’20.7.28.~8.24.  : 통계청 검토, 표본추출 및 대체표본 설계

□ ’20.8.26.~8.27   : 본조사 추진일정 연기 및 통보 (당초 9.1~9.15)

□ ’20.9.18.          : 본조사 재시행 추진계획 수립 및 통보

□ ’20.9.23.          : 선금 지급 승인 (금40,480천원)

□ ’20.9.29.          : 통계청 최종승인

□ ’20.10.10.~11.10. : 본조사 실시 및 완료 (당초대비 56일 지연)

※ 사회적거리 2단계 유지에 따른 조사기간 변경 및 기간 연장 조치

□ ’20.11.30.  : 준공기한 연기(지연일수 56일 연기)

구 분	당 초	변 경	연기일수
용역기간	2020. 4. 24. ~ 2020. 11. 30.	2020. 4. 24. ~ 2021. 1. 25.	56일
계약금액	101,200천원	101,200천원	변동없음

□ ’20.12.10.   : 기성준공(금40,720천원 /공정율 81% )

Ⅳ	사고이월 개요

□ 발주현황

- 계 약 일 자 : 2020.4.24.

- 준공예정일자 : 2021.1.25.

(단위:원)

계약명	계 약 금	선금지급액	기성금지급액	이월예산	비 고
2020 서대문구 사회조사	101,200,000	40,480,000	40,720,000	20,000,000	사고이월

○ 예산과목

정책사업 : 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영

단위사업 : 정확한 통계관리

세부사업 : 통계조사 및 서비스 제공

편 성 목 : 연구개발비

통 계 목 : 연구용역비

○ 사고이월사유

조사실시 예정기간 중 코로나19 방역강화로 강화된 사회적거리두기 2단계 격상 등으로 사실상 조사자체가 불가능 하였으며, 조사완료 후 조사분석 및 통계보고서 작성까지 최소 60일이상 소요되는 점을 고려하여 조사결과 완료 및 공표까지 사고이월이 불가피

Ⅳ	추진일정 및 향후계획

□ 2021. 1. 25. 최종 조사 보고서 공표 및 용역 준공.

붙임  1. 사고이월요구서 1부.
2. 세부사업별명세서 1부.  끝.