문서번호	설비부-20526
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		代김두환	12/16 이달영
협 조

『서울시네마테크 건립 전기공사』

관급자재(경관조명 외 2종) 납품기한 연장 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『서울시네마테크 건립 전기공사』

관급자재(경관조명 외 2종) 납품기한 연장 검토 보고

본 공사에 소요되는 관급자재(경관조명 및 비상발전기, 무정전전원장치)의 설치가 당초 계약기간내에 불가능하여 납품기한을 준공예정일인 `22.3월까지 연장하고자 검토 후 보고 드림.

***********************************

**************************

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「물품 다수공급자계약 특수조건」제26조(납품기한의 연장)제2항, 제4항

- 납품기한 2회에 한하여 연기 가능(회당 연장기간은 정상 납품기한 이내)

- 납품기한 추가 연기 필요시 납품요구 취소 후 새로운 납품요구 지시

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 서울시네마테크 건립 전기공사

◌ 공사위치: 서울특별시 중구 마른내로 38

◌ 공사규모: 지하3층/지상10층 4,806.11m2

- 주요설비: 수변전설비(특고압22.9kV), 950KVA), 비상발전기(500kW)설비, 자동제어(전력,조명)설비, 동력설비, 전열설비, 조명설비 등

**************************************************

***********************************************************

***************************

*********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 관련공문

◌ LED 경관조명기구 계약해지 및 재계약 체결 요청 검토 보고

- 근정시네 제2020-216(2020.12.16.)호

◌ 비상발전기 계약해지 및 재계약 체결 요청 검토 보고

- 근정시네 제2020-217(2020.12.16.)호

◌ 무정전전원장치 납품일정 변경 검토 보고

- 근정시네 제2020-218(2020.12.16.)호

□ 관급자재 계약현황

◌ 계약건명: 서울시네마테크 건립 전기공사 LED경관조명기구 구매

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명(규격, 수량)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한	비 고
*********** *****************)	**** *****************	****	**********	***********	***** **

◌ 계약건명: 서울시네마테크 건립 전기공사 비상발전기 구매

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명(규격, 수량)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한	비 고
********** *****************)	***** ********	**********	**********	***********	***** **

◌ 계약건명: 서울시네마테크 건립 전기공사 무정전전원장치 구매

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명(규격, 수량)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한	비 고
*********** ******************	******* ***********	****** ****	**********	***********	**** **

□ 납품기한 연장사유

◌ 선행공정인 건축공사가 현장 인접건물 안전확보를 위한 정밀안전 진단실시 등으로 지연되어 전기공사의 공정상 현재 계약일까지 자재의 설치가 불가능하기에 준공일인 `22.3월까지 연장 필요

□ 납품기한 연장검토

◌ ***************************

- 「물품 다수공급자계약 특수조건」(조달청공고 제2020-206호)제26조제2항에 따라 납품기한을 2회(회당 납품기한 연장기간은 규정상 납품기한 이내)에 한하여 연기 가능

- 같은조 제4항에 따라 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 추가 연기할 필요가 있는 경우 해당 납품요구를 취소하고, 새로운 납품요구를 지시할 수 있음.

- 따라서 기존계약 해지 후 재계약을 하는 것이 적정함

◌ **********************

- 3자단가계약으로 구매한 제품은 준공일까지 계약기간 연장 가능

- 지체상금 부과여부: 미부과

Ⅳ		관급자재 재구매 계획

□ 재구매 대상: LED경관조명 및 비상발전기

□ 재구매 방법: 조달구매(다수공급자계약)

□ 납품기한: 2023. 3. 31.

□ 재구매 세부내역

품 명	물품식별번호	세부품명(규격)	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고
****	********	********* ****************	*	**	*******	*********
	********	********* ****************	*	***	*******	**********
	********	********* ***************	*	*	*******	*********
*****	********	***** *************	*	*	**********	**********

붙임  건설사업관리기술단 공문 3부.  끝.