문서번호		보건위생과-23612		★주무관		보건행정팀장		보건위생과장		보건소장
결재일자		2020.12.21.
				이주희		남정우		이우칠		12/21 이인영
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
					계약팀장		조기곤
					예산팀장		한경아
	- 보건소 창호교체 공사 - 미집행 예산 사고이월 계획
2020.12.21.
강 북 구 (보건위생과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

- 보건소 창호교체 공사 -

미집행 예산 사고이월 계획

국토교통부에서 추진하는 그린리모델링 사업에 보건소 창호 및 냉난방기 교체 공사가 선정되어 국·시비가 지원됨에 따라 창호교체 공사 확정내시 일부를 사고이월 하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 지방재정법 제50조(세출예산의 이월)

□ 2020년 회계연도 사고이월 추진계획

Ⅱ		사업개요

□ 위    치: 강북구 한천로 897

□ 사업규모: 지하1층~지상4층, 보건소 창호 및 냉난방기 교체

□ 사업기간: 2020. 6월 ~ 2021. 6월

□ 총사업비: 757,845천원(국비 378,923 / 시비 265,246 / 구비 113,676)

□ 추진경위

○ 2020. 6월~9월 : 보건소 창호 교체공사 추진

○ 2020. 7월: 국토교통부 그린리모델링 사업 신청

○ 2020. 8월: 창호 및 냉난방기 교체 공사 그린리모델링 사업 선정

○ 2020.10월: 국비보조금 교부 및 간주처리

※ 당초 구비(471,914천원)만으로 창호교체 공사를 추진하였으나 공사추진 중       국토교통부 그린리모텔링 사업에 선정되어 냉난방기 교체공사를 추가 함

Ⅲ		예산상황

(단위:천원)

구 분	당초예산 (구 비)	변 경 예 산				집행잔액 (구 비)
		합 계	국 비	시 비	구 비
창호 교체	471,914	471,900	235,950	165,165	70,785
냉난방기 교체	0	285,945	142,973	100,081	42,891
합 계	471,914	757,845	378,923	265,246	113,676	358,238

※ 예산 매칭 비율 : 국비 50%, 시비 35%, 구비 15%

Ⅳ		사고이월 내역

□ 이 월 액: 265,246천원(시비)

□ 세부내역

(단위: 천원)

사 업 명	통계목	사 고 이 월 액
		계	시 비	구 비
창호 및 냉난방기 교체 공사	시설비 및 부대비	265,246	265,246	0

□ 이월사유

○ 2021년 1월중 시비보조금 교부가 예정되어 있어 자금없는 이월을 추진함

□ 예산과목

○ 행복한 건강도시 조성, 보건소 환경개선 및 업무지원, 청사관리, 시설비

Ⅳ		향후계획

□ 2021. 1월 : 시비보조금 교부

□ 2021. 4월 ~ 6월 : 보건소 냉난방기 교체 공사 추진.  끝.