문서번호	설비부-8423
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		代김은덕	07/31 박기형
협조

준공(납품)기한 연기 검토보고

- 장충체육관 리모델링 기계설비공사, 지열설비공사 및 관급자재 5종 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

준공(납품)기한 연기 검토보고

장충체육관 리모델링 사업계획 변경에 따른 선행공정(건축공사) 공사기간이 연장되어 후속 공정(기계설비공사,관급자재)에 대한 준공(납품)기한 연기 검토보고임

□ 관련근거

○ 장충체육관 기계설비공사 준공기한 연기 검토 보고(JCR14-228, ‘14.7.30)

○ 관급자재 납품기한 연기 검토 보고(JCR14-225, ‘14.7.30)

□ 공사개요

○ 규    모 : 지하2층/지상3층(연면적 11,429㎡), 기계 및 소방설비 1식

○ 공사기간 : 총차 `12.7.5 ~ `14.8.31.(2차 ` 13.12.2 ~ ‘14.8.31)

○ 공 사 비 : 3,180,515천원(기계설비공사)

○ 관급자재 : 자동제어 등 5종

○ 시공/감리 : ㈜수정이엔씨/펨코엔지니어링 외 1개사

□ 검토내용

○ 연기사유 : 사업계획 변경에 따른 선행공정(건축공사) 공사기간이 연장(122일)되어 후속 공정(기계설비공사, 관급자재) 기한 연기

※ 건축공사 준공기한 연기 : ‘14.8.31 → ’14.12.31

○ 연기내용

건 명	계약금액(원)	준공(납품) 기한		비 고
		당 초	변 경
장충체육관 리모델링 기계설비공사(총차, 2차)	3,180,515,000	2014.08.31	2014.12.31	증122일
장충체육관 리모델링 지열설비공사	369,564,460

건 명	계약금액(원)	준공(납품) 기한		비 고
		당 초	변 경
자동제어 설비 구매	319,145,200	2014.08.31	2014.12.31	증122일
T.A.B 용역	47,890,000
에스컬레이터 구매	216,864,000
엘리베이터 구매	98,354,776
무대기계장치 구매	226,500,000

※ 계약금액 변동없음

○ 지연배상금 : 미부과

□ 조치의견

○ 선행공정(건축공사) 공사기간 연장으로 후속 기계설비공사 준공 및 관급자재 납품기한 연장이 불가피한 사항으로

○ 원활한 사업추진을 위하여 검토내용과 같이 준공기한을 연기코자함

□ 행정사항

○ 경리부서(본청 재무과)에 준공기한 연기 의뢰

붙임 : 1) 책임감리원 준공기한 연기 검토서 2부. 끝.