문서번호	투자창업과-12742
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	창업정책팀장	투자창업과장

서울창업허브 창동 특화공간 조성 등 예산 사고이월 검토보고

2020. 12.

경제정책실

(투자창업과)

서울창업허브 창동 특화공간 조성 등 예산 사고이월 검토보고

서울산업진흥원의「서울창업허브 창동」특화공간 조성(지하1층~2층) 및 센터 비품구매 등 관련 예산 사고이월 승인요청에 대하여 검토보고 드림

□ ’20년도 사업 예산현황

○ 사 업 명 : 동북권 창업센터 운영

○ 예 산 액 : 총 2,548,000천원

- 민간위탁금 825,000천원, 민간위탁사업비 1,723,000천원

□ 요청내역

○ 사고이월 요청액 : 1,107,000천원(민간위탁사업비)  ※ 세부내역 붙임 참조

(단위 : 천원)

예 산 과 목 및 내 역		예 산 액	사업비 교부액	사고이월 요청액
계		1,723,000	1,723,000	1,107,000
시설비 및 부대비, 지급수수료	내부 인테리어 시공	1,166,827	1,166,827	1,000,000
자산취득비, 지급수수료	스튜디오 및 센터운영 집기 구매	556,173	556,173	107,000

□ 요청사유

○ 서울창업허브 창동 운영을 위한 내부 인테리어 공사 및 집기구매(스튜디오 및 센터운영 집기 등)의 연내 종료가 불가하여 기 교부된 수탁사업비(민간위탁사업비) 중  일부 사고이월 요청

□ 검토의견 : 승   인

○ 스타트업의 스케일업 지원(마케팅&판로지원+글로벌 진출) 복합공간으로의 기능 수행을 위한 특화공간 조성과 센터 개관에 따른 운영 집기 구입을 위한 사안임

○ 준공 통보(도기본, ’20.11.13.)와 재산관리관 지정 방침수립(’20.12.7., 동북권사업과) 지연으로 인한 불가피한 사유로 회계연도 내 지출원인행위를 하고 해당 연도 내 지출하지 못한 경비에 해당하므로 사고이월 승인 조치

□ 향후계획

○ 사고이월 승인 통지(투자창업과→SBA)	: ’20.12.24.

○ 사고이월 예산 집행 후 정산 보고(SBA→투자창업과)	: ’21.4.15.까지

붙    임 : 2020년 동북권 창업센터 운영(창업고도화센터) 사고이월 예산 세부내역 1부.