심 의 결 과 서

1. 의안번호 : 제2020-05호

2. 의결주문

○ 서울시의 건설 일용직 근로자의 고용환경 개선과 사회보장 강화를 위한 고용개선지원비의 공사원가 반영방침과 관련하여 승강장안전문 고정문 등 개량공사 계약의 건설일용직 근로자의 고용개선지원비의 지급 및 물량추가에 따른 설계변경 예정에 따라 승강장안전문 고정문 등 개량공사에 필요한 예산을 낙찰차액(305백만원)으로 사용하여 시행한다.

3. 예산조정

(단위: 백만원)

사업명	부서명	예산과목	예산액 (A)	예산실적 (B)	예산잔액 (A-B)	증 감(C)		조정후 예산액 (A+C)	비고
						증	감
승강장안전문 비상문 개선	공간 사업처	자본적지출/유형자산/선로설비	6,115	5,650	465	-	-	6,115

※ 예산잔액 중 낙찰차액 사용으로 예산 증감 내역 없음

○ 낙찰차액 사용 : 공사 낙찰차액 305,825,894원 중 305,000,000원

구분	내역	소요예산(원)
계		305,000,000
승강장안전문 개량 공사	물량증가 관련 인건비 등	72,280,000
	주휴수당	130,720,000
폐기물처리용역	물량 및 실계측량 증가분	102,000,000

2020년  12월  11일

예산집행심의위원회위원장