“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신자	정수과장
(경유)
제 목	변경계약체결[1정수장 활성탄 굴상,포설공사]보고 및 통보

1. 정수과-14896(2020.12.17.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 1정수장 활성탄 굴상,포설공사

나. 변경사유 : 물량 증감에 따른 설계변경

다. 계약업체 : ㈜수인엔지니어링

라. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2020.04.02.	2020.04.03.~ 2020.12.24	123,585,300	2020.12.17.	2020.04.03.~ 2020.12.24	115,807,000

붙 임 : 계약체결서류 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	이민제		영등포아리수정수센터소장	12/17 권선조
협조자
시행	행정관리과-14293	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터	/
전화	3146-5611	/전송	3146-5691	/	jungeunpk@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)