문서번호	도시철도토목부-13626
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		최진규	12/18 최병훈
협조	주무관		서재원
	주무관		유원하

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토보고(총괄7회)

2020. 12.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄7회)

『하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련 준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 보고임. ※ ㈜대한콘설탄트 대한(건본)제2020-07호(‘20. 12. 17.)

1		책임감리 용역 현황

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계약금액 : 금2,709,328천원

○ 용역기간 : ‘15. 3. 13 ~ ‘20. 12. 31

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

□ 용역계약 현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	1~5차(준공)	6차(준공예정)	비고
용역기간	‘15.3.13 ~‘20.12.31	‘15.3.13 ~‘17.12.31	‘18.2.14 ~‘20.12.31
용역비	2,709,328	1,521,101	1,188,227

2		건설관리사업단 보고 내용

□ 준공기한 연기 및 계약금액 조정 검토 내용

○ 변경 사유

- 본 공사 절대공기 부족에 따라 건설사업관리용역 준공기한 연기

․공사 준공기한 연장 : 입출고선 잔여구조물 완공시기까지(2020.12. → 2021.6.)

○ 건설사업관리용역(총괄7회) 변경 현황

구 분			당 초	변 경	증․감	비고
총괄 7회	계약 금액		2,709,328,000	2,843,866,000	증)134,538,000
	계약 기간		‘15.03.13. ~ ’20.12.31.	‘15.03.13. ~ ’21.06.30.	증)181일
	투입 계획	특급	‘15.3.13. ~ ‘18.6.21.	변경없음	완료
		고급	‘15.10.13. ~ ‘18.6.21.	변경없음	〃
		고급	‘18.6.22. ~ ‘19.4.30.	변경없음	〃
		중급	‘16.10.7. ~ ‘19.4.20.	변경없음	〃
		초급	‘17.10.7. ~ ‘17.12.22.	변경없음	〃
		초급	‘18.7.1. ~ ‘18.12.31.	변경없음	〃
		중급	‘19.5.1. ~ ‘20.12.31.	‘19.5.1. ~ ‘21.5.31.	증)5개월
		초급	‘15.10.13. ~ ‘20.12.31.	‘15.10.13. ~ ‘21.6.30.	증)6개월

3		조치 계획

○ 상기 건설사업관리단 보고내용과 같이 용역기간 연장 및 건설사업관리기술자 투입계획을 조정하여 아래와 같이 설계 변경 추진코자 함.

- 설계변경 현황(총괄7회)

(단위 : 천원)

구 분	용역비			계약기간			비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경	증감
총괄 7회	2,709,328	2,843,866	증)134,538	‘15.3.13 ~‘20.12.31	‘15.3.13 ~‘21.6.30	증)181일

붙 임   건설사업관리단 검토의견 및 설계변경 내역서 각1부.  끝.