문서번호	도시철도토목부-14082
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	토목2과장	도시철도토목부장
김민수	代안상훈	12/30 최병훈

『진접선 2공구 차량기지 건설공사』휴무일 작업계획계획 승인 검토[’21년 1월]

2020. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선 2공구 차량기지 건설공사』

휴무일 작업계획계획 승인 검토 [’21년 1월]

『진접선 2공구 차량기지 건설공사』 관련 ’21년 1월 휴무일 작업계획 승인 요청에 대하여 보고 드림

□ 휴무일 작업승인 요청내용

○ 근  거 : 서현감 차량기2공구 2020-746호(2020.12.30.)

○ 작업일 : 5일 [1/2(토), 1/9(토), 1/16(토), 1/23(토), 1/30(토)]

→ 대체휴무 실시

□ 휴무일 작업계획

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
1월 2일 (토)	진입도로	깍기부옹벽 1단 어스앵커 인장, 토공 뒷채움	***	*** *** *** *** ***
	차량기지	동정길 현장관리
1월 9일 (토)	진입도로	깍기부옹벽 2단 어스앵커 인장, 토공 뒷채움	***	*** *** ***
	차량기지	동절기 현장관리 개천내기 #8 작업준비 차량기지 벌개제근
1월 16일 (토)	진입도로	깍기부옹벽 3단 기초 거푸집 조립, con’c 타설	***	*** *** *** *** *** ***
	차량기지	동절기 현장관리 개천내기 #8작업준비 차량기지 벌개제근
1월 23일 (토)	진입도로	깍기부옹벽 3단 어스앵커 인장, 토공 뒷채움	***	*** *** *** ***
	차량기지	동절기 현장관리 개천내기 #8 작업준비 차량기지 벌개제근
1월 30일 (토)	진입도로	깍기부옹벽 4단 기초 거푸집 조립, con’c 타설	***	*** *** *** *** *** *** ***
	차량기지	동절기 현장관리 개천내기 #8 작업준비 차량기지 벌개제근

□ 건설사업관리단 검토의견

❍ 휴(무)일작업 귀책 검토

작업일시	귀책 사유	의견			관리단 검토의견
		시공사	감리단	발주청
‘21.01.02(토), ‘21.01.09(토), ‘21.01.16(토), ‘21.01.23(금), ‘21.01.30(토) 08:00~17:00	시공사	◯	◯		[관련규정] - 공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업) - 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업) - 건설사업관리 과업내용서6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리 대가 지급 * 예정공정계획에 따른 휴일작업으로 휴일근무에 대한 건설사업관리대가는 대체휴무로 시행함.
	감리단
	발주청

❍ 검토의견

- 공사의 원활한 공정추진을 위하여 휴(무)일작업 주요내용은 깍기옹벽부 패널식 옹벽 설치, 차량기지 벌개제근, 개천내기 #8 작업준비이며, 야간작업은 없음.

- 휴(무)일 작업계획 : 1/2(토), 1/9(토), 1/16(토), 1/23(토), 1/30(토)

- 공사계약 일반조건 5절 6항(휴일작업과 야간작업), 공사계약 특수조건 제15조(휴일작업과 야간작업), 건설사업관리 과업내용서 6.3(휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거, “휴일작업으로 인하여 발생되는 추가비용은 계약상대자가 부담한다”는 규정이 있으나 진접선 차량기지 2공구 건설공사는 예정공정계획에 따라 진행되고 있으므로 건설사업관리단 근무자에 대한 건설사업관리대가는 대체휴무로 시행코자 함

□ 휴무일 작업계획 검토결과

❍ 관련근거

- 과업내용서 6.3.2. (1) 휴일 및 야간근무

- 『서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업)』

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ’13.11.14.)

❍ 휴무일작업 사유

- 2020.12.30. 휴무일 작업계획서 승인요청(서현감 차량기2공구 2020-764호)

※ 공사의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일작업 시행이 필요함에 따라 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ’13.11.14.)에 의거 토요일 근무는 대체휴무로 승인코자 함

□ 조치의견

○ 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사의 휴무일 작업(2020.12.30.)요청에 대해 아래의 조건으로 승인함

가) 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고

나) 화재발생 방지를 위하여 용접 등 발화위험이 있는 작업은 불꽃 방지막 설치 및 소화기 비치 후 시행

다) 보도에서 작업 시 작업관리자, 교통정리원, 신호수를 배치하여 안전사고 방지

라) 출퇴근 시간대 차도 점용을 금지하고 교통정체가 최소화 될 수 있도록 작업을 시행하고 윙카 등 야간 안전유도 표지판 등 관리 철저

마) 감전사고 및 중량물 낙하사고 방지를 위하여 현장점검 철저

바) 지장물 및 지반이상 징후 점검을 철저히 하고 보차도 및 공사장 인근 지반침하 발생여부 확인 철저

사) 구조물 개구부 추락사고와 고소작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락사고가 발생하지 않도록 상시 점검 및 확인하고 안전확보 후 작업 시행

아) 강우 및 강설 시 가시설 배면, 지하매설물 접속부 등 취약지역 순찰강화 및 배수로 정비 확행

자) 폐기물 발생 시 지정 장소로 처리 및 관리 철저

차) 공사로 인한 시민생활 불편이 최소화 되도록 현장관리 철저

카) 상주 건설사업관리기술자 운영계획[도시철도토목부-12322호(2019.11.27.)]에 따라 시행 철저

파) 코로나 19 확산방지를 위해 가이드라인 및 지침을 전달하오니 현장관리 철저히 하기 바람

붙임  휴일 작업계획 승인 요청 공문 1부.  끝