				★차장			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-19252
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2020.12.22.
공개여부		공개
「2020년 서울시립승화원」 화장로설비 기능보강 구매설치 준공정산 완료 보고
			2020. 12
						추모시설운영처

「2020년 서울시립승화원」

화장로설비 기능보강 구매설치 준공정산 완료 보고

서울시립승화원의 안정적 화장업무 수행 및 유지관리를 위해 시행한「2020년도

화장로설비 기능보강 구매설치」의 완료 보고 임.

* 관련근거: 2020년 서울시립 장사시설 화장로설비 기능보강 시행 및 발주계획 보고(추모-130, 2020.1.3.)

□ 2020년 화장로설비 기능보강 구매설치 내용

○ 건    명 : 2020년 서울시립승화원 화장로설비 기능보강 구매설치

○ 계약기간 : 2020. 1. 22  ～ 12. 31

○ 계약업체 : 합자회사 세화산업사 대표이사 원용식

○ 계약금액 : 금5,048,095,000원

○ 준공금액 : 금4,942,981,000원

○ 기능보강(교체 및 정비) 주요 내용

연번	정 비 내 용	단위	계약수량	정비수량	진행율
1	화장로 주연소로 내화물 교체	기	9	9	100%
2	화장로 재연소로 내화물 교체	기	9	9	100%
3	화장로 주연소로 세라믹모듈 교체	기	23	23	100%
4	여과집진기 교체	기	6	6	100%
5	여과집진기 백필터 교체	기	23	23	100%
6	유인배풍기 교체	대	3	3	100%
7	가스냉각기 청소 정비	회	92	92	100%
8	유해가스 촉매교체	기	10	10	100%
9	다이옥신 촉매교체	EA	603	603	100%
10	화장로 배출가스처리설비 개선 설치	기	7	7	100%
11	관운반 전동대차 교체	대	2	2	100%
12	현장제어반 교체	면	23	23	100%

○ 화장로설비 계통도 및 주요 정비 부위

1

2

3

4

5

6

7

8

7

9

10

11

12

검 사 사 진

□ 기능보강 구매설치(교체 및 정비) 완료 검사 결과

○ 검사일시 : 2020. 12. 21.~22.

○ 검 사 자 : 설비4급 한승호, 조남길

○ 검사내용 및 결과

- 실물량 정산(재연소로 내화물, 기계실 방풍셔터)

- 이 외에 계약이행 여부 등 확인결과 이상 없음

□ 준공정산 내용

○ 계약내역 실물량 정산

공 종	정 산 내 용	직접비 증감(천원)
화장로 재연소 내화물 교체(9기)	내화벽돌(230*230*65): 52.7매→41.2매(기당) 몰탈(SK38): 216.57kg→206.53kg(기당)	(감) 3,265
화장로 기계실 방풍셔터 교체	알미늄전동셔터: 24.41㎡ → 17.7㎡	(감) 1,073

○ 제경비 실사용에 따른 정산

연번	구 분	계 약 금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증ㆍ감
1	건강보험료	39,123,005	30,493,936	(감) 8,629,069
2	국민연금	52,789,662	34,261,160	(감) 18,528,502
3	노인장기요양보험료	4,010,108	3,069,887	(감) 940,221
4	환경보전비	8,682,231	0	(감) 8,682,231
5	산업안전보건관리비	45,581,717	33,103,464	(감) 12,478,253
6	퇴직공제부금비	26,981,382	0	(감) 26,981,382
	계	177,168,105	100,928,447	(감) 76,239,658

○ 준공정산 금액

구 분	계 약 금 액(원)			비고
	당 초	준공정산	증‧감
공급가액	2,848,274,271	2,752,716,089	(감) 95,558,182
지급자재	1,660,642,113	1,660,642,113	0
예비자재	80,260,888	80,260,888	0
부가가치세	458,917,727	449,361,909	(감) 9,555,818
총 원가	5,048,095,000	4,942,981,000	(감) 105,114,000

붙임 : 준공 사진 및 준공정산 내역서 각 1부.  끝.