문서번호	자치행정과-1040		주무관			자치행정팀장			자치행정과장	행정국장
결재일자	2021.1.15.
			지은이			신수경			최환봉	01/15 인산
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호
				상도제3동장				주선이

상도3동 주민센터 승강기 교체공사 계획

□ 대    상 : 상도3동 주민센터(성대로2길11)

□ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 4월

□ 사업내용 : 승강기 교체(1대, 13인승)

□ 추진방법 : 조달구매(관급자재)

□ 소요예산 : 74,588천원(전액구비)

□ 예산과목 : 자치행정기반 강화, 동 주민센터 관리, 동청사 시설관리, 시설비및부대비, 시설비

행   정   국

자 치 행 정 과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(승강기안전관리법)
사업추진 유형	■		신규사업							□	기존사업
	■		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(74,588천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		■		( 상도3동 주민 )					무	□	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
코로나 영향분석	○		영향유무	:	유		■		(공사 관계자 및 인력 시설 출입)					무	□	보건소 협조 ( )
	▪		위험요인 : 행사·집합 □ , 대민접촉 □ , 자원 활용(민간·공공시설 사용 등) ■ , 대외협의(외부기관 투자심사·협의 등) □ , 현장 활동 □ , 기타 □
	○		대체사업 (비대면 등)	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
여성친화도시조성	○		여성친화도시사업목표	양성평등□여성의 경제·사회참여확대□안전증진■가족친화□ 여성의 지역사회 활동역량 강화□해당없음□
홍 보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물 심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과ㆍ수시□ , 완료□
	○		보도자료	:	유		□							무	■

상도3동 주민센터 승강기 교체공사 계획

상도3동 주민센터 승강기 교체공사를 실시하여 노후화로 인한 고장 등 안전사고 방지, 이용자 편의 제공 및 쾌적한 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

승강기 기기결함(주요부품 고장, 층간 정지, 도어 고장 등) 및 노후로 잦은 고장 발생

승강기내 갇힘 사고 발생(19.5.25, 20.1.22), 동청사 승강기중 가장 노후화 됨(02년 설치)

승강기 안전관리법 제28조 및 제32조에 따라 실시된 승강기 안전점검 실시(18.4.6) 결과에 따른 시정 권고사항 조치를 위해 승강기 전면교체 필요

안전재난담당관에 승강기 안전점검 결과에 따른 검토요청 결과 현 승강기의 내구연한에 따른 사용 수명과 안전사고예방, 유지관리, 편의성을 고려하여 전면교체 권장 (안전재난담당관-10440,20.9.9.)

Ⅱ		사 업 개 요

대    상 : 상도3동 주민센터(성대로2길11)

규   모 : 부지면적 704㎡, 연면적 2,649.92㎡, 지하2/지상5층

사업기간 : 2021. 1월 ~ 4월 (제작 7주, 설치 4주)

사업내용 : 승강기 교체(1대, 13인승)

교체사유 : 2002년(건물 준공) 설치한 승강기로 노후화에 의한 잦은 고장 및 성능저하

추진방법 : 조달구매(관급자재)

세부내역

(단위 : 원)

분류번호	식별번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
24101601	23820345	승객용 엘리베이터	금영제너럴, GY60N-P2CO13 60m/min, 13인승/2층/일반형	대	1	42,427,000	42,427,000
옵션	20102	승객용 층별가산	OP900, 13인승	층	-2	3,120,750	△6,241,500
옵션	20422	승객용부품(방화도어)	OP900, 개층	층	7	3,935,750	27,550,950
옵션	20449	승강기부품(철거작업)	2층 기준 7~15인승	대	1	4,750,000	4,750,000
옵션	20450	승강기부품(철거작업)	1개층 추가 17~40인승	층	1	1,140,000	5,700,000
소 계						74,186,450
조달수수료(0.54%)						400,607
합 계						74,587,057

추진절차 및 일정

조달계약	⇨	승강기 제작	⇨	승강기 철거 및 설치	⇨	승강기 완성 검사	⇨	준 공
21. 1월		21. 1 ~ 3월		21. 3 ~ 4월		21. 4월		21. 4월

소요예산 : 74,588천원(전액구비)

예산과목 : 자치행정기반 강화, 동 주민센터 관리, 동청사 시설관리, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ		감염병 영향평가

코로나19 현재 상황 : ‘사회적거리두기’ 2.5단계 시행 중

코로나19 영향 사전 검토

공사 소요기간 : 30일(토·일요일 제외) 　　※ 제작 소요기간 : 7주

공사 투입인력 : 2~3인/일

위험요인 검토

구 분	영향분석	방역대책
작업인력과 종사자 간 대면(접촉) 여부	대면(접촉) 차단 가능	□시설안전관리인 1인 외 대면 차단
출입 시, 작업 전·후	감염위험 최소화를 위한 방역 필요	□출입, 작업 전·후 근로자 체온 측정 □출입명부 작성(인적사항 및 소재 파악) □마스크 착용, 손소독
공사 진행 중	감염위험 최소화를 위한 방역 필요	□마스크 착용, 작업거리 유지, 손소독 등
작업공간 분리여부	분리 가능	□작업 및 이동 공간을 한정하고 동선 분리 □작업공간 간이 칸막이 설치

방역 대책

- 접촉 최소화(안전관리인 1인), 발열체크 및 명부 작성 후 출입, 개인방역 철저

- 시설 이용자·종사자 공간과 작업 공간 칸막이 분리, 작업 전·후 근로자 체온 측정 및 소독

- 공사현장 “사회적 거리두기” 지도ㆍ점검 시행(주 1~2회 불시 점검)

Ⅵ		행 정 사 항

공사기간 중 시설 이용불편 대비 사전 공사 안내 : 상도3동

공사 진행시 해당 동장 관리 감독 철저 : 상도3동

공사 관계자 출입 시 코로나19 대비 명부 작성 및 체온 체크 등 방역 철저 : 상도3동.  끝.