				★차장			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-130
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2020.01.03.
공개여부		공개
2020년 서울시립 장사시설 화장로 설비 기능보강 시행 및 발주계획 보고
			2019.
						추모시설운영처

2020년 서울시립 장사시설

화장로 설비 기능보강 시행 및 발주계획 보고

서울시립 장사시설 화장로 설비의 적기 정비를 통해 안정적인 화장 업무 수행과 시설물 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 화장로 시설 현황

○ 주요 시설

승화원 (경기도 고양시)			추모공원 (서초구 원지동)
구 분	수량	주 요 시 설 물	구 분	수량	주 요 시 설 물
화장로	23	주연소로, 재연소로, 단열문 주,재연 버너 등	화장로	11	주연소로, 재연소로, 단열문 주,재연 버너 등
송풍설비	23	연소공기용, 냉각용, 유인 송풍기	송풍설비	11	연소공기용, 냉각용, 유인 송풍기
백필터 설비	23	백필터 : 64개/개소	백필터 설비	11	1~ 8호 : 36개/개소 9~11호 : 72개/개소
촉매반응설비	23	촉매, 암모니아 공급설비 등	저온촉매 필터 설비	11	저온촉매필터, 암모니아 공급설비 등
백연방지설비	23	백연버너설비 22기 폐열회수설비 1기	백연방지설비	3	열교환기 및 백연방지송풍기 (9호~11호)
현장제어설비	23	화장로 현장제어설비	현장제어설비	11	화장로 현장제어 설비
운송설비	1식	운구전동대차(4), 로내대차 반출입설비(23)	운송 설비	1식	AGV설비, 전동대차
중앙통제설비	1식	중앙감시반(모니터, PC 등), 동력반,제어반	중앙통제 설비	1식	중앙감시반(모니터, PC 등), 동력반, 제어반
기타설비	1식	공기압축기(6),분골기(3)	배출가스 감시 설비	1식	먼지/가스분석기, 자료수집기, 온도유량 측정계 등
			기타 설비	1식	공기압축기, 분골기 등

○ 화장로 설비 계통도

승화원 (23기)

추모공원 (11기) (1호~8호)

(9호~11호기)

□ 2020년 화장로 기능보강 예산현황

우선 순위	시·군·구	세부 사업명	2020년 예산액 (천원)				보조율 (%)
			사업량	계	국비	지방비
계	서울시	서울시립장사시설 화장로 개보수	화장로 (34기)	6,542,000	3,271,000	3,271,000
1	서울시	서울시립승화원 화장로 개보수	화장로 및 공해방지 설비 (23기)	5,060,000	2,530,000	2,530,000	50%
2	서울시	서울추모공원 화장로 개보수	화장로 및 공해방지 설비 (11기)	1,482,000	741,000	741,000	50%

□ 2020년 화장로 기능보강 주요 항목

○ 시립승화원 기능보강 산출금액 : 5,057백만원

연번	정 비 내 용	단위	수량	내 용
1	화장로 주연소로 내화물 교체	기	9	2~9호, 12호
2	화장로 재연소로 내화물 교체	기	9	2~9호, 12호
3	로내대차 교체	대	67	1~23호
4	화장로 주연소로 세라믹모듈 교체	기	23	1~23호
5	여과집진기 교체	기	5	9~12호, 15호
6	여과집진기 백필터 교체	기	23	1~23호
7	유인송풍기 교체	대	3	16, 18, 19호
8	가스냉각기 청소 정비	회	92	1~23호
9	유해가스 촉매교체	기	9	9~15호, 18~19호
10	다이옥신 촉매교체	EA	603	23기분
11	화장로 배출가스처리설비 개선설치	기	7	9~15호
	기존 가스냉각기 및 유해가스 촉매장치, 백연제거장치 철거 등 1‧2차 가스냉각기, 유해가스 촉매장치 신규설치 가스냉각기 폐열을 활용한 백연제거
12	전동 관운반차 교체	대	2	신관측
13	현장제어반 교체	면	23	1~23호

○ 추모공원 기능보강 산출금액 : 1,384백만원

- 배정예산 차액 98백만원 : 화장로 설비 소규모 자체 유지보수 시행분

연번	정 비 명	단위	수량	내 용
1	화장로 후단설비 보강(9~11호기) 여과집진기 교체, 원심력집진기 신설 유인송풍기, 냉각용 송풍기 용량 증설 덕트 및 연도 교체 등	대	3	9, 10, 11호기
2	연소로 내화물 정비(턱벽돌,세라믹,내화벽돌 등)	대	11	1~11호기(1년 주기)
3	로내대차 교체(본체 및 블록)	대	11	1~11호기
4	주연소 버너 컴부스터 교체	개	22	1~11호기 (6개월 주기)
5	여과집진기 필터백 교체(1~8호기)	대	8	1~8호기
6	여과집진기 필터백 교체(10~11호기)	대	1	11호기
7	연소로 및 열교환기 청소	회	44	1~11호기 (3개월 주기)
8	로내대차 바퀴 교체 및 정비	회	33	1~11호기 (4개월 주기)
9	저온촉매필터 교체 및 청소	대	11	1~11호기 (2단)
10	가스냉각기 교체(1호기,9~11호기)	대	4	1, 9, 10, 11호기
11	공기압축기 교체 및 개선	대	2	20hp 2대 (2011년식)
12	공기압축기 제습설비(쿨러,드라이어) 교체	대	3	2011년식(2set) + 1set
13	활성탄/소석회 진동기 설치	대	11	1~11호기
14	주,재연소 버너 가스노즐 교체	개	22	1~11호기
15	단열문 호이스트 연결고리 제작	개소	11	1~11호기
16	열교환기 청소용 발판 제작	개소	11	1~11호기
17	냉각전실 상부 개선 제작	11	11	1~11호기
18	열교환기 정비	대	6	2,4,5,6,7,8호기
19	측정공 개선 (sus ball v/v 설치)	개소	11	1~11호기

□ 화장로 주요 기능보강 예정 일정

○ 승화원

구분	2020년
	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
주요 정비 내용
				주‧재연소로 내화물 교체(9기)
								세라믹 전면교체(23기)																		세라믹 벽면교체(23기)
												여과집진기 교체(5기)
																백필터 (23기)
				유해가스 촉매 교체(9기)
				다이옥신 촉매 교체(23기)
																			화장로 배출가스처리설비 개선설치(7기)
							전동 관 운반대차 교체(2대)
										현장 제어반 교체(23기)

○ 추모공원

구분	2020년
	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
주요 정비 내용
				-화장로 후단설비 보강(9~11호기) -연소로 및 열교환기 청소(1/4분기) -가스냉각기 교체(1,9~11호기) -활성탄/소석회 진동기 설치 (11기)
																-연소로 내화물 정비(11기), 로내대차 교체(11기) -저온촉매필터 교체(11기), 공기압축기 교체(2대) -연소로 및 열교환기 청소(2/4, 3/4, 4/4 분기) -버너 노즐 교체(11기, 22개소)

□ 행정사항

○ 서울시 계약심사(完) : 2019. 12. 12 ~ 12. 18

○ 감사실 일상감사(完) : 2019. 12. 20 ~ 12. 30

○ 총무처 계약의뢰(예정) : 2020. 1월 중 (승화원,추모공원 별도 의뢰)

◊ 예산과목 : 구축물(수탁)

◊ 계약방법 : 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 ①항 4호

(이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등)

붙    임 : 승화원 및 추모공원 설계서