코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	고덕강일13단지 건설폐기물(폐목재)재활용 처리용역 계약변경 검토보고

1. ㈜삼우CM_고덕(강일13)제*******01호(2020.12.08.)와 관련입니다.

2. 「고덕강일 공공주택지구 9,11,13,14단지 아파트 건설공사」의 「건설폐기물(폐목재) 재활용 처리용역에 대한 계약변경을 시행하고자 다음과 같이 보고드립니다.

가. 계약현황

(1) 용 역 명 : 고덕강일 공공주택지구 9,11,13,14단지 아파트 건설공사 건설폐기물(폐목재) 재활용 처리용역

(2) 계 약 자 : ㈜일성제이에스

(3) 계약기간 : 2019.10.15. ~ 2021.10.24.

(4) 계약금액 : 851,370원

나. 계약변경 현황

구 분	당초	변경	비고
계약금액	851,370원	7,793,254원	(증)6,941,884원
계약기간	2019.10.15. ~ 2021.10.24.	2019.10.15. ~ 2022.01.21.	(증)89일

다. 계약변경 사유

- 고덕강일 13단지 시공사 요청(책임건설사업관리단 검토)에 따른 고덕강일 13단지 폐기물 처리물량 증가 및 준공일정 변경에 따른 기간 연장

라. 검토의견

- 건설사업관리단 기술검토 의견대로 건설폐기물(폐목재) 재활용 처리용역 계약금액 변경 및 기간 연장

마. 행정사항

- 계약부에 건설폐기물 처리용역 계약변경 요청

붙임  1. 건설폐기물(폐목재) 계약변경_요청_최종 1부

2. 건설폐기물_계약변경요청(1차) 1부.  끝.

부 원						부원				건설사업부장 직무대행			건설사업처장 직무대행		01/11
		허은영						양승재			이정호			조진래
협조자

시행			건설사업부-153				(2021.01.11)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/
전화		02-3410-8910			전송	02-3410-8994		/	heyhey5@i-sh.co.kr					/	공개