문서번호	하천관리과-2748
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
민병훈		김서연	02/25 손경철
협조
	주무관		이기승

『2021년 수해대비』

빗물저류조 및 유수지 점검계획

2021. 3

물순환안전국

[하천관리과]

- 2020년 수해대비 -

빗물저류조 및 유수지 점검 계획

2021년 우기대비 자치구에서 운영·관리중인 빗물저류조 및 유수지에 대한 사전점검을 실시하고, 적출사항에 대하여는 즉시 보완·개선하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2021년 주요 수방대책 추진계획

[물순환안전국장 방침, 하천관리과-2086(‘21.2.9)]

□ 수방시설 및 수해취약시설 일제점검·정비계획(하천관리과-2402(’21.02.18.)

Ⅱ		점검대상 및 점검방법

□ 하천 및 수방시설물

○ 유수지 : 용산유수지 등 52개소

○ 저류조 : 망우산 빗물저류조 등 33개소(공사중 빗물저류조 1개소 포함)

□ 점검대상 및 점검기관

구 분	점 검 대 상	점 검 기 관
유수지	- 용산유수지(‘21년 유수지 보수·보강공사 추진중) - 뚝섬유수지(주차장 복개공사 추진중) - 응봉유수지(CSOs 저류조 공사 추진중) - 대림3유수지(’21년 체육시설 조성공사추진중)	시·구 합동점검
	원효유수지 외 48개소	자치구
저류조	- 신림공영차고지 저류조(공사 추진중) - 마들근린공원 저류조(2008년 준공) - 시흥계곡 저류조(2015년 준공) - 사당역 환승센터 저류조(2013년 준공)	시·구 합동점검
	삼청동 빗물저류조 등 29개소	자치구

○ 점검방법 : 점검표에 의한 점검기관별 자체 점검 시행

○ 점검반 : 관계 공무원으로 구성(필요시 전문가 합동점검 추진-자치구)

○ 시·구 합동점검 대상(일정 별도 협의)

Ⅲ		점검내용

□ 유수지

○ 유수지 바닥 상태(토사 퇴적, 균열, 파손 등)

○ 복개시설(슬라브, 기둥) 균열, 파손여부 등

○ 사면(잡초제거, 호완블럭 구멍 및 파손, 벽체 파손 및 균열 등)

○ 빗물 유입·유출시설(수문 등) 파손 및 작동 여부 등

○ 유수지 바닥에 유수 장애시설 적치 여부 등

□ 빗물저류조

○ 운영 매뉴얼 및 상황실

· 빗물 저류조 개요 및 배수 유역도 작성 여부

· 업무 흐름도, 비상 단계별 운영 계획(수문조작 등)

· 비상연락망 체계(담당공무원, 지역 주민 등)

· 상황실 운영(수문 작동 방법 등) 현황 등

○ 현장점검

· 유․출입 관로 파손, 토사 및 오물 등 퇴적 여부

· 유입부 스크린 파손 및 낙엽 등 퇴적물 적치 여부

· 빗물저류조 구조물 손상, 내부 오물 및 토사 퇴적 여부

· 방류 수문 이상 여부

· 유지관리 입구(장비투입구) 파손 및 덮개 개폐 여부

□ 기타

○ 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

○ 기타사업에 의한 유수지(저류시설) 인수인계 현황 및 유지관리 현황

Ⅲ		추진계획

□ 점검 및 정비기간 : ‘21. 2.26.~ ’21. 4.30.

1차 점검 시행 (3.2∼3.31)		지적사항 보완조치 (3.8∼3.31)		조치결과 제출 (4.1까지)
합동점검 : 시·구담당 일반점검 : 구담당		자치구 담당부서		자치구 → 하천관리과
2차 집중점검 시행 (1차점검시 미조치 사항) (4.5~4.23)		지적사항 정비완료 (4.12 ~ 4.30)		조치결과 제출 (5.4까지)
합동점검 : 시·구담당 일반점검 : 구담당		자치구 담당부서		자치구 → 하천관리과

□ 단계별 점검 및 정비(세부내용)

○ 1차점검 및 정비

-  점검 책임자 : 자치구 담당 과장, 공사-담당부서장

- 점검기간 : 2021.3.2.~3.31.까지

- 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 점검·정비

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

○ 2차점검 및 정비 : 1차점검시 미조치사항 위주 집중점검

- 점검책임자 : 자치구 담당국장, 공사-담당본부장(차장)

- 점검기간 : 2021.4.5.~4.23.까지

- 시설물 및 공사장 담당국장, 전문가 등 합동점검 시핼

-2021.4.30.까지 1·2차 점검시 지적사항 전체 정비 완료

※ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

Ⅳ		행정사항

○ 빗물저류조 합동점검 차량 및 점검장비(장화 등) 지원(자치구)

○ 적출사항 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행(자치구)

붙임 : 1) 유수지 현황 1부.

2) 빗물저류조 현황 1부.

3) 점검리스트(유수지 및 빗물저류조) 각 1부.

4) 점검 및 정비사진(서식) 1부.

5) 점검대상 현황 및 일제점검 정비결과 보고(서식).