문서번호	물재생계획과-3126
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장
이진숙	김형수	02/25 이임섭

공공하수도시설물 악취저감사업 추진계획

2020. 2.

물순환안전국

(물재생계획과)

공공하수도시설물 악취저감사업 추진계획

하수악취 발생원인을 조사하고 악취를 유발하는 공공하수도 시설물에 악취저감시설을 설치하여 시민불편을 최소화 하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사업대상

○ 사대문안 도심명소로서 하수악취 저감이 필요한 지역(우선시행)

- ’20년 하수악취조사 완료 7개 지역(총 210개소, 지역별 30개소) : 서울시청, 광화문, 서촌, 북촌한옥마을, 남대문, 동대문, 대학로

○ 민원발생으로 주거밀집 및 유동인구가 많은 악취발생지역(선별시행)

- 자치구 사업계획서 검토 및 예산 재배정(’21.3.)

○ 서울형 하수악취 저감 기본계획 수립 용역관련 시범지역

- 용역 조사결과 반영하여 시범사업 지역 선정 및 설계(’21.5.)

□ 사업기간 : 2021. 3. ~ 12.

□ 사 업 비 : 6,500백만원

○ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비(214),

하수도 악취 저감 추진

□ 사업주체 : 市, 자치구 공동

□ 추진방법

○ 서울시 - 자치구 악취저감 사업계획서 검토 및 예산 재배정

- 사업 전·후 악취현황 조사 용역 발주 및 사업효과 분석

○ 자치구 - 사업대상지 선정 및 자체 악취저감 계획 수립

- 세부 사업계획서에 의거 악취저감시설 설치 및 실적 보고

□ 사업내용

< 하수도 시설물 악취조사 용역 >

○ 용역기간: 2021.3.~12.

○ 소요에산: 100백만원

○ 용역내용

- 악취 발생원, 발산원, 배출원별 악취원인 조사 및 저감방안 제시

- 하수악취 저감사업 전/후 효과 분석

< 공공하수도 시설물 악취저감시설 설치 >

○ 사대문안 도심명소: 529백만원

- ’20년 사업비 부족으로 저감시설 일부 미설치 지역 우선 설치

· 종로구(광화문, 한옥마을, 대학로 일대): 설치비 467백만원

· 중구(동대문, 남대문, 시청 일대): 설치비 62백만원

○ 민원발생 및 주거밀집, 유동인구 많은 지역: 5,371백만원

- 자치구 우선 조사 시행 후 악취저감시설 설치지점 조사표 제출

- 시·자치구 합동조사 및 용역 조사 후 설치지점 확정

○ 하수악취 저감 기본계획 수립 용역 관련 시범사업: 500백만원

- 용역결과 반영하여 저감방안 검증을 위한 시범지역 선정(’21.4.)

- 악취저감시설 설계(‘21.5.), 저감시설 설치(’21.6.~10.)

[ 악취 원인별 저감 시설 ]

구분	적용 대상	적용 기술
발생원	맨홀	인버트
	하수관로	세정 및 준설
발산원	맨홀	부관붙임맨홀, 맨홀단차부 낙차완화시설
	하수관로	하수관로 낙차완화시설, 스프레이 악취저감시설, 지주형 악취제거시스템, 광화학적 탈취시스템 등
배출원	맨홀	맨홀 악취차단장치, 맨홀 탈취기
	빗물받이	빗물받이 악취차단장치 (받이 설치형/연결관 설치형)

Ⅱ		추진일정

□ 하수악취 현황조사(용역) : '21.3.~12.

공고 및 발주		악취조사(1)		악취조사(2)		분석·평가
조사대상지 확정		사업시행 前		사업시행 後		사업효과 분석 및 평가
'21.3.		'21.3.~6.		'21.7.~11.		'21.12.

□ 총괄 추진일정

○ 자치구별 하수악취 저감 사업계획서 수합	: '21. 2.
○ 사업예산 1차 재배정(시 → 자치구)	: '21. 3.
○ 하수악취 현황 사전조사	: '21. 3. ~ 6.
○ 자치구별 하수도시설물 악취저감시설 설치	: '21. 3. ~ 11.
○ 사업예산 2차 재배정(시 → 자치구)	: '21. 7.
○ 하수악취 현황 사후조사	: '21. 7. ~ 11.
○ 사업효과 분석 및 평가	: '21. 12.

붙임  1. 자치구별 공공하수도 악취저감 사업 추진실적('20년) 1부.

2. 공공하수도 악취저감시설 주요 설치사진 및 효과분석('20년) 1부.  끝.