등록번호

치수과-2360

주무관

치수팀장

치수과장

생활도시친화국장

등록일자

2021.2.25.

방호익

전일섭

윤기찬

전결 02/25

유철호

결재일자

2021.2.25.

공개구분

부분공개(5)

협  조

「2021년 수해안전대책 관련」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

생활도시치화국

치    수    과

「2021년 수해안전대책 관련」

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

금년도 우기대비 빗물저류조 등 수방시설과 수해취약지역에 대하여 사전 일제점검을 시행하고 지적사항에 대한 정비·개선을 통해 수해대비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 2021년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

【하천관리과-2409호(2021.2.19.)】

Ⅱ		점검개요

□ 점검 및 정비기간 : 2021. 2. 26. ~ 2021. 4. 30.

○ 1차 점검기간 : 2021. 2. 26 ∼ 2021. 3. 31

○ 2차 점검기간 : 2021. 4.  1 ∼ 2021. 4. 23

□ 점검대상 : 수방시설물 및 풍수해 취약시설 지역

○ 수방시설물

- 빗물저류조 4개소

- 침사지 7개소

- 하수시설물 : 맨홀  8,001개소, 빗물받이 15,061개소 등

○ 풍수해 취약시설 및 지역

- 민간 공사장(16개소) : 재개발·재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

- 공공 공사장(1개소)  : 도로, 교량, 상·하수도, 건축공사장 등

- 사면시설(53개소)    : 옹벽, 축대, 절개지, 산사태·낙석 우려지역 등

- 지하시설(14개소)    : 지하보도, 지하상가, 공동구 등

- 돌출시설(414개소)   : 태양광 및 태양열, 대형입간판, 돌출간판, 철탑, 각종 표지판 등

- 유수장애시설     : 하수관거내 퇴적물 등 유수장애물, 상류지역 수해유발 적치물 등

□ 점검방법 : 소관 부서별 시설물 자체 점검

○ 부서별 자체점검 대상 현황

(단위:개소)

부서명	계	민 간 공사장	공 공 공사장	사면시설	지하시설	돌출시설	저류조 ·침사지	맨 홀	빗물받이
계	23,571	16	1	53	14	414	11	8,001	15,061
도 심 재생과	7	7
건축과	10	9	1
주택과	1			1
공 원 녹지과	4			4
도 로 시설과	62			48	14
환경과	13					13
교 통 행정과	277					277
가로 환경과	124					124
치수과	23,073						11	8,001	15,061

Ⅲ		추진계획

□ 점검 및 정비기간 : 2021. 2. 26. ~ 2021. 4. 30.

점검계획 수립방침 및 대상파악 제출	⇒	1차점검 시행 (2.26∼3.31)	⇒	지적사항 보완조치 (3.2∼3.31)	⇒	조치결과 제출 (4.2까지)	⇒
(총괄부서→서울시)		(주요시설: 본청 합동) (일반시설: 담당부서)		(담당부서)		(치수과→서울시)
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.1~4.23)	⇒	지적사항 정비완료 (4.6~4.30)	⇒	조치결과 제출 (5.7까지)
(주요시설: 본청 합동) (일반시설: 담당부서)		(담당부서)		(치수과→서울시)

□ 단계별 세부점검 계획

○ 1차 점검 및 정비

- 점검대상 : 부서별 자체 점검대상 공사장 및 시설【붙임1】참조

- 점검책임자 : 시설물 담당과장

- 점검기간 : 2021. 2. 26. ∼ 3. 31.

▶ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관 점검·정비

▶ 경비한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

※ 수방시설 및 수해취약지역 점검을 “2021년 국가안전대진단”의 안전점검과

병행하여 실시 가능

○ 2차 점검 및 정비

- 1차점검 시 미조치사항 위주 집중점검

- 점검책임자 : 시설물 담당국장

- 점검기간   : 2021. 4. 1. ∼ 4. 23.까지

▶ 시설물 및 공사장 담당국장, 전문가 등 합동점검 시행

▶ ‘21. 4. 30.까지 1·2차 점검시 지적사항 전체 정비완료

☞ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검대상, 지적사항 및 조치결과 제출

○ 1차 지적사항 및 조치결과는 2021. 4. 2.(금)까지 제출

○ 2차 지적사항 및 조치결과는 2021. 5. 7.(금)까지 제출

○ 지적사항에 대하여 시설물 정비대책 계획을 수립할 경우 치수과로 즉시 제출

※ 1차,2차 지적사항 및 조치결과는【붙임2】서식으로 작성하여 기한내 제출

□ 점검결과 중대한 결함사항 조치

○ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후가 발견된 경우 응급조치 및 대책마련

☞ 필요시 자체 긴급 재원 등을 확보하여 우기 전까지 완료 할 수 있도록 조치

붙임 : 1. 수방시설 및 수해취약지역 점검대상 현황 1부

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 결과보고 제출서식 1부. 끝.