문서번호	시설보수과-3074
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	08/06 정진오
협 조
	주무관			이경수
	주무관			최태석
	주무관			진하영

『 2014년 도로시설물 자체정밀점검 』

자문회의 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

성동도로사업소

【 시설보수과 】

『 2014년 도로시설물 자체정밀점검 』

자문회의 개최 계획

2014년 자체정밀점검으로 시행토록 계획된 워커힐고가 등 23개 시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 실시하고 점검

결과의 적정성, 손상 원인분석 및 보수⁃보강 방안에 대하여 자문회의를 개최하고자 함

Ⅰ		관련 근거

2014년 도로시설물 자체정밀점검 시행 계획(외부전문가 합동)

(시설보수과-1069, 2014. 3. 21.)

Ⅱ		점검대상 시설물

시설물 현황

구 분	시설수	일반교량	고가차도	지하차도	터널	하천복개	비고
합 계	23	6	5	10	2
1 종	1		1
2 종	11	3	1	5	2
법정외	11	3	3	5

세부현황(23개소)

시설수	일반교량		고가차도			지하차도		터널	비고
	2종	법정외	1종	2종	법정외	2종	법정외	2종
23	제2마장교, 장안교(구), 장안교(신)	면목교, 신내교, 먹골교	워커힐 고 가	영동대교 북단고가	용마고가, 청량제2고가, 뚝섬고가	서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도, 응봉지하차도, 능산지하차도, 신답지하차도,	중랑교 지하차도, 답십리굴다리지하차도, 신내지하차도, 동일로 지하차도, 군자교동측 지하차도	옥수터널, 금호터널

담당별 시설물 현황(23개소)

연번	조별	시 설 명	종 별	등급	준공 년도	규 모(m)		구조 형식	설계 하중	시설물 담 당
						폭	연장
1	1조	워커힐고가	1종	B	1986	3~23	962	RA	DB-24	최태석
2		제2마장교	2종	B	1990	30	136	PSCI	DB-24	최태석
3	2조	옥수터널	2종	B	1984	22	165	마제형		최태석
4		서울숲1지하차도	2종	B	2005	13	198	RCB		최태석
5		서울숲2지하차도	2종	B	2005	6.5	200	RCB		최태석
6		응봉지하차도	2종	B	2007	8.1	370	RCB		임승민
7	3조	장안교(구교)	2종	C	1978	18	200	PSCI	DB-18	이경수
8		장안교(신교)	2종	B	2006	16	200	PF	DB-24	이경수
9		금호터널	2종	B	1984	22	320	마제형		이경수
10		용마고가	법정외	B	1989	17.9	48	RCS	DB-24	이경수
11	4조	능산지하차도	2종	B	1995	17	380	RCB		이경수
12		면목교	법정외	B	1974	26	72	PSCI	DB-24	이경수
13		중랑교지하차도	법정외	B	1993	18.5	320	RCB		이경수
14	5조	신내교	법정외	B	1985	31	186	RCS	DB-18	최태석
15		청량제2고가	법정외	B	2004	35	30	PF	DB-24	임승민
16		답십리굴다리지하차도	법정외	B	1987	24.6	49	RCB		이경수
17		신내지하차도	법정외	B	2000	20	320	RCB		이경수
18	6조	신답지하차도	2종	B	1998	23	490	RCB		임승민
19		동일로지하차도	법정외	B	1977	15	320	RCB		임승민
20		군자교동측지하차도	법정외	B	1983	17	254	RCB		임승민
21	7조	영동대교북단고가	2종	B	1996	15.5	230	STB	DB-24	진하영
22		먹골교	법정외	B	1987	40	42	RCS	DB-24	진하영
23		뚝섬고가	법정외	B	1994	13.5	80	RCS	DB-24	진하영

Ⅲ		자체정밀점검 시행 현황

점검기간 : 2014. 4. 1 ~ 7. 9(100일간)

점검조 편성

구분	대상시설물	수행자 (담 당)	외부전문가		비 고
			특급기술자	중급기술자
계	23개 시설물	4인	7인	14인
1조	워커힐고가 제2마장교	최태석	정해철	김세훈, 정승호	㈜진화기술공사

구분	대상시설물	수행자 (담 당)	외부전문가		비 고
			특급기술자	중급기술자
2조	옥수터널 서울숲1지하차도 서울숲2지하차도 응봉지하차도	최태석	정관호	이강선, 이광호	㈜삼림엔지니어링
3조	장안교(구교) 장안교(신교) 금호터널 용마고가	이경수	조만천	우유섭, 박창욱	(재)한국재난연구원
4조	능산지하차도 면목교 중랑교지하차도	이경수	이제영	신종상, 어의선	㈜화신엔지니어링
5조	신내교 청량제2고가 답십리굴다리지하차도 신내지하차도	임승민	강면구	김동호, 박정섭	㈜동해종합기술공사
6조	신답지하차도 동일로지하차도 군자교동측지하차도	임승민	강남구	권오훈, 서상필	㈜대한이앤씨
7조	영동대교북단고가 먹골교 뚝섬고가	진하영	이상범	이경복, 채상윤	㈜스마트이앤씨

추진현황

○ 2014. 3. 21  : 자체정밀점검 시행 계획

○ 2014. 4.  1  : 자체정밀점검 착수

○ 2014. 4. 14  : 착수보고회 개최

○ 2014. 5.~6.  : 시설물 합동점검 실시

○ 2014. 6. 18  : 중간보고회 개최

Ⅳ		자문회의 개최 계획

일  시 : 2014. 8. 14.(목) 10:00 ~, 14:00 ~ (2회)

장  소 : 방촌당 회의실(2층)

안  건 : 과업수행의 적정성 및 보수방안의 타당성 검토

자문위원(8명)

구분	대상시설물	수행자 (담 당)	외부 자문위원		비 고 (일 시)
			소 속	성 명
가	(1, 3, 7조) 워커힐고가,제2마장교 장안교(구,신),금호터널 용마고가, 영동대교북단고가 먹골교, 뚝섬고가	이경수 최태석 진하영	서울시 30년 시설보수과 근무 (워커힐고가 주치의)	고래건	2014.8.14. 10:00~
			한국시설안전연구원 이사	한삼희
			㈜대한컨설턴트	서문동군
			한국구조물안전연구원 이사, 민간기업 16년	정시욱
			도로시설과 일반교량팀장	정회평
나	(2, 4, 5, 6조) 옥수터널,서울숲1,2지하차도 응봉지하차도, 능산지하차도 면목교, 중랑교지하차도 신내교, 청량제2고가 답십리굴다리지하차도 신내지하차도, 신답지하차도 동일로지하차도, 군자교동측 지하차도	이경수 최태석 임승민	에스큐엔지니어링 이사	송준민	2014.8.14. 14:00~
			한국건설품질연구원 이사	양승이
			비앤티엔지니어링 이사	안홍준
			서울시 30년 시설보수과장	김기준
			도로시설과 터널,복개팀장	김두석

자문회의 진행방법 : 자체정밀점검으로 자문회의 보고자료(PPT)에             의한 보고 후 자문위원 의견서 제출받아 최종보고서 작성

Ⅴ		행정 사항

외부자문위원(8인) 자문수당 지급

※ 조별 자체정밀점검 점검완료 후 정산

자문위원 의견서 검토 반영 후 최종보고서 작성, 정밀점검 완료 및

시스템 입력(조별).  끝.