문서번호	방재시설부-2690
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	03/03 박홍봉
협조
	주무관		김상용

「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 검토보고

2021.3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 검토보고

『신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』의 물가 변동으로 인한 계약금액 조정(제2회)에 대하여 검토 보고드림. ※ 관련공문 : 극동(건사)2021-221호(2021.2.26.)

1		용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : 2019.3.4.~2021.7.26.(3차 2021.1.7.~2021.7.26.)

❍ 계약금액 : 1,038,600,000원(3차 468,600,000원)

❍ 계 약 자 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사(대표 성낙일)

2		보 고 내 용

❍ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조, 동법 시행령 제73조 및 동법 시행규칙 제72조

-「용역계약 일반조건」제15조

❍ 계약금액 조정대상 여부 검토

- 계약금액 조정요건 : 아래 2가지 조건 동시 충족

· 계약체결일 이후 90일 경과

· 조정률 3% 이상(품목조정률 적용)

❍ 물가변동에 의한 계약금액 조정(제2회) 검토

구 분	검토내용	비 고
1. 비교시점(직전조정기준일)	2020.1.1.
2. 조정기준일	2021.1.1.	직전조정기준일 후 90일 이상 경과
3. 계약금액	1,038,600,000원
4. 물가변동 제외금액	622,150,000원	계약이행 완료금액 + 보험료 + 보고서 작성비 + 제1회 E/S금액
5. 물가변동 적용대가	416,450,000원
6. 등락폭	14,410,000원	단수조정
7. 물가변동율(K)	3.46%	조정율 3% 이상 충족
8. 선금급 공제금액	-
9. 물가변동 조정 적용금액	14,410,000원
10. 변경계약금액	1,052,250,000원	(3)+(9)

❍ 계약금액 변경내용

(단위 : 천원)

구분	당 초	적용제외 금액	대상금액	변 경			증·감
				조정율(K)	물가변동 반영금액	변경금액
총차	1,038,600	622,150	416,450	3.46%	14,410	1,052,250	증 14,410

3		조 치 의 견

❍ 상기 보고내용과 같이 관련규정에 따른 조정요건이 충족되어 물가변동에 의한 계약금액 조정(제2회)이 적정한 것으로 판단되는 바, 추후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임  보고서 1부.  끝.