문서번호	토목부-4145
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	03/04 김용제
협조

관급자재(H형강) 수급방법 변경 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

도시기반시시설본부

토 목 부

관급자재(H형강) 수급방법 변경 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

개봉고가 강교 제작에 소요되는 관급자재(H형강) 낙찰자 계약포기, 입찰 재공고 유찰 등으로 자재 공급 지체로 공사 지연이 우려되어 수급방법을 변경하고자 검토 보고 드림

1		관련근거

❍ 공사계약일반조건 제19조의6 (소요자재의 수급방법 변경)

2		공사개요

❍ 위    치 : 개봉고가차도(구로구 개봉로 68~개봉로 124)

❍ 규    모 : 교량성능개선(DB18→24), 폭 18.9m, 연장 332m

❍ 총사업비 : 22,662백만 원(도급비 13,729백만 원)

❍ 사업기간 : ’19. 8. 12. ~ ’23. 4. 11.

❍ 감리단/시공사 : ㈜유신 외 2개사 / 홍익산업개발㈜ 외 1개사

3		추진경위

❍ 2020. 9. 17.	: 일상감사

❍ 2020. 10. 28.	: 계약심사

❍ 2020. 11.	6.	: 입찰공고(소상공인이고 유통으로 입찰참가자격 제한)

❍ 2020. 11. 12.	: 낙찰자 결정

❍ 2020. 11. 23.	: 낙찰자 계약포기

❍ 2020. 12. 3.	: 입찰공고(소상공인이고 제조로 입찰참가자격 제한)

❍ 2020. 12. 16.	: 입찰공고(중소기업이고 제조로 입찰참가자격 제한)

❍ 2020. 12. 23.	: 입찰공고(대기업이고 제조로 입찰참가자격 제한)

❍ 2020. 12. 30.	: 입찰 재공고

❍ 2021. 1. 5.	: 유찰(무응찰)

4		보고내용

❍ PSP거더와 보도육교에 소요되는 관급자재(H형강) 낙찰자가 자재 납품단가를 맞출 수 없다는 사유로 계약포기(2020.11.23.)

- 지방계약법 시행령 제38조에 따라 입찰보증금 세입조치(2021. 1. 14.)

- 지방계약법 시행령 제92조제2항제2호가목에 따라 부정당업자 입찰참가자격 제한 조치 예정

❍ 재 입찰공고(4회) 결과 유찰(무응찰)됨에 따라 자재 납품업체 선정을 위한 거래 실례 가격조사, 계약심사, 입찰공고 등을 고려하여 관급자재 공급 지체로 공사가 상당 기간 지연될 것이 예상됨

❍ 따라서 강교(PSP거더, 보행육교) 제작에 소요되는 관급자재 H형강 69.654톤에 대해서 강교 거치 계획공정에 차질이 발생하지 않도록 자재 수급방법을 사급자재로 변경하고자 함

❍ 주요 수량 변경

공 종	규격	단위	당초	변경	증‧감	비고
H-형강 (SM355B)	H-588×300×12×20	ton	56.097	56.097	-
	H-488×300×11×18	ton	2.88	2.88	-
	H-400×400×13×21	ton	9.03	9.03	-
H-형강 (SM355A)	H-300×300×10×15	ton	1.269	1.269	-
	H-150×150× 7×10	ton	0.378	0.378	-

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
사급자재(H형강)	-	81,960	81,960
직접공사비	-	81,960	81,960
제경비	-	29,140	29,140
도급비	-	111,100
관급자재비	69,370	-	-69,370
공사비	69,370	111,100	41,730

5		조치의견

❍ H형강 자재 수급방법 변경에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 적정하므로 승인 처리하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 협의 결과 재료비 100% 적용

붙임  건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.