코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	은평구청장(치수과장)
(경유)
제목	2021년 제1차 하수도 정비사업 사전검토결과 이의신청 회신

1. 은평구 치수과-2721(2021.03.03.)호와 관련입니다.

2. 2021년 제1차 하수도 정비사업 사전검토결과 이의신청에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신하오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 갈현로 249일대외 17개소 노후 하수관로 보수

나. 사업규모 : D450~900㎜, L=707.5m

다. 이의신청 내용 : 사업규모 및 사업비 조정

1) 사업규모 조정 : 당초) 707.5m → 변경) 739.2m(증 31.7m)

- 사유 : 실제 매설된 하수관로 연장 반영(16구간 조정)

2) 사업비 조정 : 당초) 360백만원 → 변경 450백만원

- 개인배수설비에 대한 연결관절단 및 보수물량(252개소) 설계 반영

라. 검토의견

1) 정비대상 하수관로의 보수규모(연장, 연결관절단 및 보수 등) 및 사업비 조정 사안으로, 계약심사 등 사전절차 이행후 신속하게 예산재배정 요청 실시

2) 공사 준공시 관로연장, 연결관절단 및 보수물량(252개소) 정산 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	03/08 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-3646	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송		/	2009029199@seoul.go.kr	/	대시민공개