공 사 설 명 서

1. 공 사 명: 광산사거리 주변 등 2개소 노후 하수관로 정비공사

2. 위    치: 광산사거리 주변 등 2개소

3. 목    적

○ 노후·불량한 하수관로를 정비하여 구조물의 내구성 및 안정성을 확보하고, 누수 및 불명수 유입을 예방함으로써 하수도 시설물로 인한 안전사고를 사전에 예방하고 원활한 배수체계를 재정비하여 침수피해 해소 및 관거수명을 연장하기 위함

4. 총공사비 : 금600,000,000원

5. 사업개요

○  사업기간: 2021. 3. ∼ 2021. 8.

○  사업규모: 비굴착 전체보수 D=450~900mm, L=833.0m

6. 설계변경 조건

- 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장의 현황에 맞추어 변경할 수 있다.

1) 물량 변경이 있을 때

2) 공법 변경이 불가피할 때

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 제74조, 제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호협의하여 결정한다.

7. 공사기간 변경사항

- 본 공사 착공일은 계약일로부터 3일 이내로 하고 공사기간은 착공일로부터 180일이며  다음과 같은 경우에는 기간을 변경(연장)할 수 있다.

1) 공사시행 중 천재지변 또는 한파 등으로 인하여 작업이 불가능하였을 경우

2) 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

3) 지장물 철거 ․ 이설 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

4) 민원발생 등으로 인하여 시공이 곤란한 경우

5) 기타 특수한 사정으로 인하여 공사기간 연장이 필요한 경우

8. 기타사항

- 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

- 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

9. 예정공정표

공 종	수량	착공후 30일			착공후 60일			착공후 90일			착공후 120일			착공후 180일			비고
비굴착보수공	1식
부 대 공	1식

공사계약 특수조건

1. 본 특수조건은 『광산사거리 주변 등 2개소 노후 하수관로 정비공사』에 적용한다.

2. 설계도서상 각 공종별 물량은 계약물량의 범위 내에서 실작업 물량에 대하여 정산 시행한다.

3. 도로 등 굴착을 필요로 하는 공사의 경우에는 계약자가 가스, 전기, 상․하수도 등 지하매설물 관련 도면등을 관계기관에서 확인하여 안전수칙에 따라 시행하여야 한다.

4. 지하매설물 등을 관리하는 관계부서에서의 관계자를 사전에 입회시켜 지하매설물의 위치, 보존상태에 대한 이상 유․무를 확인한 후 발주처에 보고, 승인을 받아 시공하여야 한다.

5. 공사시행과정 및 상기 사항 불이행으로 인하여 발생되는 민․형사상의 손해에 대한 책임은 계약자가 전적으로 부담한다.

6. 본 공사는

- 건설산업기본법 제9조에 따라 상·하수도설비공사업에 등록된 전문건설사업자 또는 그 시공자격을 갖춘 종합건설사업자

- 『건설기술 진흥법』 및 『환경기술 및 환경산업 지원법』에 따라 지정된 하수관로 비굴착 전체보수(보강튜브 경화공법) 신기술개발업체(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정) 또는 신기술협약자(『건설신기술 협약 등에 관한 규정』 및 『환경기술 협약 등에 관한 규정』에 따라 협약증명서를 발급받은 업체)로 기술보유 확인을 위한 신기술인증서 또는 신기술 협약증명서를 투찰 마감일까지 G2B 첨부문서에 등제한 업체(미제출한 업체는 무효처리 됨)

※협약증명서 발급기관

· 건설신기술: 한국건설교통신기술협회

· 환경신기술: 한국환경산업기술원

- 적격심사대상자는 적격심사서류 제출시에도 국가조달시스템에 첨부한 신기술인증서 또는 신기술 협약증명서를 반드시 제출하여야 함.

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조에 따라 입찰 공고일 전일 현재 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체.

7. 공사 준공자료는 서울시 하수도관리전산시스템(GIS) 입력 자료를 제출하여야 한다.

가. 준공도면(평면도, 종․횡단면도)

나. 하수관거 CCTV 동영상 자료 및 조사보고서

다. 도면표기사항 : 맨홀(지거법 및 이점법), 하수관거(유수방향 표시), 우수받이, 횡단하수거, 연결관 등[도형자료의 각종 제원은 TABLE로 작성(엑셀 등 활용)]

라. 기타자료 : 하수관거 되메우기전 실측사진 대장, 유량계산서 등