				★ ◎
문서번호	기계사업부-773			부 원			파트장				기계사업부장			에너지기술사업처장
보존기간	20년																03/10
				백미향			이성주				휴가			허원
결재일자	2021.03.10
공개여부	부분공개(5)			협조	전기사업부장			최용석
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
강빛초,중 통합학교 소방공사 준공정산 보고
		서울주택도시공사
(기계사업부)

강빛초,중 통합학교 소방공사 준공정산 보고

우리 공사에서 시행 중인 「강빛초,중 통합학교 신축 소방공사」 의 준공에 따라 보험료 사후정산 등 정산사항에 대하여 아래와 같이 보고 후 준공코자 합니다.

Ⅰ

관 련 근 거

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8절 보험료 사후정산 등

□ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조 목적 외 사용금액에 대한 감액 등

□ 강빛초,중 통합학교 신축 소방공사 준공(기성)검사 결과보고(정산포함) [토문 제2021-156호, 2021.03.08.]

Ⅱ

공 사 개 요

계 약 명	계 약 사	공사기간	계약금액(천원)	비 고
강빛초,중 통합학교 신축 소방공사	㈜나경이엔씨 ㈜대한엔지니어링	2019.12.09. ~ 2021.02.07.	1,624,535

Ⅲ

정 산 현 황

구 분	변경전	변경후	정산액	비 고
산재보험료	26,835,028	26,835,028	0
고용보험료	6,225,726	6,225,726	0
산업안전보건관리비	27,436,426	27,436,426	0
국민건강보험료	24,692,483	12,635,150	-12,057,333
노인장기요양보험료	2,101,330	1,300,200	-801,130
국민연금보험료	34,401,291	17,393,220	-17,008,071
퇴직공제부금비	17,582,882	9,610,000	-7,972,882
소 계	139,275,166	101,435,750	-37,839,416
일반관리비	53,329,492	51,778,077	-1,551,415
이 윤	122,801,410	117,897,091	-4,904,319
부가가치세	147,685,025	143,255,510	-4,429,515
합 계	463,091,093	414,366,428	-48,724,665

□ 간접비 등 정산현황                                                    (단위 : 원)

※ 세부내역 첨부 참조

□ 기성 및 준공금액                                                      (단위 : 원)

구 분	계약금액	기성 현황			비 고
		전회기성	금회(준공)기성	계
나경이엔씨	974,721,165	664,884,072	280,602,294	945,486,366
대한엔지니어링	649,814,110	443,256,048	187,068,196	630,324,244
합 계	1,624,535,275	1,108,140,120	467,670,490	1,575,810,610	감) 48,724,665

Ⅳ

행 정 사 항

□ 시공사에서 제출한 정산내역을 검토한 결과, 관련규정 및 근거가 적정하여 상기 내용과 같이 준공 정산금액을 확정하고 계약부에 준공금액 지급 요청

□ 별첨 서류 : (감리단)강빛초,중 통합학교 신축 소방공사 준공(기성)검사 결과보고

붙임  준공정산내역서(강빛초중 소방공사) 1부.  끝.