보 고 서
			담당	팀장	도로환경처장	도로관리본부장
문서번호	도로환경처-1993
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2021.03.19.
공개여부	공개
제목	설계변경(정산) 보고

1		용역현황

가. 용 역 명 : 2020/2021년 자동차전용도로 제설용역

나. 용역기간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 22

다. 용 역 비 : 779,631,000원

라. 도 급 자 : 두원개발중기 대표 김문한

2		보고내용

상기 용역 설계변경(정산,최종)에 대한 시행 보고임.

가. 설계변경 사유

1) 제설대책 비상근무 일수 변경에 따른 공종별 증감 물량 반영

○ 당초: 비상근무 22일(176시간/8시간)  ⇨  변경: 30일(244시간/8시간)

○ 주요공종 물량 증감

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
상황반장(주간)	hr	80	155	증) 75
제설작업원(야간)	hr	960	1,204	증) 244
제설작업운전원(2.5톤,4.5톤,주간)	hr	2,000	3,088	증) 1,088
제설장비 상시대기(2.5톤 트럭)	일	1,443	1,663	증) 220
제설작업운전원(15톤덤프,굴삭기,주간)	hr	2,400	3,792	증) 1,392

공 종	단위	당 초	변 경	증․감
제설작업운전원(15톤덤프,굴삭기,야간)	hr	1,440	2,265	증) 825
제설장비 상시대기(15톤 덤프)	일	1,776	1,904	증) 128
제설작업(15톤덤프)	hr	1,920	2,930	증) 1,010
제설작업(굴삭기, 0.6㎥)	hr	700	744	증) 44

※ 기타 제설제 운반(정비) 작업 및 제설장비 이동에 따른 물량 증가 반영

2) 실정보고에 의한 주요 변경사항

○ 내부순환로 사근램프 2.5톤 트럭 1대 추가배치

- 도로관리처 제설차량이 제외됨(포트홀 상시보수체계 운영집중)에 따라 내부순환로 사근램프에 2.5톤 트럭 1대 추가배치

- 개략용역비 : 증) 16,800천원

○ 강남순환로 굴삭기(0.6㎥) 1대 추가배치

- 신속한 제설작업을 위해 제설제 일부을 소하JC에 비축함에 따라 제설대책 2단계이상 발령 시 굴삭기(0.6㎥) 1대 추가배치

- 개략용역비 : 증) 4,062천원

【관련근거 : 도로환경처-1305(’21.2.24)호】

나. 용역비 변경내용

○ 총 괄                                                    (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총 용 역 비		779,631,000	1,052,090,000	증) 272,459,000
용역비	공급가액	708,755,455	956,445,455	증) 247,690,000
	부가가치세	70,875,545	95,644,545	증) 24,769,000
	계	779,631,000	1,052,090,000	증) 272,459,000

3		조치의견

상기와 같이 설계변경(정산)하여 총무처에 변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.