문서번호	역사문화재과-6162
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	문화재사업팀장	역사문화재과장	문화본부장
정붓샘	정경란	권순기	03/30 유연식

사적 제558호 의정부지(議政府址) 유구보호시설 건립을 위한

설계자문단 구성 및 운영계획

2021. 3.

문 화 본 부

(역사문화재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

사적 제558호 의정부지(議政府址) 유구 보호시설 건립을 위한

설계자문단 구성 및 운영계획

의정부지 유구 보호시설 건립을 위한 설계용역의 전문성과 효율성을 높일 수 있도록 관련분야 전문가로 구성된 설계자문단을 운영하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 의정부 터(옛 광화문시민열린마당) 역사성 회복을 위한 의정부 유구보호시설 건립 계획(부시장방침 제16474호, ’20.9.2.)

○ 사적 제558호 의정부지(議政府址) 유구 보호시설 설계 추진계획 (본부장방침 제3178호, ’21.2.17.)

Ⅱ		설계용역 개요

○ 용 역 명 : 사적 제558호 의정부지 유구 보호시설 기본‧실시설계 용역

○ 과업대상 : 종로구 세종로 76-14 등(옛 광화문시민열린마당) 5필지

○ 대상규모 :【토지】11,300㎡,【건물】1,300㎡ (유구 보호·관람 시설 신축)

- 전 시 관 : 연면적 1,300㎡(±5% 범위 내 조정 가능), 높이 9m 미만

- 유구보호각 : 정본당과 석획당 1,100㎡ (연면적 제외)

- 유구 정비 : 협선당, 연지, 정자, 근대유구(경기도청사)

【주요 유구 배치도】	【공간별 평면 계획】

○ 설계 과업내용

- 현황 측량, 지반조사, 지장물조사 등 실시설계에 필요한 제반조사

- 건축(토목·조경·기계 등 포함)·유구보존 처리에 대한 기본설계(계획,중간) 및 실시설계

- 문화재 정비를 위한 유구보존처리 방안 마련 및 실시설계

- 문화재수리법 등 관계 법령에 따른 각종 심의, 협의, 인허가 등 행정절차 이행

○ 추진방식 : 설계용역 시행(역사문화재과), 분야별 설계 감독(도시기반시설본부)

○ 용역기간 : ’21. 3. ~ 9. (6개월, 문화재청 심의기간 제외)

○ 소요예산 : 금 803백만원 (부가세 포함)

○ 용역수행(당선사) : ㈜건축사사무소 원오원아키텍스 외 2개사(공동수급체, 분담이행)

- ㈜건축사사무소 원오원(건축 등)/ 건축사사무소 강희재(문화재)/ 조경설계 서안(조경,부대토목)

Ⅲ		설계자문단 구성 및 운영계획

□ 추진방향

○ 다양한 관련 분야 전문가를 위촉하여 사업의 전문성을 제고

- 한국건축사·설계·고고학·보존처리 등 다양한 관련분야 전문가로 구성

- 총괄계획가 및 운영위원 외에 문화재청, 도시기반시설본부 등의 추천 인사를 위촉하여 관련 기관 간의 협의 및 의견 교환을 원활하게 함

- 유구정비, 문화재 보존·복원 및 건축·토목 설계가 복합된 사업의 특성을 고려하여 전문분야의 자문이 추가로 필요할 시 외부 전문가의 의견 수렴도 실시

○ 주요 사안에 대해 전문가의 의견이 종합적으로 반영될 수 있도록 설계용역 보고회 및 정기적인 분야별 자문회의 개최

- 정규 보고회(착수·중간·최종보고회) 외에 정기적인 자문회의를 실시하여 주요 사안에 대한 신속한 의견 수렴을 추진

- 문화재, 유구보존처리, 전기·통신 등 분야별 수시 자문회의 실시

□ 자문단 구성(안)

○ 의정부지 정비사업 운영위원, 문화재청, 도기본(설계 감독) 등 추천 선정

○ 설계사업 종료시까지 위촉하며, 여건 변화에 따라 위촉기간 조정 가능 (사업 추진 중 해촉사유 발생 시 즉시 해촉)

연번	분야	성명	소속	주요 경력	비고
1	건축	***	*****	***************	*****
2	역사학	***	*****	***************	**** ***
3	건축	***	*****	***************	****
4	설계	***	****** ***	**************** ***************
5	고고학	***	*******	***************** ***************	****
6	보존처리	***	*****	*************** ****************
7	행정	***	***	*********	***

※ 설계안에 대해 문화재위원회(2개 위원회) 심의와 문화재청(2개 부서)의 승인이 필수이므로 원활한 업무 추진을 위해 추가 위촉이 있을 수 있음

□ 회의 운영계획

○ 회의 내용 및 운영방법

구 분	개최 빈도(횟수)	회의내용	비 고
설계용역 보고회	착수·중간(1,2차)· 최종보고 (총4회)	기본 방향 결정
정기 자문회의	격월	주요 사안 검토, 결정
분야별 검토회의	필요시 개최	세부 내용 검토	분야별 자문위원, 관계부서 실무자

※ 이와 별도로 설계 추진내용 점검을 위해 역사문화재과, 도기본 등 관계부서간 공정 점검회의 수시 개최

○ 회의 참석수당 지급 : 기본 150천원/일당 (2시간 이상 시 50천원 추가)

- 단, 총괄계획가는 회당 250천원 지급

※ 총괄계획가 지급근거 : 도시재생사업 등 총괄계획가 대가 통합기준 개선방안(’15.3.5), 의정부터 정비사업 총괄계획가 및 운영위원회 위촉·운영계획(’19.10.7.)

- 자료조사, 기타 자문단 활동에 필요한 여비 등은 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 규정 준용

Ⅳ		추 진 일 정

○ 기본‧실시설계 용역 및 문화재청 심의	: ’21. 3. ~ ’21.12.

※ 문화재청(보존정책과·수리기술과) 협의 및 문화재위원회(2개 분과) 심의 결과에 따라 설계 변경 및 수행기간 연장 가능성 있음

○ 유구 보존 처리 공사	: ’21. 3. ~ ’23. 6.

- 현장 보존 및 유구보호시설 건립 공사 전·후 유구 보양과 보존처리 실시

○ 전시물 실시설계 및 제작                  : ’21. 5. ~ ’22.12.

○ 유구 보호시설 건립 공사의뢰 및 시공(도기본)	: ’22. 1. ~ ’23. 3.

※ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준과 현장여건 따라 공기 변동될 수 있음

○ 전시물 설치 공사 및 개관 준비	: ’23. 1. ~ ’23. 6.

○ 시범 운영 및 개관	: ’23. 6.  끝.