실정보고 검토서

공사명

동부간선도로 확장공사(2공구)

공사개요

· 위 치 : 녹천교~의정부시계

· 규 모 : 도로 확장 4→6차로, L=3.2km

· 공사기간 : ‘08.02.~‘21.10.

· 도 급 비 : 3,236억원

· 시공사 : ㈜한라

· 감리단 : ㈜이산

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

상수도 이설 정산 보고

실정보고

사유

북부수도사업소 합동회의 결과 반영(19.05.02.)(19.06.17.)

현장여건에 따른 실시공 물량 반영

건설사업관리단

검토의견

- 유관기관(상수도본부, 북부수도사업소)의 협의 내용을 반영

하는 것이 타당함.

공기에 미치는 영향

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	상수도 이설 1식	상수도 이설 1식
금액	7,757,000천원	7,777,000천원	증)20,000천원

예산조치 계획

당초 사업비 범위내 시행가능

발주처

검토의견

건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 향후 시민에게 안전하게 상수도를 공급하기 위하여 유지관리기관의 의견을 반영하는 것이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

비 고

-

결재

담당

권해엽

과장

장종환

부장

03/30

김용제