[부록 #11]

11. 2020년 주요사업별 추진현황

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

전기자동차 구매

√

√

사업담당자	총무처장: 최정진 ☎9101 부장: 심은진 ☎9102 담당: 김기정 ☎9107

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
차량운반구	477	468	98.1	△9

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 예상수수료와 실제 수수료 차이 및 모델 변경에 따른 잔액 발생

○ 집행잔액 발생사유

- 조달청 다수공급자계약(MAS), 나라장터 종합쇼핑몰 이용하여 구매

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

477백만원

○ 총 사업비:

○ 총 사업기간:

2020.11.

~

2020.04.

10대

○ 총 사업물량:

○ 당년 사업물량:

10대

[사업 개요]

○ 사업내용

- 친환경차 정부 정책 및 관련 법률에 적극 부응하고자 본사 노후차량 구매

- 긴급복구 및 유지보수용으로 운용 중인 노후 경유 차량을 자동차 법률 및 정책에 따라

친환경 차량으로 교체 구매

- 특수차 점검/정비 시 필요 인력수송 및 물품운반, 비상상황 시 신속한 대응 등을 위하여

업무용차량(전기자동차) 구매

○ 사업근거

- 서울시 교통정책과-11391호(2020.07.06.) 서울시 경유차 퇴출(NO DIESEL) 추진 계획

- 서울시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례 제4조 제1항

-  총무처1555(2020.03.05.)2020년 업무용차량 관리 운영(안)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	공간사업처장: 김정환 ☎9280 팀장: 정재황 ☎9282 담당: 김현석 ☎9307

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	6,116	4,418	72.2	△1,698

승강장안전문 고정문 및 구 광고판을 상시개폐가 가능한 구조의 비상문 및 광고판으로 개선하여 고객안전확보 및 광고사업 지속추진

승강장안전문 비상문 개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업물량:

○ 당년 사업물량:

비상문 4,305개, 광고판 1,499개

1~8호선 비상문 4,305개, 광고판 1,499개

2021.03.

~

2019.12.

○ 총 사업기간:

○ 총 사업비:

26.075백만원

승강장안전문 고정문 및 광고판 개선 추진계획(안) 사장방침-1204

○ 사업근거

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

○ 추진실적

- '17년 7월 추경예산 확정 고정문 개선 매칭펀드 조성 : 261억원 부서 배정

(국비40%, 시비30%, 공사비 30%)

- '20년 11월 승강장안전문(PSD) 비상문 및 대체광고판 제작구매 완료

(1~8호선 비상문 4,305개, 광고판 1,499개)

- '20년 12월 승강장안전문(PSD) 고정문 등 개량공사 완료

(1~8호선 비상문 4,305개, 광고판 1,499개)

- '20년 12월 승강장안전문(PSD) 조명광고용 전원공급장치 등 구매․설치 완료

(5~8호선 85개역 276개소)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 대부분의 사업이 진행 완료되었고 사업 진행중 계약물량 변경 등으로 인해집행금액의

변동이 있었음

- 낙찰차액 및 민자PSD 미개선 미집행액 일부 포함.

○ 집행잔액 발생사유

- 승강장안전문 비상문 개선사업은 공정별 분리발주로 진행되었던 사업으로 여러 사업이

동시에 진행되어 금년 하반기에 예산집행이 집중되는 문제점이 있었으나 공정별

선금지급 등 일부 예산을 조기집행하였고 금년 하반기에 예정대로 사업이 완료되고 있음.

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/기타	500	341	68.2	△159

사업담당자	공간사업처장: 김정환 ☎9280 팀장: 이태형 ☎9281 담당: 김혜성 ☎9301

접근성 좋은 지하철 유휴공간 활용하여 우수한 지역 특산물 판촉 지원공간 조성 및 운영

지하철 빈매장 활용 팝업스토어 운영

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

2개소[사당(2)역226-107호, 고속터미널(7)역734-209호]

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

500,000,000

○ 당년 사업물량:

2개소[사당(2)역226-107호, 고속터미널(7)역734-209호]

○ 추진실적

- 추진결과 : 우수 환승역 2개소에 지역특산물 판촉 지원공간 조성

- 운영추진장소 : 2개소  - 사당(2)역 226-107호, 고속터미널(7)역 734-209호

- 사업효과 : 사업성 뛰어난 거점 역사에 주변대비 저렴한 임대료로(약8%수준)

지역특산물 전용 판촉공간을 운영함으로써 지역경제 활성화 기여

(단위:백만원)

○ 사업근거

예산<서울시 도시철도과-3126('20.3.9.)-문화예술철도 조성 외 7개 사업 시비(출자금) 지출계획 알림> 사업<서울시 지역상생경제과-3817('20.4.8.)-서울시 지역 특판장 수의계약 요청,공간사업처-3812('20.5.6.)-사당(2)역, 고속터미널(7)역 지역특산물 지원 상설매장 임대 계획(안)>

문제점 : 우수한 지역특산물을 많은 시민들이 체험할 수 있도록 가급적 면적이 넓은 점포를 조성하는 것이 좋으나, 면적이 커질수록 임대료가 높아지는점과 대형상가가 부족하다는 한계가 존재하고, 구매 고객이 물건을 이동하는데 어려움을 겪어, 택배사업 연계 등의 검토가 필요개선방안 : 다양한 우수 지역특산물을 판촉할 수 있도록 사업공간 검토시 일정면적 이상 공간을 선정하고, 고객의 편리성을 위하여 사업자가 택배사업을연계하여 운영할 수 있도록 추진

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 집행잔액 발생사유

시범 추진사업으로써 많은 시민들이 우수한 지역특산물을 체감할 수 있도록서울시와 공사 간 접근성이 좋은 장소를 선정하는데 중점을 두었으며, 검토당시 사업에 적합한 장소(2개소)를 선정하여 사업 목적에 부합한 점포 개발에힘썼음.

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]일반운영/사무/수수료/외부대행	20	18	90.0	△2

사업담당자	복합개발처장: 김동진 ☎9261 과장: 김성훈 ☎9255 담당: 최애리 ☎9256

도시형 스마트팜 정착 및 고도화를 위한 연구용역 업무 위탁

스마트팜 관리운영

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 도시농업과-6669,7536

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.05.

~

2020.08.

1식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

19,790,000

○ 당년 사업물량:

1식

○ 추진실적

- 시형 스마트팜 정착 및 고도화를 위한 연구용역 정상적으로 수행하여 결과도출 완료,

서울시에 결과보고 및 정산금 반납 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 잔액 21만원 서울시 반납 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
건물	150	-	0.0	△150

사업담당자	복합개발처장: 김동진 ☎9261 팀장: 장경호 ☎9268 담당: 이상엽 ☎9258

지축차량기지내 자재창고 및 무벽창고 리모델링을 통한 가설 택배분류장 조성

도시철도차량기지 공동물류센터조성

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

사장-745('20.09.03)"차량기지 물류시설 시범개발 계획(안)"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.11.

~

2021.12.

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,900백만원

○ 당년 사업물량:

지축기지 부지면적 11,958㎡(자재창고  2,089㎡, 무벽창고 2,040㎡)

○ 추진실적

- □20.6.~12. 차량기지 물류시설 개발 기본 구상 및 사업타당성 용역

- □20.9.3. 지축기지 시범 개발 방침수립

- □20.10.14. 국고보조금 교부 완료

- □20.11.2. 서울시 출자금 교부 완료

- □20.11.27. 공사 예산 편성 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업추진상 문제점 : 주민 집단 민원 발생으로 고양시청의 반대 입장 표명

- 개선방안 : 국토부 첨단물류과와 고양시와의 지속적 업무 협의를 통해 고양시 요구사항               조율

(단위:백만원)

지축기지 부지면적 11,958㎡(자재창고  2,089㎡, 무벽창고 2,040㎡)

○ 집행잔액 발생사유

- 본 사업은 국비․시비 매칭 사업으로 국․시비 및 공사 예산 편성이□20.11.27. 완료

되었으나, □20년 용역 발주 일정이 마감됨에 따라 미집행

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]일반운영/사무/소모품비	180	158	87.8	△22

사업담당자	서비스운영처장: 곽창현 ☎9580 고객안전팀장: 오진석 ☎9590 담당자: 주찬호☎9593

역사내 안전시설물 확충(화재대피)

√

√

[사업 개요]

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.07.

~

2020.12.

랜턴 382EA, 손수건 46,000EA

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

180백만원

○ 당년 사업물량:

랜턴 382EA, 손수건 46,000EA

○ 추진실적

- 연기투시 랜턴 382EA

- 손수건 25센터 46,000EA

○ 집행잔액 발생사유

- 정산 차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업내용:

- 승객탐지 및 시민 대피용 연기투시 랜턴 구매

- 화재 시 유독가스와 열기를 효과적으로 차단하는 젖은 상태의 손수건 비치

- 서비스운영처-5197('20.07.23)「화재 대피용 연기투시 랜턴 구매 계획 변경(안)」

- 서비스운영처-7109('20.10.06.)「화재용 손수건 구매 게획안)」

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]일반운영/사무/수수료/외부대행	20	19	95.0	△1

사업담당자	서비스운영처장: 곽창현 ☎9580 고객안전팀장: 오진석☎9590 담당자: 정찬익☎9592

사고발생 유형별 맞춤형 개선 대책 마련 및 역사별 안전관리의 효과적인 관리 체계 구축

안전사고 실태조사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서비스운영처-7716('20.10.28)「지하철역 승객 안전사고 실태 분석 및 대응방안 연구 용역(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.10.

~

2020.12.

1식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

20백만원

○ 당년 사업물량:

1식

○ 추진실적

(단위:백만원)

가. 용역개요

1) 계약번호 202011041AB********801

2) 계약건명 : 지하철역 승객 안전사고 실태분석 및 대응방안 수립 용역

3) 계약업체 : 협동조합 사람과 교통

4) 계약금액 : 일금일천구백이십육만칠천원(\19,267,000원)

5) 계약기간 : 2020.11.09.~2020.12.23.(45일)

나. 준공검사 개요

1) 준공검사 기간 : 2020.12.23. ~ 2020.12.30.(준공계 접수일로부터 7일이내)

2) 준공검사 완료일 : 2020.12.28.(월)

3) 검사자 : 서비스운영처 고객안전팀장 오진석

4) 검사결과 : 합격

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정산 차액

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	23,941	23,489	98.1	△452

사업담당자	차량계획처장 : 노인옥 ☎9600 팀장 : 전주연 ☎9601 담당 : 최용각 ☎9608

2,3호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차 교체

2,3호선 노후전동차 교체(196칸)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

- 철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

- 2,3호선 기대수명 도래 전동차 교체 기본계획 변경(차량처-3208호,□14.9.2)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.10.

~

2023.03.

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

264,600백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 전동차 6칸 반입

○ 추진실적

- 2호선 6칸 반입완료

- 2,3호선 전동차 제작중

○ 집행잔액 발생사유

- 선금집행금액에 따른 차액발생(선금집행: 23,000,000,000원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

2,3호선 전동차 196칸(2호선 22칸 개조, 2호선 24칸 제작, 3호선 150칸 제작)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	85,259	82,784	97.1	△2,475

사업담당자	차량계획처장 : 노인옥 ☎9600 팀장 : 전주연 ☎9601 담당 : 신상각 ☎9608

2호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차 교체

2호선 전동차 구매(214칸)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

- 철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

- 2,3호선 기대수명 도래 전동차 교체 기본계획 변경(차량처-3208호,□14.9.2)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.07.

~

2021.12.

2호선 전동차 214칸

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

302,400백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 전동차 114칸 반입

○ 추진실적

- 2호선 114칸 반입 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주·낙찰차액 및 준공차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	20,130	15,818	78.6	△4,312

사업담당자	차량계획처장 : 노인옥 ☎9600 팀장 : 전주연 ☎9601 담당 : 최용각 ☎9608

4호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차 교체

4호선 노후전동차 교체(210칸)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2025.05.

4호선 전동차 210칸

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

294,000백만원

○ 당년 사업물량:

4호선 전동차 계약 체결

○ 추진실적

-전동차 설계 진행 중

○ 집행잔액 발생사유

-선급지급액으로 인한 차이발생 (선금지급: 15,800,000,000원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업근거

- 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

- 철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

- 4,5호선 및 7&8호선(1차분) 내구연한 도래 노후전동차 교체

- 기본계획(안)(차량계획처-21025)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	150	119	79.3	△31

사업담당자	승무시스템처장 안창규 ☎9670 부장 김성호 ☎9673 담당 신선욱 ☎9675

직원의 신체적 피로와 정신적 스트레스 해소

산소캡슐 구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승무본부장-4호('20.02.24) 직원 건강증진을 위한 산소캡슐 구매(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2020.12.

6개

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

150백만원

○ 당년 사업물량:

6개

○ 추진실적

- 2020년 06월 2개 구매, 2020년 12월 추가 6개 구매

○ 집행잔액 발생사유

- 계약 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	650	645	99.2	△5

사업담당자	창동차량사업소장 김정수 ☎7800 팀장 전강남 ☎7850 담당자 김연주 ☎7853

장기 운용중인 현대 교직류 전동차 추진제어장치 전력변환장치용 GTO STACK을 신뢰성이 검증된 신형 IGBT STACK으로 교체하여 안전운행에 만전을 기하고자 함

4호선 전동차 전력변환장치용 IGBT STACK 성능개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 창동차량사업소-4309(2019.09.04)'4호선 현대 교직류 전동차 전력변환장치용

STACK 교체계획(안)'

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.04.

~

2021.02.

전동차 2개 편성

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,300백만원

○ 당년 사업물량:

전동차 1개 편성

○ 추진실적

- 초기에 코로나로 인해 추진에 문제가 되는 듯 하였으나 잘 진행 됨

- 2020. 6월 전동차 1개 편성분 교체 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 2021년 채무계속비로 2021. 2월까지 교체 완료 및 집행 예정

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	2,200	1,672	76.0	△528

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 김용협 ☎9746 담당: 오영철 ☎9747

장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

노후 송배전설비 개량(5~8호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

70KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,900백만원

○ 당년 사업물량:

70KM

○ 추진실적

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차) 준공(개량 완료)

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차) 감리용역 준공

- 5~8호선 고압배전선로 개량(2차)용 전력케이블(녹색제품) 4종 제작구매 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰 차액, 준공정산차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업근거

- 철도의 시설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률

- 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2019-132호)

- 서울특별시 도시철도과-5876(2019. 5. 31.) 「지하철 5~8호선 노후시설 재투자 계획(안)」

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	19,490	14,517	74.5	△4,973

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 정찬희 ☎9736 담당: 하태요 ☎9737

30년이상 장기사용 중인 변전소 노후 전력설비를 적기에 교체, 전력계통안정성을 확보

노후 전력설비 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

2019년도 예산사업

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

1호선 제기변전소 등 4개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

23,500백만원

○ 당년 사업물량:

1호선 제기변전소 등 4개소

○ 추진실적

- 1호선 제기변전소 등 36건 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주, 낙찰차액 및 준공정산차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	410	244	59.5	△166

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 김용협 ☎9746 담당: 오영철 ☎9747

장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

노후 송배전설비 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

31KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,800백만원

○ 당년 사업물량:

31KM

○ 추진실적

- 3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차) 준공(개량 완료)

- 1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차) 준공

- 송배전설비 개량공사(13차) 건설폐기물 처리 용역 2건 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰 차액, 준공정산차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업근거

- 철도의 시설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률

- 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2019-132호)

- 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고(서울특별시 교통정책과-32707호,

2018. 12. 31.)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	5,128	4,638	90.4	△490

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 이성호 ☎9742 담당: 김문성 ☎9745

장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등의 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

노후 전기실설비 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.) □지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

서울(1)역 전기실 등 5개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

5,128백만원

○ 당년 사업물량:

서울(1)역 전기실 등 5개소

○ 추진실적

-전기공사 등 16개 사업 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

-발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	1,400	1,317	94.1	△83

사업담당자	전기처: 처장 윤재국☎9730 팀장 박원주 ☎9738 과장 박재우 ☎9741

전동차의 집전장치에 전력을 공급하는 전차선 등의 가선설비와 부속설비(전철주, 빔, 급전케이블 등) 교체, 보강 및 개량

노후 전차선로 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울특별시 도시철도과-5449호(2020.04.29.) 『서울 지하철 1~8호선 노후시설 재투자 계획(변경)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

0.4KM(V빔 112본)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,000백만원

○ 당년 사업물량:

0KM(V빔 69본)

○ 추진실적

- 2019년 차량기지(신정,지축) V빔 개량공사(준공일 : 2020.06.04)

- 2020년 2호선 전차선로 부급전케이블 개량공사(준공일 : 2020.12.21)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액, 준공정산잔액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	5,126	4,101	80.0	△1,025

사업담당자	전기처: 처장 윤재국☎9730 팀장 박원주 ☎9738 과장 박재우 ☎9741

전동차의 집전장치에 전력을 공급하는 전차선 등의 가선설비와 부속설비(전철주, 빔, 급전케이블 등) 교체, 보강 및 개량

[1~4재투자]노후 전차선로 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울특별시 도시철도과-5449호(2020.04.29.) 『서울 지하철 1~8호선 노후시설 재투자 계획(변경)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

10.4KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

5,126백만원

○ 당년 사업물량:

10.4KM

○ 추진실적

- 2020년 1,2호선 노후 전차선로 개량공사(준공일 : 2020.10.19)

- 2020년 3,4호선 노후 전차선로 개량공사(준공일 : 2020.09.17)

- 2020년 2호선 전차선로 급전케이블 개량공사(준공일 : 2020.11.26)

- 2020년 3,4호선 철주 빔 개량공사(준공일 : 2020.12.14)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액, 준공정산차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	6,079	4,942	81.3	△1,137

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 이성호 ☎9742 담당: 김문성 ☎9745

장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등의 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

[1~4재투자]노후 전기실설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.) □지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

잠실(2)역 전기실 등 4개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

6,000백만원

○ 당년 사업물량:

잠실(2)역 전기실 등 4개소

○ 추진실적

- 전기공사 등 16개 사업 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	6,321	4,925	77.9	△1,396

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 김용협 ☎9746 담당: 오영철 ☎9747

장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

[1~4재투자]노후 송배전설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

67KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

6,400백만원

○ 당년 사업물량:

67KM

○ 추진실적

- 1~4호선 송배전설비 개량 공사(14차) 4건 준공(개량 완료)

- 1~4호선 송배전설비 개량 공사(14차)용 지급자재 제작구매 4건 준공

- 1~4호선 송배전설비 개량 공사(14차) 건설폐기물 처리용역 2건 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액, 준공정산차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- 철도의 시설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률

- 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2019-132호)

- 서울특별시 교통정책과-32707(2018.12.31.) 「지하철1~~4호선 노후시설 재투자

변경계획 보고」

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	5,040	4,236	84.0	△804

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 정찬희 ☎9736 담당: 하태요 ☎9737

30년이상 장기사용 중인 변전소 노후 전력설비를 적기에 교체, 전력계통안정성을 확보

[1~4재투자]노후 전력설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

2020년도 예산사업

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

4호선 이촌변전소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

6,300백만원

○ 당년 사업물량:

4호선 이촌변전소

○ 추진실적

- 공냉식정류기 제작구매 등 11건 준공4호선 이촌변전소 노후전력설비 개량공사 등 7건

진행중

○ 집행잔액 발생사유

- 사업추진에 대한 발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	4,565	3,590	78.6	△975

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 이성호 ☎9742 담당: 박상천 ☎9748

장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등의 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

[5~8재투자]노후 일반전기시설물 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 도시철도과-5876('19.5.31.) "지하철5~8호선 노후시설 재투자 계획(안)"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

5호선 전기실 3개소(왕십리,강동,천호)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

7,575백만원

○ 당년 사업물량:

5호선 전기실 2개소(왕십리,강동)

○ 추진실적

- 전기공사 등 12개 사업 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	1,897	1,599	84.3	△298

사업담당자	전기처: 처장 윤재국☎9730 팀장 박원주 ☎9738 과장 박재우 ☎9741

전동차의 집전장치에 전력을 공급하는 전차선 등의 가선설비와 부속설비(전철주, 애자 등) 교체, 보강 및 개량

[5~8재투자]노후 전차선로 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울특별시 도시철도과-5449호(2020.04.29.) 『서울 지하철 1~8호선 노후시설 재투자 계획(변경)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

11.9㎞

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,492백만원

○ 당년 사업물량:

3.9㎞

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액, 준공정산잔액

- 2020년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사(채무분) 2021년 준공예정

- 2020년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사(세출분 기성일 : 2020.12.7)

- 2020년 고덕차량기지 외 5개소 전차선로 콘크리트전주 개량 공사  (준공일 : 2020.06.23)

- 2020년 전차선로 폐콘크리트 전주 처리용역(준공일 : 2020.07.29)

- 2020년 5~8호선 차량기지구내 급전케이블 접속부 개량 공사  (준공일 : 2020.10.14)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	2,500	2,060	82.4	△440

사업담당자	전기처장: 윤재국 ☎9730 부장: 김용협 ☎9746 담당: 오영철 ☎9747

장기사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로 개량

[5~8재투자]노후 송배전설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

73KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,300백만원

○ 당년 사업물량:

73KM

○ 추진실적

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(3차) 계약 및 추진 중

- 5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(3차) 감리용역 계약 및 추진 중

- 5~8호선 송배전설비 개량공사(3차)용 지급자재 제작구매 2건 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰 차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- 철도의 시설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률

- 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2019-132호)

- 서울특별시 도시철도과-5876(2019. 5. 31.) 「지하철 5~8호선 노후시설 재투자 계획(안)」

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	4,210	3,494	83.0	△716

사업담당자	전기처: 처장 윤재국☎9730 차장 권순홍 ☎9736

기대수명 초과된 변전소 교류차단기반, 직류차단기반, 변압기, 정류기, 충전기반, 축전지반 등 교체 및 통신,기계,소방,건축공사

[5~8재투자]노후 전력설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

지방공기업법시행규칙의 제19조 감가상각의 방법 : 내용연수 20

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.06.

1개소(마장변전소)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

6,000백만원

○ 당년 사업물량:

1개소(마장변전소)

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액 등

- 노후 전력설비 개량공사 등 18건의 발주 중 준공 10건, 진행중 3건, '21년 발주 5건(채무)

- 준공: 특고압개폐장치 제작구매설치 등 물품 10건

- 진행중: 전기공사, 감리용역, 정류기 제작구매설치 등 3건

- 시기미도래: 타분야(건축,기계,소방,통신) 등 냉난방설비구매설치 등 5건(채무)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 윤승호 ☎9805 담당: 김종화 ☎5542

노후열차무선시스템을 LTE-R 방식으로 개량하여 LOT등 급증하는 사내 무선통신 수요 및 국가재난안전망(PS-LTE) 연계에 대비함.

4호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량(2019)

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	14,050	10,636	75.7	△3,414

4호선 31.5KM

4호선 26역, 1개 차량기지, 본선(31.5KM),차량(47편성)

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.05.

~

2020.05.

정보통신처-7146(2019.11.22)"4호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업 시행"

○ 총 사업비:

14,050백만원

○ 사업근거

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

- 발주 13,474백만 원 대비 계약금액이 11,195백만원으로 낙찰율이 낮아져

6월 신속집행 금액이 당초 대비 1,866백만 원 금액 감소

- 6월말 선급금 6,100백만 원 집행

- 12월 928백만원 집행 완료 후 사고이월 추진

○ 추진실적

- 진접선 및 연계 노선 사업시행에 따른 사업 지연

- 진접선 및 안산선, 과천선 사업 시행으로 4호선 열차무선시스템 일정 변경불가피 함

- 교통공사 및 철도공사 차량이 연계 운행되어 시스템 개량 완료 시점 조정필요

․진접선  : 21년12월   ․과천선, 안산선 : 21년 12월

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 집행잔액 발생사유

- 2호선과 동일한 방식 LTE-R 시스템으로 구축 및 상호연계

1) 신속집행 업무 처리로 인한 공고 지연

:조달청에서 상반기 신속집행 업무 처리로 행정업무 지연 및 입찰 과정에서 단일 응찰로

유찰로 인하여 약3개월 이상 계약 지연 됨.

2) 개조승인절차에서 기일소요

: 철도안전법(38조 2)에 의거 열차무선시스템 개량시  (차상장치 개량)국토교통부

개조승인을 받아야 함 (개조승인 소요일수 : 약 6개월)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	10,233	8,378	81.9	△1,855

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 이해영 ☎9815 담당: 진병철 ☎9818

3D 기반 지능형 통합 모니터링 시스템으로 개량, 비상 상황시 대응력 향상, 지하철 내 범죄 예방 등에 적극 활용함으로써 안전한 지하철 환경 조성 및 역사 업무 효율성 향상 기여

[1~4재투자]지능형통합모니터링 개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

정보통신처-2378(2020.04.14) "1,4호선 노후 통합모니터링 시스템 개량 사업 발주 관련 문서"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.11.

1,4호선 36개역, 4개 차량기지(군자,신정,지축,수서)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

18,731백만원

○ 당년 사업물량:

1,4호선 36개역 공사 및 설치

○ 추진실적

- 계약체결 : □20.10.22 - 계 약 자 : 삼성SDS 컨소시움 - 계약금액 : 151억원

- 계약기간 : □20.10.22~□21.9.6

- 준 공 일 : □21.09.(예정)

- 12월 업체 선금집행 : 8,375백만원

○ 집행잔액 발생사유

- `20.7. ~ 8 : 본 공고 및 기술 협상

- `20.9.~10. : 착수보고회 개최, 현장조사 및 상세 설계

- `20.10.~□21.10. : 사업 수행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	9,235	8,293	89.8	△942

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 윤승호 ☎9805 담당: 박정일 ☎5541

노후 열차무선시스템을 LTE-R방식으로 개량하여 LOT등 급증하는 사내 무선통신 수요 및 국가재난안전망(PS-LTE) 연계

[1~4재투자]열차무선시스템 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

정보통신처-2060(2020.03.31) "3호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업 시행"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2022.02.

3호선 34개역, 본선 38.2KM,차량기지 2개소, 전동차 49편성

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

15,392백만

○ 당년 사업물량:

3호선 34개역

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 철도공사 연계구간(삼송~대화) 열차무선통화 방안

- 국가시설공단, 한국철도공사와 통화 및 연계방안 협의 중

□21.03.22 ~ : 차상장기 개조승인 신청예정

- 조달청 자체 계약업무 폭증 등으로 조달 계약 업무처리 상당히 지연(30일)

- 국시비 입찰 진행관련 조달청 회의 실시

‧□20. 09. 02 : 계약체결(엘지유플러스, 계약금 : 11,695,200,000원)

‧□20. 09. 18 : 착수보고회 개최

‧  9월 계약후 노후 열차무선시스템 개량(3호선) 선금지급 (5,800백만 원)

‧□20. 10. 12~11.30 : 상세설계를 위한 역사(차량지기포함),   본선 현장실사 및 전파측정

‧□20. 12. 28 :기지국장치(DU, RRU) 납품검사

‧□20년 사업 선급 및 기성금 최대 집행: 8,293백만 원

-□21년 노후 열차무선시스템 개량(3호선)사업 지속 추진예정

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	3,900	1,624	41.6	△2,276

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 서형춘 ☎9811 담당: 김형렬 ☎9814

국립전파연구원 고시(제2018-30호) 및 장기 운용으로 수명이 종료된 전원설비(UPS,축전지) 교체를 통하여 안정적인 전원을 확보

[5~8재투자]전원설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

정보통신처-2761('20.04.23) "6호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 전원설비 제작구매 설치 시행"-계약번호 제4500070382호 "6호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 UPS 제작구매 설치

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.05.

43개소 86식[6호선(36개소), 7호선(7개소)]

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,900백만원

○ 당년 사업물량:

43개소 86식

○ 추진실적

- 축전지 적격심사 민원 해결후 조속 시행 예정

- 발주 2건 : 854백만 원(UPS 제작구매), 2,999백만 원(UPS용 축전지)

- 계약 2건 : UPS 726백만 원 / 축전지 2,292백만 원 계약 체결

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 11월 축전지 제작구매 설치를 체결하여 주간 설치, 야간  절체작업 병행으로 공정

단축하여 `21. 5월 사업완료

(단위:백만원)

- UPS 6월 계약 및 선금 집행후 12월 준공완료

- "1~4호선 정보통신분야 UPS용 축전지 제작구매 설치공사" 낙찰자 지위확인

가처분신청 소송으로 인한 동일사업 실적에 대한 분쟁발생,  적격심사 중지 요청 민원

접수로 계약이 지연되어 연내 준공이 불가함

-  축전지 사고이월 요청후 `21년 05월까지 공정단축 사업완료 예정

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	100	83	82.8	△17

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 서형춘 ☎9811 담당: 김성동 ☎9809

포스트 코로나 대응과 지하철을 이용하는 고객들에게 출입 전 신속한 정보전달(비상상황 등)을 위해 지하철 출입구에 초지향성 스피커 시스템을 설치, 효과를 분석하여 향후 확대 적용 여부를 판단코자 함.

방송 스피커 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

계약번호-제4500074516호(2020.12.03) "역사 출입구 초지향성 스피커 시스템 제작/구매 설치" 와 관련

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.11.

~

2020.12.

을지로입구역(2호선) 출입구 8개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

100백만원

○ 당년 사업물량:

을지로입구역(2호선) 출입구 8개소

○ 추진실적

- 발주 1건 : 금 95백만원

- 2020.11.06.~11.11. : 사전규격 공개

- 2020.11.13.~11.23. : 입찰 공고 개시

- 계약 체결 : 20.12.01 / 금82백만원후 12월 29(화)일 준공 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 자재 승인과 관련하여 신속한 행정업무 처리로 자재수급일정 단축

- 야간작업 인력 추가 확보로 사업 기한 내 12월 준공 처리

(단위:백만원)

- 없음

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	7,588	5,650	74.5	△1,938

사업담당자	정보통신처장: 김기병 ☎9800 부장: 서형춘 ☎9811 담당: 김성동☎9809

7호선 노후 열차무선시스템을 LTE-R방식으로 개량

[5~8재투자]열차무선시스템 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

정보통신처-2239('20.03.31) "7호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업 변경시행 보고"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.10.

~

2021.12.

42역사, 2차량기지, 본선 46.9KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

18,910백만원

○ 당년 사업물량:

7호선 42역사, 46.9KM

○ 추진실적

- 조달청 8월 25일 입찰 마감후 : □20.09.10. 제안서 평가 예정

- 발주 1건 : 16,653백만 원, 계약 0건 : 10월 14일 14,451백만 원 체결

- 10월 계약 체결 후 12월 선금 최대 지급: 5,650백만원

○ 집행잔액 발생사유

- 조달청 입찰결과 단일응찰로 유찰되어 공정한 사업추진을 위해  재공고에 의한 경쟁입찰

실시

-□21년 노후 열차무선시스템 개량(7호선)사업 지속 추진예정

- 세출예산: 11,322백만원

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 현장실사후 빠른 공사 진도 추진 및 12월 최대 선금지급 노력

- 작업방법의 생산성 검토 및 돌관작업 등 작업장 수 확대 수행 검토

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,000	1,549	77.5	△451

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기 사용으로 내구연한이 초과된 노후레일을 적기에 교체

노후레일 교체(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-선로정비규정 제3장 레일 제18조 (레일의 마모한도 및 수명)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.07.

노후레일 교체 23KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,800백만원

○ 당년 사업물량:

노후레일 교체 23KM

○ 추진실적

- 노후레일 23km 교체 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 발주차액 및 준공정산으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,750	2,230	81.1	△520

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성분기기로 개량

노후분기기 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.06.

노후분기기 개량 40틀

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,750백만원

○ 당년 사업물량:

노후분기기 개량 40틀

○ 추진실적

-노후분기기 40틀 개량교체 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 발주차액 및 준공정산으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

-서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자           변경계획 보고□

-서울교통공사 선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	5,300	4,693	88.5	△607

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기 사용으로 내구연한이 초과된 노후레일을 적기에 교체

[1~4재투자]노후레일 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고□

-선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

노후레일교체 32KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

10,600백만원

○ 당년 사업물량:

노후레일교체 32KM

○ 추진실적

- 노후레일 20km교체 시행

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 발주 및 낙찰차액으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,965	2,737	92.3	△228

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기사용으로 내구연한이 초과된 노후분기기를 성능이 개선된 탄성분기기로 개량

[1~4재투자]노후분기기 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자

변경계획 보고□

-선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.05.

노후분기기 개량 25틀

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,965백만원

○ 당년 사업물량:

노후분기기 개량 25틀

○ 추진실적

- 노후분기기 20틀 개량교체 시행

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 발주 및 낙찰차액으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	600	83	13.8	△517

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기사용 및 내용년수가 초과된 무도상교량 구간 궤도구조를 적기개량 추진

[1~4재투자]교량 궤도시설 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자

변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.05.

~

2021.04.

무도상 궤도시설 개량 3KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

600백만원

○ 당년 사업물량:

기본설계용역 1식

○ 추진실적

- 기본설계용역 계약 및 착수추진

○ 집행잔액 발생사유

- 사업추진 지연 등으로 인한 사고이월 발생

- 사업시기 조정으로 400백만원 예산이월 시행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 신규사업 추진에 따른 사업시행 방안 재검토 등으로 사업지연발생

- '21년 기본설계 완료 및 실시설계 추진으로 사업목적 달성 노력

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	5,600	3,910	69.8	△1,690

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기간 사용으로 노후화되고 내용연한이 초과되었으며, 과다한 유지관리 비용이 소요되는 자갈도상을 근본적으로 개량

[1~4재투자]자갈도상 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자

변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.07.

자갈도상개량 2.2KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

7,000백만원

○ 당년 사업물량:

자갈도상개량 2.2KM

○ 추진실적

- 자갈도상 1.6km 콘크리트 개량시행

○ 집행잔액 발생사유

- 사업추진 지연 등으로 인한 사고이월 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업초기 공정지연 등으로 사고이월 발생  - 현재 공사 정상추진중으로, '21년 상반기

준공예정

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,040	1,633	80.0	△407

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기간 사용으로 노후화되고 내용연한이 초과되었으며, 과다한 유지관리 비용이 소요되는 자갈도상에 대하여 도상교체 및 침목 중량화 등 궤도시설물 안전성 확보

[1~4재투자]고가부 자갈도상 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 교통정책과-32707호(2018.12.31.)□지하철 1~4호선 노후시설 재투자 변경계획 보고□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2021.01.

~

2021.07.

고가부 자갈도상개량교체 1.5KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,540백만원

○ 당년 사업물량:

고가부 자갈도상개량교체 1.5KM

○ 추진실적

- 고가부 자갈도상 개량교체 1.2km 시행

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 발주 및 낙찰차액으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	250	218	87.2	△32

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

고덕기지 소음민원 해소 및 궤도시설 실시간 감시시스템 구축

궤도설비 개량(고덕차량기지 레일장대화 시설개선 공사)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-소음민원 해소를 위한 서울시의원 발의사업

-SCM 추진과제 전담 TF 운영계획(안) (사장방침-202호, `17. 8. 02)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2020.12.

고덕차량기지 레일장대화 / 궤도시설 감시시스템 1식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

250백만원

○ 당년 사업물량:

고덕차량기지 레일장대화 / 궤도시설 감시시스템 1식

○ 추진실적

- 고덕기지 입출고선 레일장대화 완료

- 궤도시설물 공사 및 응급복구 현장 감시시스템 3대 도입

○ 집행잔액 발생사유

- 사업 발주 및 낙찰차액 등으로 인한 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	400	251	62.8	△149

사업담당자	궤도처장: 봉재근 ☎9760 부장: 신황성 ☎9766 담당: 장태경 ☎9763

장기사용으로 노후된 분기기를 성능이 개선된 탄성포인트 분기기로 개량

[5~8재투자]분기기 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

설계용역 1식, 분기기개량 3틀

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

705백만원

○ 당년 사업물량:

설계용역 1식, 분기기개량 3틀(제작구매)

○ 추진실적

- 5~8호선 노후분기기 개량을 위한 기본 및 실시설계 완료

- 공사용 자재 분기기 제작구매 계약

○ 집행잔액 발생사유

- 사업 발주 및 낙찰차액 발생

- 탄성분기기 제작구매 계약 조달수수료 일부금액 이월

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 국내 최초 콘크리트도상 분기기를 개량하는 사업으로 사업초기 지연 발생

- '21년도 궤도공사 추진 시 현장적용성 검토 및 공정관리 시행예정

(단위:백만원)

-서울시 도시철도과-5876호(2019.5.31.)□지하철 5~8호선 노후시설 재투자 계획(안)□

-서울교통공사 선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	신호처장: 진수봉 ☎9780 팀장: 오구식 ☎9790 담당: 정연호 ☎9795

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	1,890	1,890	100.0	-

호선별 관제센터 분리운영에 따른 효율성 저하와 관제시스템 노후화로 개량이 필요함에 따라 관제센터를 통합․구축하여 지하철 안전운행 및 운영의 효율화를 확보

[1~4재투자]노후 관제설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 정상추진 중

○ 집행잔액 발생사유

- 신호분야 선급금 지급(1,400백만원), 전력분야 선급금 지금(1,000백만원)

(비예산 관련 선급금 포함)

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 집행현황

-철도산업발전기본법」 제12조(철도산업의 정보화추진)

-「지하철 관제센터 통합구축 추진계획」 서울시 교통정책과-14801호(□13.7.16)

-「서울지하철 운영시스템 10대 개선방안」 (□14.5.9.)

-「1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획(안)」 신호처-1985호(□18.5.3.)

-「1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계

○ 사업근거

[2020년 사업내용]

○ 당년 사업물량:

관제설비 개량 발주

관제설비 개량

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.10.

~

2021.03.

5,240백만원

○ 총 사업비:

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	신호처장: 진수봉 ☎9780 팀장: 오구식 ☎9790 담당: 김경명 ☎6472

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	7,807	4,037	51.7	△3,770

호선별 분리운영에 따른 효율성 저하 및 유사시 신속한 통제, 관리, 대응의 어려움을 개선하고 노후화된 관제시스템을 현대화하여 지하철 안전운행 확보

지하철 통합관제시스템 구축

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

「철도산업발전기본법」 제12조(철도산업의 정보화추진) -「지하철 관제센터 통합구축 추진계획」 서울시 교통정책과-14801호(□13.7.16)

-「서울지하철 운영시스템 10대 개선방안」 (□14.5.9.)

-「1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획(안)」 신호처-1985호(□18.5.3.)

-「1~9호선 지하철 관제센터 통합 구축 추진계획

○ 사업근거

- 사업비 증가에 따른 계획변경(사업발주 보류)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업비 증가에 따른 계획변경(사업발주 보류)

○ 집행잔액 발생사유

- 1~9호선 통합관제 시스템구축 설계용역 준공(1,707백만원)

○ 추진실적

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

(단위:백만원)

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

설계용역 및 신축공사 발주

관제센터 신축 및 시스템 구축

2024.12.

~

2017.01.

○ 총 사업비:

239,131,000,000

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	119	119	99.7	-

사업담당자	기계처장: 이석종 ☎9830 부장: 오재원 ☎9831 담당: 김홍기 ☎9835

역사 공기조화기 개량 방안(필터개선 + 공기조화기 교체)

강동역 환기설비 시스템 개선(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.09.

~

2021.09.

1개역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,000백만원

○ 당년 사업물량:

1개역

○ 추진실적

- 강동역 환기 시스템 개선 사업 실시설계 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 2021년 강동역 환기 시스템 개선 사업 시행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 역사 환기설비 시스템 개량사업 방법 및 시행시기 서울시 및 환경부 협의

(단위:백만원)

보건환경처-3942호(2019.06.27.)-사장방침(706호) [서울지하철 미세먼지 관리 강화 계획]

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	2,663	1,991	74.8	△672

사업담당자	기계1사업소장: 양기희 ☎5690 부장: 이명복 ☎5707 담당: 김승연 ☎5713

최근 □대기환경보전법□이 개정되어 □18.11.29.부터 역사 냉동기의 냉매 회수·정제 등을 전문업체에 위탁하여 처리하도록 시행

냉동기 냉매 재생용역

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

「대기환경보전법 개정」(2018.11.29.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

냉동기 91대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,370백만원

○ 당년 사업물량:

냉동기 19대

○ 추진실적

- 지하철역사 냉동기 19대 개량 및 3,100kg 냉매 폐기 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 차액 및 낙찰 차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 혹서기 이전에 냉동기 개량을 완료하기 위해 긴급히 사업을 진행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,000	421	21.1	△1,579

사업담당자	전자처장: 유웅석 ☎9850 부장: 강석길 ☎9859 담당자: 박상용 ☎9860

노후 턴스타일게이트를 표준 규격화된 자동개집표기로 개량하여 교통약자, 이용시민 편의증진과 업무효율을 증대하고 코로나19 대응 관련하여 비접촉 결제를 통한 시민안전 도모

[1~4재투자]턴스타일 게이트 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-지방공기업법 시행규칙 및 별표

-서울교통공사 회계규정시행내규

-서울지하철 1~8호선 노후시설 재투자 계획(변경)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.02.

72대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,000백만원

○ 당년 사업물량:

72대

○ 추진실적

-계약심사 및 일상감사 등 발주업무(2020.05.)

-사전규격공개(5.29.~6.03.) 및 계약공고(40일. 6.08~7.20)

-제안서 기술능력 평가(7.23) 및 우선협상대상자 기술협상(7.29~8.12)

-계약체결 : '20.8.14

-턴스타일 개량 공사 계약체결('20.09.10. 계약금액 449백만원)

-승인서 검토(사업수행계획서, 제작사양서 등) 및 기술협상 상세설계

-표준 개집표기 제작 후 지축역 시범설치 ('20.12.11)

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 법률검토 및 사업계획 재수립하여 신속하게 사업완료 예정

- "GATE 비즈니스모델 계약해지"와 관련하여 시설물철거 금지 및 영업방해금지가처분

접수되어 선행공정 지연이 불가피하여 70일 공기연장에 따른 1차 납품계약변경 완료 상태

(1차 준공일 □20.12.20.→ □21.02.28.)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]연구개발비/연구용역	400	74	18.5	△326

사업담당자	건축처장: 조승희 ☎9890 부장: 신동헌 ☎9903 담당: 권민재 ☎9905

지하철 1~9호선 출입구에 대해 실태조사를 실시하고 이를 바탕으로 향후 개발계획, 불합리한 출입구 등을 파악하여 세부개선 대책 마련

지하철 출입구 실태조사 및 세부개선 대책 수립 용역

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

행정1부시장 방침 제285호(2019.10.7.)지하철 출입구 실태조사 및 개선계획 수립(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.10.

~

2021.10.

지하철 1~9호선 출입구

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

400백만원

○ 당년 사업물량:

지하철 1~9호선 출입구

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 현재 전체 누계 공정 9.52%(□20.11월 기준)로 계획 대비 실적 100%로 용역수행

중이며, 사업기간 내 완료 예정

(단위:백만원)

- 정상 추진 중: 선금 지급(2020.11.), 73,000,000원

- 해당 사업은 용역기간이 1년 이상 소요되는 사업으로 □20.4월 서울시 및 토목처로부터

업무 이관 받아 협상에 의한 계약체결 방식으로 추진하였음

- 협상에 의한 계약체결을 위해 제안서 작성(도시철도기관 최초시행 사업),서울시 협의,

평가위원회 선정, 입찰공고, 제안서 평가 등 추진 절차 상 많은 시간 소요

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	967	792	81.9	△175

사업담당자	전기1사업소장: 황홍기 ☎5000 부장: 오옥근☎5030 담당:박윤균 ☎5018

장기사용으로 노후된 전기실 및 변전소 비상전원설비를 적기에 교체하여 장애를 미연에 방지하고 안정된 전력공급계통 구축

[1~4재투자]노후 비상전원설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-1~4호선 전기기능실 노후 충전기반 교체(안)전기1사업소-9143호('19.8.2)

-1~4호선 전기실 노후 축전기 교체(안)전기1사업소-9210('19.8.5)

-자동절체개폐기(ATS)개량사업시행(안)전기1사업소-8902('19.7.26)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

변전소(충전기,축전지41)전기실(충전기116)ATS266축전기114)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

967백만원

○ 당년 사업물량:

변전소(충전기7,축전지7)전기실(충전기15,ATS 12 축전기17)

○ 추진실적

-노후 비상전원설비 개량(1~4호선)

-변전소 : 충전기반 7개소, 축전지반 7개소

-전기실 : 충전기반 15개소, ATS 12개소, 축전지반 17개소

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액 및 보험료, 공인기관 시험비 정산

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	신호1사업소장: 진수봉 ☎5600 P/L 박종선☎5630 부장 이기준 ☎5635

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	12,290	8,916	72.5	△3,374

개통 30년 이상 사용으로 노후된 열차제어용 전선로를 적기에 개량하여 화재 취약성 개선 및 장애요인 사전 제거로 열차 안전운행 확보

노후 전선로 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

노후 전선로 1,411KM 개량

노후 전선로 1,411KM 개량

2023.12.

~

2018.01.

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업비:

83,766,000,000

신호처-20353(2018.06.19.)『2,3,4호선 신호설비 전선로 개량 추진계획(안)』

○ 사업근거

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

○ 추진실적

- 3호선 전선로 개량공사(독립문~약수) - 계약액 : 7,044,603,993원

- 4호선 전선로 개량공사(길음~충무로) - 계약액 : 7,693,242,000원

- 3,4호선 전선로 개량공사 건설 폐기물 처리 용역 - 계약액 : 13,534,000원

- 3, 4호선 전선로 개량공사용 자재 직접구매(케이블트레이) - 계약액 : 498,254,705원

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 3호선 전선로 개량공사(독립문~약수)

: 발주 및 낙찰차액, 절대공기 부족으로 인한 예산이월(15,000,000원)

- 4호선 전선로 개량공사(길음~충무로)

: 발주 및 낙찰차액, 절대공기 부족으로 인한 예산이월(15,000,000원)

- 기타 공사 : 발주 및 낙찰차액 발생

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	308	257	83.4	△51

사업담당자	신호1사업소장: 진수봉 ☎5600 P/L 박종선☎5630 부장 이기준 ☎5635

장기사용과 사용 횟수가 과다한 주요 회차역 및 입출고 개소의 노후화된 선로전환기를 적기에 교체함으로서 사전 장애예방과 열차 안전운행 확보

[1~4재투자]노후 선로전환기 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

신호처-724호(2020. 2. 11.)「1~8호선 선로전환기 개량 시행 기준(안)」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

선로전환기(13대)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

308000000

○ 당년 사업물량:

선로전환기(13대)

○ 추진실적

- 전기선로전환기(NS-AM형) 등 4종 제작구매

: 계약액 : 142,855,342원, 준공액 : 142,855,342원, 납품검사일 : 2020.07.03.

- 2020년 2, 3, 4호선 선로전환기 개량공사

: 계약액 : 120,862,044원, 준공액 : 113,612,504원, 준공검사일 : 2020.12.11.

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰, 준공정산 차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	10,640	7,864	73.9	△2,776

사업담당자	신호1사업소장: 진수봉 ☎5600 P/L 박종선☎5630 부장 이기준 ☎5635

개통 30년 이상 사용으로 노후된 열차제어용 전선로를 적기에 개량하여 화재 취약성 개선 및 장애요인 사전 제거로 열차 안전운행 확보

[1~4재투자]노후 전선로 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

신호처-20353(2018.06.19.)『2,3,4호선 신호설비 전선로 개량 추진계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2023.12.

노후 전선로 1,411KM 개량

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

83,766,000,000

○ 당년 사업물량:

노후 전선로 1,411KM 개량

○ 추진실적

- 3호선 전선로 개량공사(옥수)

: 계약액 : 2,259,656,325원, 준공액 : 2,025,687,315원, 준공검사일 : 2020.12.26.

- 4호선 전선로 개량공사(동작)

: 계약액 : 2,369,390,313원, 준공액 : 2,074,689,919원, 준공검사일 : 2020.12.26.

- 4호선 전선로 개량공사(서울~이촌)

: 계약액 : 5,400,188,620원, 기성1차 : 1,110,000,000원(2020.06.24.),

기성2차 : 2,067,968,620원(2020.12.24.)

- 2020년 3, 4호선 전선로 개량공사용 자재 직접구매(MAS)

: 계약액 : 323,525,016원, 준공액 : 323,525,016원, 납품검사일 : 2020.12.15.

(단위:백만원)

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 발주 및 낙찰, 준공정산 차액 발생

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	3,100	2,551	82.3	△549

사업담당자	신호1사업소장: 진수봉 ☎5600 차장 김윤수 ☎5615

1~4호선 무정전전원장치개량

[1~4재투자]무정전전원장치 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 추진실적

- 1~4호선 신호기계실 무정전전원장치용 낙뢰방호장치 구매

: 계약액 : 457,555,810원, 준공액 : 457,555,810원, 검수완료일 : 22020.08.07.

- 수락산역 등 23개소 신호기계실 축전지 제작구매 설치

: 계약액 : 860,114,092원, 준공액 : 860,114,092원, 납품검사일 : 2020.12.27.

-  2020년 군자차량기지 등 40개 신호전원장치(UPS) 제작구매 설치

: 계약액 : 578,831,083원, 준공액 : 578,831,083원, 납품검사일 : 2020.12.29.

- 1~4호선 신호기계실 전원장치(정류기) 제작구매 설치

: 계약액 : 646,769,960원, 준공액 : 646,769,960원, 납품검사일 : 2020.12.29.

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

- 발주 및 낙찰차액

○ 집행잔액 발생사유

129식(UPS 19개소, 축전지 11개소, 정류기 80조, 무정전보호 낙뢰방지시스템  24

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

129식(UPS 19개소, 축전지 11개소, 정류기 80조, 무정전보호 낙뢰방지시스템  24개

2020.12.

~

2020.01.

○ 총 사업기간:

○ 총 사업비:

3,100백만원

신호1사업소-1948호(UPS), 신호2사업소-1584(축전지), 신호1사업소-2423호(정류기), 신호1사업소-2951호(낙뢰방호장치)

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	4,520	3,856	85.3	△664

사업담당자	기계1사업소장: 양기희 ☎5690 팀장: 임형진 ☎5691 담당: 이정민 ☎5711

본선환기설비(송풍기, 소음기, 댐퍼, 동력제어반, 자동제어 등) 전면 교체, 원형계단 등 안전시설물 신설

본선환기설비 개량 공사(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

지하철 1~4호선 노후시설 재 투자 계획에 따른 본선(터널)환기 개선 계획(안) 기계전자처-728(2012.05.08.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

총 6개소 송풍기 15대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,620백만원

○ 당년 사업물량:

총 6개소 송풍기 15대

○ 추진실적

- 2020.06 "2019년 본선환기설비 개량사업 송풍기 제작구매 설치" 납품완료

- 2020.06 "2019년 본선환기설비 개량사업 동력제어반 제작구매 설치" 납품완료

- 2020.06 "2019년 본선환기설비 개량사업 댐퍼 제작구매 설치" 납품완료

- 2020.06 "본선환기설비 개량사업 소음기 제작구매 설치" 납품완료

- 2020.10 "압구정역 등 3역 본선환기실 개량 건축공사" 준공완료

- 2020.11 "2019년 본선환기설비 개량사업 기계공사" 준공완료

- 2020.11 "2019년 3,4호선 본선환기설비 개량 전기공사" 준공완료

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	680	458	67.4	△222

사업담당자	기계1사업소장 : 양기희 ☎5690 P/L: 임형진 ☎5691 담당자: 유용진 ☎5743

화재 초기 단계에서 발생하는 연기 등을 감지, 화재구역의 연기 배출, 비화재구역은 연기 확산 방지

노후 제연설비 개량(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2023.12.

98역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

44,780백만원

○ 당년 사업물량:

1역

○ 추진실적

- 3호선 불광역 노후 제연설비 개량 기계공사 준공('20.06.22.)

- 3호선 불광역 노후 제연설비 개량 소방공사 준공('20.06.22.)

- 3호선 불광역 노후 제연설비 개량 소방공사 감리용역 준공('20.07.01)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 낙찰차액 및 준공정산으로 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- '2017년 철도안전관리체계 정기검사 및 수시검사 시정 조치 통보' 국토교통부,철도안전정책과-4992(2017.12.08)

- 노후 제연설비 개량 세부 추진 계획(안) 기계1사업소-2407(2019.03.14.)

- 노후 제연설비 개량 공사 사업 계획 보고(2019년 노후 제연설비 개량)(2020.01.29.)

○ 사업근거

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	4,591	3,638	79.2	△953

사업담당자	기계1사업소장: 양기희 ☎5690 P/L: 임형진 ☎5691 담당자: 유용진 ☎5743

화재 초기 단계에서 발생하는 연기 등을 감지, 화재구역의 연기 배출, 비화재구역은 연기 확산 방지

[1~4재투자]노후 제연설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2023.12.

98역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

44,780백만원

○ 당년 사업물량:

6역

○ 추진실적

정상 추진 - 2호선 신당역 등 3개역 노후 제연설비 개량 공사 준공(12/18)

- 2호선 신당역 등 3개역 노후 제연설비 개량 공사 소방감리용역 준공(12/29)

- 4호선 삼각지역 등 3개역 노후 제연설비 개량 공사 준공(12/18)

- 4호선 삼각지역 등 3개역 노후 제연설비 개량 공사 소방감리용역(12/29)

- 2호선 신당역 등 6개역 R형(GR형) 복합식 화재수신기 및 중계기 제작 구매 준공 완료(준공검사일 12/28)

- 4호선 총신대입구역 등 8개역 노후 제연설비 개량 공사 실시설계용역 준공(8/15)

- 4호선 총신대입구역 등 6개역 노후 제연설비 개량 공사 계약 및 제1회 기성 집행(계약기간 : '20.11.20 ~ '21.09.15)

(단위:백만원)

- '2017년 철도안전관리체계 정기검사 및 수시검사 시정 조치 통보'

국토교통부,철도안전정책과-4992(2017.12.08)

- 노후 제연설비 개량 세부 추진 계획(안) 기계1사업소-2407(2019.03.14.)

- 노후 제연설비 개량 공사 사업 계획 보고(2019년 노후 제연설비 개량)(2020.01.29.)

○ 사업근거

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

- 발주, 낙찰차액 및 준공, 지연배상금 정산으로 집행잔액 발생

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	4,050	3,222	79.6	△828

사업담당자	기계1사업소장: 양기희☎5690 P/L: 임형진☎5691 부장: 박종문☎5726 담당: 김대혁☎5727

장기사용으로 성능이 저하된 소방펌프 및 부식이 심한 소방배관 교체와 동절기 동파 예방을 위한 동파방지설비를 신설하여 화재 등 긴급 상황 발생 시 신속한 화재 진화로 인명과 재산 피해를 최소화하고자 함

[1~4재투자]소방펌프와 배관시설 보완

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 대한 법률

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

34개역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,050백만원

○ 당년 사업물량:

34개역

○ 추진실적

- 실시설계용역: 준공(2020.06.23.)

- 소방펌프 구매: 납품완료(2020.06.24.)

- 동력제어반 구매설치: 설치완료(2020.06.24.)

- 소방배관 및 기타공사: 준공(2020.12.24.)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주,낙찰차액 및 준공정산에 따른 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	기계1사업소장:양기희 ☎5690 P/L:임형진 ☎5691 차장:백경열 ☎5733외1명

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	850	754	88.7	△96

[1~4재투자]노후 급배수설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

노후 급배수설비(오배수 펌프, 오배수 조작반) 교체

○ 사업근거

지하철 1~4호선 노후시설 재투자(서울시 도시철도과-250(2019.01.09))

○ 당년 사업물량:

20역

20역

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.01.

~

2020.12.

850백만원

○ 총 사업비:

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

○ 추진실적

1. 오배수 조작반 교체 : 9역 추진완료

- 사업명 : 1호선 서울역 등 9역 14개소 배수펌프 동력제어반 제작설치

- 계약금액: 178,272,000원, 계약기간:20.3.26 ~ 07.13, 준공: 20.06.18(178,272,000원)

- 사업명 : 1호선 서울역 등 9역 16개소 오.급수(소방)펌프 동력제어반 제작설치

- 계약금액: 116,994,900원, 계약기간: 20.04.22 ~ 07.30, 준공:20.06.25.(113,536,666원)

2. 오배수 펌프 교체 : 11역 추진완료

- 사업명 : 길음역 등 11개역 수중모터펌프 제작설치

- 계약금액: 468,700,840원, 계약기간: 20.06.01~11.22, 준공: 20.11.26(462,361,583원)

- 낙찰차액에 따른 집행잔액 발생

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

1. 추진상문제점 : 국비지원분야 한정으로 예산삭감으로 사업축소

∙ 예산 : (변경전) 1,901백만원 -> (변경후) 850백만원

∙ 사업물량 : (변경전) 25역 -> (변경후) 20역

- 오배수토출배관 교체 : (변경전) 5역 -> (변경후) 0역

-  오배수펌프 교체 : (변경전) 11역 -> (변경후) 11역

- 오배수조작반 교체 : (변경전) 9역 -> (변경후) 9역

2. 개선방안 : 노후 급배수설비 개량을 위해 삭감예산 차년도 반영

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	750	595	79.3	△155

사업담당자	기계1사업소장: 양기희☎5690 P/L: 임형진☎5691 부장: 박종문☎5726 담당: 김대혁☎5727

자동화재탐지설비용 화재수신기의 잦은 오동작으로 화재경보를 발하여 이용승객의 불편 및 민원발생과 잦은 출동으로 점검 인력낭비 및 소방시설의 일부 기능이 마비되어 소방시설의 완벽한 기능유지를 위하여 교체코자 함

[1~4재투자]화재수신반 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 대한 법률

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

9개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

750백만원

○ 당년 사업물량:

9개소

○ 추진실적

- 실시설계용역: 준공(2020.05.25.)

- GR형 복합식 화재수신기 및 중계기 구매: 납품완료(2020.06.24.)

- 화재수신기 교체공사: 준공(2020.12.28.)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주,낙찰차액 및 준공정산에 따른 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	100	79	79.0	△21

사업담당자	기계1사업소장: 양기희☎5690 P/L: 임형진☎5691 부장: 박종문☎5726 담당: 김대한☎5706

노후화된 바닥유도등 교체와 전원 배선방식을 변경하여 화재 시 이용승객의 신속한 피난유도로 인명피해를 최소화하고자 함

[1~4재투자]역사 바닥유도등 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 대한 법률

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

25개역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

4,800백만원

○ 당년 사업물량:

25개역

○ 추진실적

- 실시설계용역: 준공(2020.04.23.)

- 국시비 미지급으로 인하여 사업 보류

○ 집행잔액 발생사유

- 발주, 낙찰 차액에 따른 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 예산 수령 후 사업 재개 예정

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	기계1사업소장: 양기희 ☎5690 팀장: 임형진 ☎5691 담당자: 박용석 ☎5710

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,355	983	72.5	△372

건설당시 바닥도장 미시공 개소 및 바닥방수 누수가 심한 환기실 바닥 개량 및 배수로 정비를 통하여 누수방지

[1~4재투자]역사환기실 바닥 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

감사실-3293호(2016.07.21.)□환기설비 유지관리 실태 특별조사 결과보고□(사장방침)

○ 사업근거

21역

49역

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.01.

~

2020.12.

1,355백만원

○ 총 사업비:

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

- 공정진행 : 준공완료(6건), 발주 6건 : 1,220.3백만원 중 준공완료 6건(975.4백만원)  - 3,4호선 환기실 바닥 개량공사(1공구), 계약금액 146.9백만원,   공사기간 : □20.4.6~□20.6.4    → 준공금액 138.4백만원 준공일 □02.06.01

- 홍제역 외 2역 환기실 개량공사(2공구), 계약금액 171.1백만원,

공사기간 : □20.5.1~□20.6.29    → 준공금액 160.1백만원 준공일 20.06.22

- 구파발역외 2역 환기실 개량공사(3공구), 계약금액 121.4백만원,

공사기간 : □20.5.7~□20.7.5    → 준공금액 114.4백만원 준공일 20.06.22

- 시청(1)역외 3역 환기실 개량공사(4공구), 계약금액 176.4백만원,

공사기간 : □20.6.9~□20.8.7    → 준공금액 160.7백만원 준공일 20.08.07

- 교대(2)역외 3역 환기실 개량공사(5공구), 계약금액 253.6백만원,

공사기간 : □20.6.10~□20.8.8    → 준공금액 237.2백만원 준공일 20.08.10

- 도림천역외 2역 환기실 개량공사(6공구), 계약금액 169백만원,

공사기간 : □20.6.08~□20.8.6    → 준공금액 164.6백만원 준공일 20.08.06

○ 추진실적

- 정상 추진 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액 및 준공정산으로 인한 차액 발생

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	9,713	7,234	74.5	△2,479

사업담당자	기계1사업소장: 양기희 ☎5690 부장: 이병식 ☎5726 담당: 김대혁 ☎5727

별도의 소화설비가 없는 지하 터널구간 화재발생 시 진화를 위한 연결송수관 설비 설치하여 인명 및 재산피해를 최소화하고자 함

[1~4재투자]터널내 연결송수관 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 건설교통부 도시철도 종합안전대책 건설규칙 제71조(터널안의 연결송수관 설치 등)

- 국토교통부 종합안전대책 시행

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

115.1KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

9,713백만원

○ 당년 사업물량:

27KM

○ 추진실적

- 터널내 연결송수관설비 27km 설치 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 차액 및 낙찰 차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 터널내 공사 시행으로 야간감독자 부족으로 공사 시행에 어려움이 있음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	7,415	2,835	38.2	△4,580

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 부장: 유인상 ☎5400 담당: 장한얼 ☎5403

인체에 유해한 석면함유 뿜칠재를 제거함으로써 근무 직원이 석면으로부터 안심하게 근무할 수 있는 환경을 마련코자 함

공기질 개선(석면)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-2015년도 석면제거현황 및 관리계획(기술본부장방침,시설처-755,2015.01.22.),

-석면함유 뿜칠재 제거 공사 발주계획 보고(기술본부장방침,건축처-1155,2018.02.22.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.12.

석면뿜칠재 및 텍스 6,882M2

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

18,516백만원

○ 당년 사업물량:

석면뿜칠 및 텍스제거 4417M2

○ 추진실적

-시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사 등 9건

-계획/실적: 86%/86%(공정률 2021년 1월말 기준 정상추진)

(단위:백만원)

-19년 낙찰차액이 20년 발주잔액으로 변경되어 표기됨

○ 집행잔액 발생사유

- 본 공사는 국, 시비를 지원받아 추진되는 사업으로 □17년 설계완료 후□18. 2월 공사

발주〔공사기간 □18~□19(2년)〕계획이었으나, 지하역사 등 내진보강공사

지시(국토부)로 토목1사업소에서 시청②역은 □18년 시행예정인석면제거공사와 공정

분담 후 공사를 시행한다는 기술본부장 방침수립(토목1사업소-1036호)

- 본 방침에 따라 효율적인 공사와 예산낭비 방지를 위해 석면제거공사와 내진보강공사

동시 추진으로 불가피하게 공사기간〔□19~□21(3년)〕으로 계약체결 후 공사를

추진하고 있어 사고이월이 불가피함

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	26,833	9,548	35.6	△17,285

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 부장: 김대우 ☎5399 담당: 한용진 ☎5387

노후시설 개선 및 냉방시설 신설, 미세먼지 저감등 쾌적한 환경조성

역사환경 공기질 개선(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

건축처-5899(2019.11.05) 잠실새내역 환경개선(냉방) 건축공사 시행보고

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.04.

1역(잠실새내역)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

38,333백만원

○ 당년 사업물량:

1역(잠실새내역)

○ 추진실적

- 공사진행중(공정률: 94%/94%)

○ 집행잔액 발생사유

- 기계설비 재설계로 인한 공사기간 변경('20.12월 ▷'21.4월)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- '21.4.30일 준공예정

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,250	864	69.1	△386

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 담당: 김선혜 ☎5372

장애인 화장실 남녀 구분설치 및 평면 재배치, 시설물 확충을 통해 교통약자 편의 증진

지하철역 화장실 확충(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

건축1사업소-267(2020.1.9)지하철역 화장실 개량공사

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

신답역,대청역,사당(4)역 화장실 확충공사

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,250백만원

○ 당년 사업물량:

신답역, 대청역, 사당(4)역 확충공사

○ 추진실적

- 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

- 무악재역 공사금액 부족 추진하지 못함

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	34,615	5,079	14.7	△29,536

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 부장: 김대우 ☎5399 담당: 이성현 ☎5391

쾌적한 지하철 환경 조성을 위한 지하역사 냉방설비 설치 및 노후역사 전면 리모델링, 문화예술철도 조성, 장애물 없는 생활환경 인증을 통한 교통약자 편의증진

역사 환경개선

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

사장 방침-363호(□19.04.03)「노후 역사 환경개선 추진계획 변경 보고」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.12.

2역(쌍문역,미아역)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

70,010백만원

○ 당년 사업물량:

2역(쌍문역 미아역)

○ 추진실적

- □19.03 ~ 19.07: 제안 설계공모

- □19.08 ~ 20.02: 설계용역 계약 및 시행

- □20.03 ~ 20.06: 서울시 계약심사 및 발주

- □20.08 ~ 20.10: 계약 및 착공

- □20.10 ~ 현재 : 공사 진행중

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 21년 준공예정

(단위:백만원)

-21년도 준공 공사로 선금 및 기성으로만 당해년도 예산 소진이 어려움

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	30,984	16,268	52.5	△14,716

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 담당: 김종경 ☎5397

지역 균형발전 및 지하철 역사 노후화에 대한 사회적 관심과 개선요구에 따라 1호선 개선사업

역사 리모델링

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시 도시철도과-5578호(19.05.23.)"1,4호선 지하철 노후역사 환경개선 추진 계획(변경)"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2021.02.

종로5가, 동대문, 신설동, 서울역. 종각, 종로3가, 제기동. 청량리

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

86,726백만원

○ 당년 사업물량:

종로5가, 동대문, 신설동

○ 추진실적

- 2단계(서울역, 종각, 종로3가, 제기동, 청량리) 설계용역 완료-1단계(종로5가, 동대문,

신설동) 공사 시행중

○ 집행잔액 발생사유

- 1단계 공사시행중, 정보통신처에서 시행하는 노후 통합 모니터링 시스템 개량사업으로

인한 마감공사 잠정중지에 따른 공사기한연기

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	610	418	68.5	△192

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 담당: 김영민 ☎5374

지하철 캐노피 설치(동대입구역)1번출구 등 3개소, 숙대입구역 9번출구 등 2개소

역사 출입구 및 캐노피 개선(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

건축1사업소-563(2020.1.20)2020년 예산사업추진계획 보고

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

동대입구역1번, 약수역2번, 숙대입구역9번, 동대입구역4번

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

500백만원

○ 당년 사업물량:

동대입구역1번, 약수역2번, 숙대입구역9번, 동대입구역4

○ 추진실적

- 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

- 준공완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	300	228	76.0	△72

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 담당: 이성현 ☎5391

홍제역 승강장 고객대기실 설치 2개소(냉난방기 설치)

역사 환경개선(고객대기실 설치)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

건축1사업소563(2020.1.20.)2020년 예산사업추진계획 보고

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

고객대기실 설치2개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

200백만원

○ 당년 사업물량:

고객대기실 설치 2개소

○ 추진실적

- 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

- 준공완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]연구개발비/연구용역	100	88	88.0	△12

사업담당자	건축1사업소장: 손태진 ☎5350 담당: 이성현 ☎5391

장애인,고령자,임산부등, 지하철 이용 교통약자와 외국인을 위한 기존 지하철 안내체계 보안 검토

교통약자 외국인을 위한 지하철 안내체계 검토용역

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

건축1사업소-4057(2020.5.26) 교통약자와 외국인을 위한 지하철 안내체계보안사항 검토 요청

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

교통약자와 외국인을 위한 지하? 안내검토 용역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

100백만원

○ 당년 사업물량:

교통약자와 외국인을 위한 지하철 안내검토 용역

○ 추진실적

- 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

- 준공완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	11,328	8,009	70.7	△3,319

사업담당자	정보통신1사업소장: 손종규 ☎5550 부장: 심지연 ☎5521 담당: 안창식 ☎5522

국립전파연구원 고시(제2018-30호) 및 장기 운용으로 수명이 종료된 전원설비(UPS,축전지)교체를 통하여 안정적인 전원을 확보.

[1~4재투자]무정전 전원설비 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

114식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

11,328백만원

○ 당년 사업물량:

114식

○ 추진실적

- UPS 와 축전지로 분리 발주 및 사업수행

- 준공 3건: 94백만 원(당고개/신정기지 UPS전력간선 전기공사),82백만 원(종각/신답

UPS전력간선 전기공사),3,519백만 원(UPS 제작구매 설치)

- 진행 1건: 5,447백만 원(UPS용 축전지 제작구매 설치), 선금지급: 4,313백만 원

- UPS용 축전지 가처분 소송으로 인한 사업중단기간(3개월) 장기화로 예산이월

(단위:백만원)

- 문제점:UPS용 축전지 가처분 소송으로 인한 사업중단 기간 장기화로 공정기간 연장

불가피

- 개선사항: UPS용 축전지 제작구매 설치 건 다수 설치팀 운영으로 일평균 설치개소

증대시켜 공정 단축

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 소송으로 인한 사업중지로 불가피한 사업기간 연장 및 예산 이월.

-"1~4호선 정보통신분야 UPS용 축전지 제작구매 설치" 건에 대한 "계약 효력정지 및

낙찰자 지위확인 가처분 소송"으로 인하여 소송기간 내 사업

일시중지(□20.08.06.~□20.11.02.).

○ 집행잔액 발생사유

-국립전파연구원 고시 제2018-30호 제34조(예비전원 설치)

-정보통신처-4851호(2019.08.06.)□『정보통신분야』전원설비(UPS,축전지)개량

계획(안)□

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	27,869	11,471	41.2	△16,398

사업담당자	토목1사업소장: 고희규 ☎5140 P/L: 장승주 ☎5143 담당: 조선주 ☎5181

이용시민 편의 증진을 위한 승강편의시설(E/S, E/L) 확충사업

승강편의시설 설치 매칭(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-법률 제28211호「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」

-법률 제7382호「교통약자의 이동편의증진법」

-국토해양부고시「도시철도 정거장 및 환승․편의시설 설계 지침」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

26개소 E/S 23대, E/L 16대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

68,417백만원

○ 당년 사업물량:

26개소 E/S 23대, E/L 16대

○ 추진실적

- 3-1~13공구 26개소 E/S 23대, E/L 16대 시공중. 정상 추진중

- 건설사업관리용역(1차, 2차) 정상 추진 중

○ 집행잔액 발생사유

- 지장물 이설(전력구, 통신관로 등) 협의 지연으로 인한 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 지장물 이설 및 관계기관 적극 협의를 통해 지연 발생 최소화

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	54,762	38,356	70.0	△16,406

사업담당자	토목1사업소장:고희규 ☎5140 P/L: 안태중 ☎5142 주임: 김준호 ☎5588

기존시설물의 내진성능 상세평가결과 내진보강이 필요한 고가, 교량 및 지하구조물에 대한 내진 보강공사 시행으로 열차 안전운행 및 이용시민 안전 확보

지하철 내진성능 보강

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 지진재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)

- 동법 시행령 제11조(내진보강대책 수립 대상 시설 및 방법 등) <□08.3.제정>

- 도시철도 내진보강 추진계획 수립(서울시장 방침,□11.4)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

53.2KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

322,100,000,000

○ 당년 사업물량:

지하역사 7공구

○ 추진실적

- 지하역사 13-1공구, 18, 25~30공구 토목 및 시스템 분야 발주완료 및 공사추진중

- 지하구조물 13공구 준공완료(시스템분야 '21년 준공예정)

-'18년 국고보조금 최대 집행을 위한 기성고 상향(당초34%->변경61%)

○ 집행잔액 발생사유

- 지장물 이설 소요기간 및 설계변경(증)으로 인한 일부 집행잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	7,127	4,765	66.9	△2,362

사업담당자	토목1사업소장: 고희규 ☎5140 P/L: 장승주 ☎5143 담당: 조선주 ☎5181

이용시민 편의 증진을 위한 승강편의시설(E/S, E/L) 확충사업

승강편의시설 설치 출자(1~4호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-법률 제28211호「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」

-법률 제7382호「교통약자의 이동편의증진법」

-국토해양부고시「도시철도 정거장 및 환승․편의시설 설계 지침」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2023.03.

(공사) E/S 27대, E/L 2대 (설계) E/S 36대, E/L 8대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

32,176백만원

○ 당년 사업물량:

(공사) E/S 27대, E/L 2대 (설계) E/S 36대, E/L 8대

○ 추진실적

- C-1~3 공구 정상 추진 중기본 및 실시설계용역(대림역 등 15역) 정상 추진 중

○ 집행잔액 발생사유

- 지장물 이설(전력구, 통신관로 등) 협의 지연으로 인한 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 관계기관(구청, 경찰서), 지장물 이설 적극 추진하여 지연 발생 최소화

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	10,304	5,814	56.4	△4,490

사업담당자	토목1사업소장: 고희규 ☎5140 P/L: 안태중 ☎5142 주임: 김준호 ☎5588

지하철 2~4호선 지상구간에 대하여 현재 기 설치된 콘크리트 방음벽(2M)의 노후화 및 소음저감 효과 저조 등에 따라 방음효과 및 미관이 우수한 알루미늄 흡음형 방음벽(4M)으로 교체 추진

지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 소음진동관리법 제27조 및 동법 시행규칙 제37조「철도교통 소음 한도」

- 도시철도 지상구간 소음저감 방안 추진계획(서울시장 방침-124호, □10.3.17)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2023.03.

10.2KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

190,500,000,000

○ 당년 사업물량:

4.7KM

○ 추진실적

- 한양대~뚝섬 구간 지장물 이설공사 발주 완료 및 공사 추진중

- 한양대~뚝섬 계획:5.13 / 실적:14.25 / 대비:277.7

- 상계~노원 계획:37.94 / 실적:37.8 / 대비:99.87

- 강변~잠실나루 계획:30.86 / 실적:29.02 / 대비:94.04

○ 집행잔액 발생사유

- 시비 확보 지연으로 인한 한양대~뚝섬 구간 지장물 이설공사 발주지연

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	650	207	31.8	△443

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎5140 P/L: 한우진 ☎5141 담당: 정태선 ☎5586

성신여대입구역 #4-046번 외 5개소 단면 폭 축소 공사 시행으로 보도 폭 확장

환기구 정비

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

도시철도과-9093(′19.08.20.)『지하철 5~8호선 노후시설 재투자 등 12개 사업 추경예산(출자금) 지출계획 알림

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.11.

~

2020.07.

구조물 철거 및 신설공 1식, 차수문 설치공 1식, 환기구 정비공 1식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

579백만원

○ 당년 사업물량:

구조물 철거 및 신설공 1식, 차수문 설치공 1식, 환기구 정비공 1식

○ 추진실적

-공사 정상 준공 ('20.07.31.)

○ 집행잔액 발생사유

- 1)최초 예산 배정액 (1,050백만원) 및 설계금액 (685백만원)간 차이 발생

2) 준공정산에 따른 정산차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 추가경정예산 배정 후 사업 계획 수립 및 시행한 사업으로 공사정상 추진하여도 신속한

예산 집행 어려움

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	500	81	16.2	△419

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎5140 P/L: 한우진 ☎5141 담당: 정태선 ☎5586

3호선 연신내역 #3-11번 환기구 외 5개소 환기구 축소공사 시행으로 보도폭 확장

환기구 정비(2020)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

토목처-385(□20.01.16.) □2020년 시 출자금 사업계획 및 교부신청서 제출□

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2021.01.

철근콘크리트 구조물 철거공 1식, 강화유리 설치 1식 등

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

235백만원

○ 당년 사업물량:

철근콘크리트 구조물 철거공 1식, 강화유리 설치 1식 등

○ 추진실적

- 공정율 (12월 말 기준) 계획 92.2%, 실적 95.1%로 정상 추진

○ 집행잔액 발생사유

- 1) 예산배정금액(500백만원) 및 설계금액(291백만원)간 차이 발생

2) 추가물량 발생 (강화유리출입문 시공)에 따른 사업물량 변경으로 기성 등 예산 집행

어려움

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-도심지 내 보도상에서 이루어지는 공사로 민원 수시 발생

-하절기 장마기간 중 작업 시행 어려움

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]연구개발비/연구용역	300	101	33.7	△199

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎ 6110-5140 P/L: 한우진 ☎ 5141 담당 : 양기영 ☎ 5175

지하철 환기구 실태조사에 따른 세부 개선대책 수립

환기구 실태조사 및 개선대책 수립 용역

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

본부장방침-82 (2020.04.09.) "환기구 실태조사 및 세부 개선대책 수립 용역 시행계획 보고"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.08.

~

2021.07.

1~8호선 환기구 실태조사 1식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

287백만원

○ 당년 사업물량:

1~8호선 환기구 실태조사 1식

○ 추진실적

- 정상추진

○ 집행잔액 발생사유

- 과업종료일 미도래에 따른 집행 잔액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	3,316	1,400	42.2	△1,916

사업담당자	토목1사업소장:고희규 ☎5140 P/L: 안태중 ☎5142 주임: 김준호 ☎5588

내진설계가 적용되지 않은 기존시설물의 내진성능 상세평가결과 내진보강이 필요한 고가, 교량 및 지하구조물에 대한 내진 보강공사 시행으로 열차 안전운행 및 이용시민 안전 확보

내진성능개선(2차)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)

- 동법 시행령 제11조(내진보강대책 수립 대상 시설 및 방법 등) <□08.3.제정>

- 도시철도 내진보강 추진계획 수립(서울시장 방침, □11.4)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2011.01.

~

2020.12.

53.2KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

322,100,000,000

○ 당년 사업물량:

14.8KM

○ 추진실적

- 내진보강공사 9,10,11,14공구 준공완료

○ 집행잔액 발생사유

- 준공정산시 감액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	119	92	77.3	△27

사업담당자	기계처장: 이석종 ☎9830 팀장: 김태장 ☎2281 담당: 오석만 ☎2284

개별적으로 추진하는 공기질 측정기 설치, 공기청정기 설치, 환기설비 개량사업의 효율적 통합관리를 위한 스마트 공기질 관리시스템을 구축 통한 공기질 개선

스마트 공기질 관리시스템 구축

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 추진실적

- 스마트 공기질관리시스템 구축 원가조사 용역 시행(완료)

- 계약기간 : 2020.04.17. ~ 06.30.  - 계약금액 : 92,432,930원

- 계 약 자 : 한국종합경제연구원

- 사업계획 수립 진행 : 클라우드 적용 및 시스템 최소화방안 검토․반영

- 공정계획 및 사업시기 조정 : 당초 2020년 → 변경 2021년 1차 35개역 발

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 당년 사업물량:

용역수행 1식

스마트 공기질 관리시스템 1식

2020.01.

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2021.12.

- 실내공기질관리법

- 사장방침 제76호(2019.06.27.)『서울지하철 미세먼지 관리 강화계획』

- 사장방침 제757호(2020.09.09.)『공사 비상경영계획 관련 스마트공기질시스템 구축사업 변경계획』

~

14,663백만원

○ 총 사업비:

- 해당사항 없음

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	5,500	3,288	59.8	△2,212

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 김태장 ☎2281 부장: 최순기 ☎2284

실내공기질관리법에 따라 1-8호선 지하 149역 승강장에 149대 초미세먼지 측정기 설치 사업

초미세먼지 측정기 제작설치(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

실내공기질관리법(시행20.4.3. 법률 제16307호) 미세먼지 측정기 구매 설치(안)(보건환경처-2083,19.4.2)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.01.

~

2020.12.

총254역 254대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

12,700백만원

○ 당년 사업물량:

254대

○ 추진실적

- 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	8,844	6,196	70.1	△2,648

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 김태장 ☎2281 부장: 최순기 ☎2284

지하 254역 4,064대 대용량 공기청정기 설치

대용량 공기청정기 제작설치(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

대용량 공기청정기 구매 설치(보건환경처-6119, 19.10.7)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2020.12.

지하 254대 4,064대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

26,822백만원

○ 당년 사업물량:

2,040대

○ 추진실적

- 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	13,358	-	0.0	△13,358

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 김태장 ☎2281 부장: 최순기 ☎2284

지하 254역 4,064대 대용량 공기청정기 설치

대용량 공기청정기 제작설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

대용량 공기청정기 구매설치(보건환경처-6119, 19.10.7)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2020.12.

지하 254대, 4,064대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

26,822백만원

○ 당년 사업물량:

2,024대

○ 추진실적

- 계약체결 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 127역 전기통신공사 공기가 최소 180일은 되어야 하나 2단계 입찰 제안서

평가결과에 따른 민원제기로 낙찰자결정 유보, 법률자문 등으로 계약체결 지연 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	100	100	99.8	-

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 오태균 ☎9501 담당: 김성귀 ☎9510

적외선 열화상 카메라 등 구매

역사내 안전시설물 확충(코로나19 확산방지)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

코로나 19확산방지 및 안전관리 목적 적외선 열화상 카메라 등 구매(보건환경처-5003, 2020.7.29)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.07.

~

2020.08.

16대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

99백만원

○ 당년 사업물량:

16대

○ 추진실적

- 정상

○ 집행잔액 발생사유

- 정상추진

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]연구개발비/연구용역	160	148	92.5	△12

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 이훈복 ☎9502 부장: 금부연 ☎9519

소음초과 개소의 방음시설 경제성 평가를 통해 우선순위 사업 등 단기, 중장기적 대책 수립 및 소음최소화 방안(가이드라인) 마련

지하철 소음측정 연구

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

보건환경처-2015(2020. 3.26.) 「도시철도 소음 저감 방음시설 경제성 평가 용역(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2021.11.

서울교통공사 1~8호선 및 발주기관과 협의한 구간

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

400백만원

○ 당년 사업물량:

서울교통공사 1~8호선 및 발주기관과 협의한 구간

○ 추진실적

- 정상추진

○ 집행잔액 발생사유

- 차기 연도 집행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/궤도차	4,500	3,491	77.6	△1,009

사업담당자	장비관리단장: 배영기 ☎4400 팀장:이은욱 ☎4450 담당: 이재상☎4455 외1명

교체시기가 도래한 노후 디젤모터카를 친환경동력방식의 모터카로 적기교체하여 지하역사 공기질 개선에 기여

[5~8재투자]모타카 구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 환경부 제3차 지하역사 공기질 개선대책(2018.03) *서울시 지하철 5-8호선

노후시설 재투자 계획(안)(2019.05) *서울시 서울지하철 미세먼지 관리

강화계획(2019.08)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

11대(궤도모터카 9대/전차선검측모터카 2대)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

11,300백만원

○ 당년 사업물량:

11대

○ 추진실적

- 궤도모터카 9대 제작 계약체결

- 전차선검측모터카 2대 제작 계약체결

- 철도차량 제작감독 용역계약 체결

- 공정진행률 50.4%

○ 집행잔액 발생사유

- 구매조달처 선급 지급시 별도 약정항목 생성으로   선금 지급액 3,486,000,000원

미반영

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 대량발주로 인한 납품지연 우려*분할납품 및 공정관리 철저로 적기납품 유도

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	479	366	76.4	△113

사업담당자	승강장안전문관리단장: 김동명 ☎3700 팀장: 신웅섭 ☎3741 담당: 문지환 ☎3740

시스템을 구축함으로써 장애물검지센서의 장애 및 동작 상태를 관리소에서 모니터링 하여 센서 이상 발생 시 신속한 대응 체계를 마련해 승객안전 및 열차 정시 운행을 확보하고자 함.

장애물검지센서 통합관리

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강장안전문관리단-5552호(2019.06.04.)『1~4호선 승강장안전문 (PSD) 개선 사업 추진계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.07.

2호선 사당역 등 11역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

500백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 사당역 등 11역

○ 추진실적

- 준공완료 : 2020.07.16.

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 및 보험료 사후정산 후 집행잔액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	521	393	75.4	△128

사업담당자	승강장안전문관리단장: 김동명 ☎3700 팀장: 신웅섭 ☎3741 담당: 문지환 ☎3740

시스템을 구축함으로써 장애물검지센서의 장애 및 동작 상태를 관리소에서 모니터링 하여 센서 이상 발생 시 신속한 대응 체계를 마련해 승객안전 및 열차 정시 운행을 확보하고자 함.

장애물검지센서 통합관리(2020)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강장안전문관리단-5552호(2019.06.04.)『1~4호선 승강장안전문 (PSD) 개선 사업 추진계획(안)』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.07.

~

2021.01.

2호선 신도림역 등 8역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

500백만원

○ 당년 사업물량:

2호선 신도림역 등 8역

○ 추진실적

- 준공완료 : 2020.12.31.

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 및 보험료 사후정산 후 집행잔액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	3,392	1,406	41.5	△1,986

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 이혁 ☎4940 담당: 배병모 ☎ 4927

노후 에스컬레이터 교체

노후 승강설비 교체(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

불광역 등 3역 6대, 이대역 2대 (총8대)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,392백만원

○ 당년 사업물량:

불광역 등 3역 6대, 이대역 2대 (총8대)

○ 추진실적

- 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

- 건축,전기,토목,전자,통신,승강기 복합공종 사업으로 예상 예산액보다 절감된 비용으로

정상준공

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	4,500	2,622	58.3	△1,878

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 이혁 ☎4940 담당: 배병모 ☎ 4927

노후 에스컬레이터 교체

[1~4재투자]노후 승강설비 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

구의 등 2역 4대, 서울(1)역 등 3역 5대, 이대 2대 (총11대)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

5,500백만원

○ 당년 사업물량:

구의 등 2역 4대, 서울(1)역 등 3역 5대, 이대 2대 (총11대)

○ 추진실적

- 구의역 등 2역 노후 에스컬렐이터 교체 (4대) 정상준공

- 서울(1)역 등 3역 노후 에스컬레이터 교체 (5대) 정상준공

- 이대역 노후 에스컬레이터 3,4호기 교체공사 시공중

○ 집행잔액 발생사유

- 건축,전기,토목,전자,통신,승강기 복합공종 사업으로 예상 예산액보다 절감된 비용으로

정상준공

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,300	905	69.6	△395

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 이혁 ☎ 4940 담당: 이재환 ☎ 4942

노후 엘리베이터 조작반 및 부속설비 교체

[1~4재투자]승강설비 조작반 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

노후 엘리베이터 조작반 35대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,300백만원

○ 당년 사업물량:

노후 엘리베이터 조작반 35대

○ 추진실적

- 노후 엘리베이터 조작반 35대 정상준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	500	374	74.8	△126

사업담당자	승강기관리단 단장 : 안형준 ☎4900 팀장 : 이홍로 ☎4901 담당: 김성도☎4931

시청(1)역 등 118역 209대 E/L용 공기청정기 구매 설치

공기 청정기(E/L) 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울특별시 도시철도과-954호(2020.01.21.)『「지하철 1~4호선 노후시설재투자」등 23개 사업 지하철 운영기관 시비(출자금) 지출계획』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.07.

1~8호선 엘리베이터용 공기청정기 209대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

374,249,700

○ 당년 사업물량:

1~8호선 엘리베이터용 공기청정기 209대

○ 추진실적

- 정상추진

○ 집행잔액 발생사유

- 경쟁입찰에 의한 낙찰 차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	500	389	77.8	△111

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 이성우 ☎4950 담당: 전동운 ☎4962

에스컬레이터 핸드레일 벨트 소독기 확대구매 설치로 코로나바이러스 예방과 승객안전확

에스컬레이터 핸드레일 소독기 구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울시장지시사항(2020.02.03.)

-보건환경처-1732(2020.03.13.)[코로나19재난관리기금승인내역알림4차]

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.09.

~

2020.12.

에스컬레이터 65대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

500백만원

○ 당년 사업물량:

에스컬레이터 65대

○ 추진실적

-2020.12.01 사업완료

○ 집행잔액 발생사유

-발주 및 낙찰차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,000	718	71.8	△282

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 정창욱 ☎4980 담당: 이현수 ☎4985

가락시장 외 18역 에스컬레이터 분해정비공사

[5~8재투자]E/S분해 정비공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.05.

~

2020.10.

19역 25대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,000백만원

○ 당년 사업물량:

19역 25대

○ 추진실적

- 분해정비공사 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액, 낙찰차액, 준공정산

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	150	122	81.3	△28

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 이성우☎4950 담당:김진호☎4572

정밀안전검사 3회차 대비 에스컬레이터 안전장치 보완공사

E/S안전장치 보완공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-8601(2020.09.24.)『[승강기 검사기준 변경에 따른]E/S 안전장치 보완 중장기 계획(안)[2020년]』

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.11.

~

2021.06.

14역 에스컬레이터 55대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

700백만원

○ 당년 사업물량:

14역 55대[4역 12대(준공), 10역 43대(채무)]

○ 추진실적

- 2020년(세출)ο광화문 등 4역 E/S 안전장치 보완공사[4역 12대,(준공완료)]

- 2020년(채무)ο노원 등 7역 E/S 안전장치 보완공사[7역 22대]ο종로3가 등 3역 E/S

안전장치 보완공사[3역 21대]2020년(채무) 총 사업물량: 10역 43대

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액, 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,500	1,038	69.2	△462

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 정창욱 ☎4980 담당: 이영호 ☎4982

구산역 노후 에스컬레이터 교체공사

[5~8재투자]노후 승강설비 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.02.

~

2020.12.

에스컬레이터 2대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,500백만원

○ 당년 사업물량:

에스컬레이터 2대

○ 추진실적

- 교체공사 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액, 낙찰차액, 준공정산

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	525	347	66.1	△178

사업담당자	승강기관리단장: 안형준 ☎4900 팀장: 정창욱 ☎4980 담당: 박민용 ☎4571

영등포시장외 11역 15개소 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사

[5~8재투자]승강설비 조작반 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

승강기관리단-22798(2018.08.06.) 『장애율 최소화를 위한』 노후 승강기 교체․정비 계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.05.

~

2020.12.

10역 13개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

525백만원

○ 당년 사업물량:

10역 13개소

○ 추진실적

- 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액, 낙찰차액, 설계변경(15대 → 13대), 준공정산

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
수탁자산/공기구	1,373	939	68.4	△434

사업담당자	기술처장: 강희관 ☎2770 시스템관리팀장: 김준수 ☎2771 담당 : 전기호 ☎2778

역사 공기질 개선장치 설치

9호선 공기질 개선(승강장)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

9호선운영부문-7760('20.06.15)『9호선 2,3단계 역사』 공기정화장치 제작설치(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.09.

~

2020.12.

13개역사 공기정화장치 208대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1372800000

○ 당년 사업물량:

13개역사 공기정화장치 208대

○ 추진실적

- 계약체결(20.9월 완료)

- 선금지급(20.10월 완료)

- 준공(20.12.30)

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
수탁자산/전동차	1,296	661	51.0	△635

사업담당자	기술처장: 강희관 ☎2770 시스템관리팀장: 김준수 ☎2771 담당 : 전기호 ☎2778

전동차 공기질 개선장치 설치

9호선 공기질 개선(전동차)

√

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

9호선운영부문-6252('20.05.15)『9호선 2,3단계 전동차』 공기질 개선장치 제작설치(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2021.01.

~

2021.01.

전동차 54량 공기질개선장치 216대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,296백만원

○ 당년 사업물량:

전동차 54량 공기질개선장치 216대

○ 추진실적

- 계약체결(20.8월 완료)

- 선금지급(20.10월 완료)

- 준공(20.12.29)

○ 집행잔액 발생사유

- 서울시 계약심사로 발주금액 조정 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
수탁자산/선로	8	8	96.7

사업담당자	기술처장: 강희관 ☎2770 시설관리팀장: 전한규 ☎2772 담당 : 김영롱 ☎2775

양방향 전기집진기 제작설치

9호선 양방향 전기집진기 제작설치(2019)

√

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

9호선운영부문-3839('20.03.16) - 9호선 2,3단계 - 본선 환기설비 양방향 전기집진기 설치(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.03.

~

2021.12.

46개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

13,800백만원

○ 당년 사업물량:

8개소

○ 추진실적

- 9호선 2,3단계 터널 양방향 전기집진기 설치(1차) 부대공사 실시설계용역시행

- 9호선 2,3단계 양방향 전기집진기 제작설치(1차) 물품제조 계약 발주

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-물품제조 계약 체결 시기 '21.2월 이후 예정. 계약상대자와 신속한 협의로사업 착공 및 공기단축 노력. 계약법령에 따른 선금 지급 등으로 예산신속집행 실시

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	1,680	1,376	81.9	△304

사업담당자	차량정비처장: 노학락 ☎9630 담당: 황봉득 ☎9638

전동차 객실 내 미세먼지 제거를 위한 공기질 개선장치 제작설치

전동차 객실내 공기질 개선장치 제작설치(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

차량정비처-6981(2019.11.14)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.11.

~

2021.12.

공기질 개선장치 6240대 설치

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

22916000000

○ 당년 사업물량:

공기질 개선장치 560대 설치

○ 추진실적

- 2019년 1차년도 사업완료(대금지급완료)

○ 집행잔액 발생사유

- 해당없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	7,780	6,684	85.9	△1,096

사업담당자	차량정비처장: 노학락 ☎9630 담당: 황봉득 ☎9638

전동차 객실 내 미세먼지 제거를 위한 공기질 개선장치 제작설치

전동차 객실내 공기질 개선장치 제작설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

차량정비처-6981(2019.11.14.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.11.

~

2021.12.

공기질 개선장치 6,230대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

22,916,000,000

○ 당년 사업물량:

공기질 개선장치 4,304대

○ 추진실적

- 전동차 객실 공기질개선장치 제작설치(1~3호선, 6~7호선)

- 계약번호: (1~3호선)4500069445, (6,7호선)4500069446

- 설치물량: 1~3호선 532칸/262칸 설치, 6,7호선 544칸/312칸 설치

- 추진계획: 성능검사, 현차 설치 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

- 해당없음

○ 집행잔액 발생사유

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
저장품	1,070	1,037	96.9	△33

사업담당자	차량정비처장: 노학락 ☎9630 담당: 차민영☎9634

5~8호선 전동차 현수장치 장기사용 및 내구연한 도래에 따른 1,2차 고무스프링 순차 교체

전동차 공기스프링 교체(2019)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

차량정비처-764(2018.2.8.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.02.

~

2022.12.

1,2차 고무스프링 17,315대 교체

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

16,300,000,000

○ 당년 사업물량:

1,2차 고무스프링 4,464대 교체

○ 추진실적

- 1,2차 고무스프링 4,464대 교체완(대금지급완료)

○ 집행잔액 발생사유

- 해당없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
저장품	2,000	1,938	96.9	△62

사업담당자	차량정비처장: 노학락 ☎9630 담당: 차민영 ☎9634

5~8호선 전동차 현수장치 장기사용 및 내구연한 도래에 따른 1,2차 고무스프링 순차 교체

전동차 공기스프링 교체

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

차량정비처-764(2018.2.8.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.02.

~

2022.12.

1,2차 고무스프링 17,315개 교체

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

16,300,000,000

○ 당년 사업물량:

1,2차 고무스프링 3,840대 교체

○ 추진실적

- 1,2차 고무스프링 3,840대 교체 완료(대금지급 완료)- '21년 교체 지속

○ 집행잔액 발생사유

- 해당없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	400	400	100.0	-

사업담당자	차량정비처장: 노학락 ☎9630 담당: 최종권 ☎9637

인버터장치 내 전력반도체(IGBT모듈)의 노후화로 단락고장 지속증가 및 운행거리 확장 시 중대고장예방을 위해 인버터스택 개량 교체

7,8호선 VVVF 인버터스택 개량/ 4호선 주전력변환장치 IGBT 스택 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

차량계획처-919(2017.03.16.)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2017.03.

~

2025.12.

51개 편성

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

11,504,000,000

○ 당년 사업물량:

5개 편성 설치

○ 추진실적

- 전동차 인버터스택 제조설치

- (6호선)제조설치 공정관리

- (7호선 2차분)제조설치 공정관리

○ 집행잔액 발생사유

- 해당없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	1,330	-	0.0	△1,330

사업담당자	신호2사업소장: 김성우 ☎5650 P/L: 고인수 ☎5670 담당: 신승민 ☎5660

5호선 연동장치 개량을 위하여 합리적인 설계, 유지/관리 효율성 향상 및 신기술 적용 등 최적의 신호설비 개량을 할 수 있도록 설계

[5~8재투자]신호시스템 연동장치 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

사장-524(2020.06.23.) 1~8호선 신호시스템 중장기 MASTER PLAN 수립

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.12.

5호선 신호시스템 1식(26개소 신호기계실 및 현장)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,330백만원

○ 당년 사업물량:

5호선 신호시스템 1식(26개소 신호기계실 및 현장)

○ 추진실적

- 과업내용서 및 사업수행능력 평가서 작성

- 예산산출기초 조사서 작성

- 서울시 기술용역 타당성 심사 및 용역 발주 심의

- 발주 및 용역 계약 체결(실시설계 용역 시행)

○ 집행잔액 발생사유

- 4분기 집행금액 0원 (이월:68,205,200원) > 사유 : 12월말에 용역 계약이 체결되어 사업비를 집행하지 못함.

- 계약체결 지연 사유 : 신호시스템 개량 방향 선정 및 신기술 적용과 기존시스템(차량,통신,PSD)등과의 호환성검토 지연

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 신호호시스템 개량 실시설계 용역 계약에 따른 21년 연도내 사업 완료 예정

- 계 약 자: ㈜경인기술

- 계약금액: 금1,649,200,000원

- 계약기간: 2020.12.21. ~ 2021.11.17.

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	1,739	1,227	70.6	△512

사업담당자	신호2사업소장: 김성우 ☎5650 P/L: 고인수 ☎5670 담당: 양광균☎5666

철도안전관리체계 기술기준에서 정한 내용연수(UPS:10년, 축전지:15년) 경과한 노후 축전지를 개량하여 열차 안전운행 확보

[5~8재투자]무정전전원장치 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

기술본부장 방침-71(2019.04.11.)「신호분야 축전지 기술동향 분석 및 단일화 방안 검토 보고」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

UPS 21식, 축전지12식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,739백만원

○ 당년 사업물량:

UPS 21식, 축전지12식

○ 추진실적

- 수락산역 등 12개소 축전지 납품 완료

- 응암역 등 21개소 UPS 납품 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 및 1,2사업소 통합발주에 따른 예산절감

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전로설비	2,308	1,925	83.4	△383

사업담당자	신호2사업소장: 김성우 ☎5650 P/L: 고인수 ☎5670 담당: 염봉주 ☎5663

철도안전관리체계 기술기준에서 정한 내용연수(20년 또는 40만회) 경과한 노후 선로전환기를 개량하여 열차 안전운행 확보

[5~8재투자]노후 선로전환기 개량

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울교통공사 철도안전관리체계 기술기준 기술본부장방침NO.76('20.2.11.)1~8호선 선로전환기 개량 시행 기준

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

131대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,308백만원

○ 당년 사업물량:

131대

○ 추진실적

- 전기선로전환기(NS-AM형) 등 4종 제작구매 물품 납품(1,2,3차) 완료

- 5호선 방화기지 등 11개소 선로전환기 개량공사 착공 및 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액 및 1,2사업소 전기선로전환기(NS-AM형) 등 4종 제작구매통합발주에 따른

예산절감

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	302	239	79.1	△63

사업담당자	궤도2사업소장: 이봉락 ☎5320 P/L: 김종만 ☎5331 담당: 조동환 ☎5343

고덕차량기지 입출고선 부근 입주민 소음민원 제기로 인한 레일 장대화 공사 추진

궤도설비 개량(고덕차량기지 U-TYPE부 레일장대화 개량공사)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

궤도처-3578호(2019.08.02.)

○ 사업근거

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 추진실적

- 레일교환 0.641km- 신축이음매 교환 2틀- 침목교환 690개 등

○ 집행잔액 발생사유

- 물량조정에 의한 설계변경

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.01.

~

2020.08.

239백만원

○ 총 사업비:

레일교환 0.641KM, 신축이음매 교환 2틀, 침목교환 690개 등 32공종

○ 당년 사업물량:

레일교환 0.641KM, 신축이음매 교환 2틀, 침목교환 690개 등 32공종

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,520	2,111	83.8	△409

사업담당자	기계2사업소장: 최진영 ☎5750 부장: 최명덕 ☎5761 담당: 이종구 ☎5770

노후 환기설비 개선 진단평가 결과를 바탕으로 안전에 취약하여 교체 또는 개선이 필요한 개소와 송풍기 풍량,소음(본선) 민원 개소를 교체하여 사고 예방 및 쾌적한 환경 조성

[5~8재투자]노후 환기설비 개량(역사 및 본선 동력제어반 개량 제작 구매 설치)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-소음진동관리법 제27조 및 동법 시행규칙 제37조「철도교통 소음 한도」

-공조환기설비 안전진단용역 시행(서울도시철도 본부장 방침)(□14. 7. 16)

○ 사업근거

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 당년 사업물량:

43개소

○ 추진실적

2020년 사업완료(8역 16개소, 23본선 27개소)-1공구(마포 외 3역 및 본선 동력제어반 개량제작 구매설치) 8/24 준공

-2공구(서대문 외 3역 및 본선 동력제어반 개량제작 구매설치) 8/25 준공

-강동본선(강동 본선(2개소) 동력제어반 개량제작 구매설치) 9/23 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 서울계약심사 설계가 반영 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

309개소(기투자18개소)터널구조 및 민원소음개소,고장이력등 현장여건에 따라 개소 변경 가능)

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2017.05.

~

2026.12.

15,018

○ 총 사업비:

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	1,000	970	97.0	△30

사업담당자	기계2사업소장: 오정진 ☎5750 부장: 윤은숙 ☎5769 담당: 유성동 ☎5766

기계분야 동력제어반 초기 화재 진압을 위한 자동소화장치인 고체에어로졸 사용수명(5년) 경과에 따른 교체개소 및 자동소화장치 미설치 개소에 대한 연차별 확대 설치 추진

초동화재 진압을 위한 자동소화장비 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 제4조(설치기준)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

10,956개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,000백만원

○ 당년 사업물량:

7,174개소

○ 추진실적

- 동력제어반 가스식 자동소화장치 7,174개소 설치완료

○ 집행잔액 발생사유

- 자동소화장치 설치 물량 최대 사용 후 잔액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 동력제어반 교체로 인한 환기시설물 정지로 인한 민원 발생

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	436	317	72.7	△119

사업담당자	기계2사업소장: 최진영 ☎5750 부장: 박준홍 ☎5780 담당: 한진영 ☎5784

노후화로 배수성능이 급격히 저하되고 있는 터널 유출 지하수 배수펌프시설을 개량하여 선로 침수 방지 및 열차 안전운행 위협요인 해소

[5~8재투자]배수설비 개량 및 관리

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-사장방침 NO.62(□12.1.19.): 열차 안전운행 확보를 위한 지하수 배출 배수설비 성능개선방안

-본부장방침 NO.471(□16.6.2.): 중장기사업(배수?오수시설 개량) 계획 수정(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2022.12.

34개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

7,623백만원

○ 당년 사업물량:

2개소

○ 추진실적

-2개소(광화문역,중계역)배수펌프시설 성능 개량 사업종료(8/18 준공)

○ 집행잔액 발생사유

-적정 설계가 반영 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

-해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	6,462	3,990	61.7	△2,472

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 P/L: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

도시철도 이용시민의 편의성 및 교통서비스 개선을 위한 승강편의시설 (E/S, E/L)설치사업(국비 30% :서울시35% :공사 35%)

승강편의시설 설치 매칭

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

시장방침 537호(2007.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2008.01.

~

2021.12.

E/S 169대, E/L 46대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

132,432백만원

○ 당년 사업물량:

E/S 1대, E/L 5대

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 준공정산 시 감액발생

- 본 사업의 평균낙찰률은 84%로 낙찰액 발생

- 공기연장 등 변경계약에 대비하여 공구별 예비비 편성

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 굴착공사 특성 상 지장물 협의․이설 등의 사유 등 예측범위 밖의 상황발생으로 공사지연

발생(적정공기 산출필요)

- 매년 사고이월 금액 과다발생으로 본예산의 사고이월 발생

(단위:백만원)

- 32공구 : 상수역 E/L 1대 준공

- 35공구 : 광화문역 E/L 1대, 신길역 E/L 2대, 남한산성입구역 E/L 1대(1역1동선 확보역사),

단대오거리 E/S 2대 준공

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,550	120	4.7	△2,430

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 P/L: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

7호선 광명사거리역을 이용하는 교통약자 및 지역주민의 편의 증진을 위하여 승강편의시설(E/S, E/L) 설치(국비 40% :서울시30% :공사 30%)

광명사거리역 승강편의시설 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

광명시 철도정책실-3840(2017.09.22.)호「7호선 광명사거리역 이동편의시설 설치사업 위수탁협약 추진요청

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2021.12.

E/S 2대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

5,200백만원

○ 당년 사업물량:

E/S 2대

○ 추진실적

- 34공구 : 광명사거리역 E/S 2대 준공예정('21.04.)

○ 집행잔액 발생사유

- 위수탁사업비 부족으로 인한 위수탁 물량취소, 공법변경, 변경협약체결 등에 따른

사업지연

- 본 사업의 평균낙찰률은 84%로 낙찰액 발생

- 공기연장 등 변경계약에 대비하여 공구별 예비비 편성

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 공기연장 방지를 위한 적정 공사기간 산출필요

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	16,859	7,708	45.7	△9,151

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 P/L: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

도시철도 이용시민의 편의성 및 교통서비스 개선을 위한 승강편의시설 (E/S, E/L)설치사업(서울시 100%)

승강편의시설 설치 출자(5~8호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

시장방침 537호(2007.10.04.)「지하철 이동편의시설 확충 종합계획」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2022.12.

E/S 29대, E/L 4대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

45,007백만원

○ 당년 사업물량:

E/S 10대, E/L 2대

○ 추진실적

- 36공구: 수락산역 E/S 2대 준공, 태릉입구역 E/S 2대 준공

- 37공구: 마천역 E/L 준공

○ 집행잔액 발생사유

- 지장물 이설 협의 등에 의한 공정지연

- 본 사업의 평균낙찰률은 84%로 낙찰액 발생

- 공기연장 등 변경계약에 대비하여 예비비 편성

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 굴착공사 특성 상 지장물 협의․이설 등의 사유 등 예측범위 밖의 상황발생으로 공기지연

발생(적정공기 산출필요)

- 매년 사고이월 금액 과다발생으로 본예산의 사고이월 발생

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	450	133	29.5	△317

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 팀장: 조수일 ☎5211 담당: 정진환 ☎5229 외1명

7호선 사가정역 주변 탑형 조형화 환기구의 미관개선을 위한 투시형 환기구 개선공사

환기구 개선공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

토목처-2409호 "7호선 사가정역 환기구 개선 통보"

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.06.

~

2020.12.

7호선 사가정역 주변 환기구(5개소)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

171백만원

○ 당년 사업물량:

7호선 사가정역 주변 환기구(5개소)

○ 추진실적

- 사가정역 #7104환기구 외 4개소 투시형 환기구 개선 완료(12월말 기준)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액 등

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	4,000	23	0.6	△3,977

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 P/L: 안승용 ☎5219 담당: 최우식 ☎5242

서울디지털 산업단지(G밸리) 개발로 인한 7호선 가산디지털단지 역 혼합도 개선을 위하여 출입구 확장 및 신설, 승강편의시설(E/S)설치 사업 추진(서울시50% :공사50%)

가산디지털단지역 혼잡도 개선사업

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울시장방침-341호(2015.11.21)「G-밸리 종합발전계획추진」

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2018.01.

~

2023.12.

출입구 신설 1개소(E/S 2대), 확장 2개소(#4, #6), E/S 4대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

13,336백만원

○ 당년 사업물량:

신설 1개소(E/S 2대), 확장 1개소(E/S 2대)

○ 추진실적

- 6번 출입구 확장공사 기본 및 실시설계용역 진행

- '21.02 : 출입구 신설공사 발주

- '21.04. : 4번 출입구 확장공사 발주

○ 집행잔액 발생사유

- 서울시 토지보상 업무 지연(토지보상업무 완료 후 공사발주 가능)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 현재 토지보상업무가 완료되었으며 신속히 공사발주 추진

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,000	1,566	78.3	△434

사업담당자	건축2사업소장: 손태진 ☎5410 부장: 강성 ☎5445 담당자: 윤준표 ☎5444

여성 변기수 부족 해소 및 장애인 화장실 확장 등 관련법 기준 준수 및 노후 화장실 개선

지하철역 화장실 확충(5~8호선)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-교통약자의 이동편의 증진법, 공중화장실 등에 관한 법률

-사장NO.765('15.11.2.) 시민불편 개선을 위한 화장실 중장기(2단계) 개량계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.07.

순차적 개량

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,000,000,000

○ 당년 사업물량:

7역

○ 추진실적

- 7역(신대방삼거리, 내방, 새절, 마포구청, 합정, 상도, 동묘앞)개량 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주잔액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 물가상승에 따라 1역당 소요예산 증가로 예산 산출기준 재조정 필요

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	2,040	1,869	91.6	△171

사업담당자	건축2사업소장: 손태진 ☎5410 부장: 강성 ☎5445 담당자: 이성용 ☎5427

교통약자 등 승객 이동거리 단축을 위한 출입동선 개선용 내부계단 신설 및 기능실 재배치

마들역 출입동선 개선사업

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-사장-20497('18.11.14.) 교통약자 등 승객의 이동거리 단축을 위한 7호선 마들역 출입동선 시설개선(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.10.

~

2020.06.

마들역 대합실(B1~B2)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,150,000,000

○ 당년 사업물량:

마들역 대합실(B1~B2)

○ 추진실적

- 마들역 출입동선 개선 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주잔액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	3,590	2,349	65.4	△1,241

사업담당자	건축2사업소장: 손태진 ☎5410 부장: 임태건 ☎5439 담당자: 주용주 ☎5433

강우, 강설시 서울교통공사 이용시민의 안전사고 발생 예방을 위한 캐노피 설치

서울교통공사형 표준 캐노피 설치공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-건축시설물 보수관리규정 제11조(계획보수) 및 제14조(계획수립)

-건축2사업소-647('20.02.04.) 2020년도 서울교통공사형 표준 캐노피 설치 추진계획 보고

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

37개소

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,590,150,000

○ 당년 사업물량:

37개소

○ 추진실적

- 37개소 설치 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주잔액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	400	324	81.0	△76

사업담당자	건축2사업소장: 손태진 ☎5410 부장: 강원명 ☎5411 담당자: 김원홍 ☎5413

역사계단 미끄럼 사고 및 저시력 장애인의 안전사고 예방을 위한 계단 시종점부 미끄럼방지 설치

미끄럼방지시설 제작설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-서울시 교통정책과-1504('16.1.22.) 장애인 이동권 증진 실천계획

-본부장방침('16.9.5.) 역사계단 시, 종점부 논스립 설치계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.08.

순차적 개량

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

400,000,000

○ 당년 사업물량:

128역

○ 추진실적

- 128역 논슬립 설치 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 발주잔액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	294	240	81.6	△54

사업담당자	건축2사업소장: 손태진 ☎5410 부장: 강원명 ☎5411 담당자: 조휘섭 ☎5423

대중교통 연계를 위한 자전거 휴대승차 평일 시범실시 계획으로 이용고객 만족 증진

자전거 경사로 설치

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

-사장방침 제430('20.5.28.) 대중교통 연계를 위한 자전거 휴대승차 평일 시범실시 계획

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.07.

~

2020.12.

순차적 설치

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

294,000,000

○ 당년 사업물량:

7호선 12역

○ 추진실적

- 7호선 12역 경사로 보강

○ 집행잔액 발생사유

- 발주잔액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	60	60	100.0

사업담당자	문화사업처장: 김찬현 ☎9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당자: 심창현 ☎9426

성수역 구두테마공간 환경 개선 사업

성수역 구두테마공간 환경 개선 사업

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울 문화예술철도 사업추진 계획('18.07.27 시 교통정책과)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.05.

~

2020.12.

1개역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

60백만원

○ 당년 사업물량:

1개역

○ 추진실적

- 교부금 6,000만원 성동구청 교부완료

○ 집행잔액 발생사유

- 정상집행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정상집행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	452	10	2.2	△442

사업담당자	문화사업처장: 김찬현 ☎9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당자: 원태수 ☎9313

영등포시장역 문화예술철도 조성(1단계) 운영 관리

서울 문화예술 철도 조성(영등포시장역 1단계)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울 문화예술철도 사업추진 계획('18.07.27 시 교통정책과)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2021.06.

1개역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

452,000,000

○ 당년 사업물량:

1개역

○ 추진실적

- 완공 후 시범운영 중

○ 집행잔액 발생사유

- 3.4억원 21년 예산으로 이월

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정상 집행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	100	98	98.0	△2

사업담당자	문화사업처장: 김찬현 ☎9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당자: 원태수 ☎9313

서울 문화예술 철도 조성(영등포시장역 2단계)

서울 문화예술 철도 조성(영등포시장역 2단계)

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울 문화예술철도 사업추진 계획('18.07.27 시 교통정책과)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

1역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

9,300,000,000

○ 당년 사업물량:

1역

○ 추진실적

- 뚝섬유원지역 문화예술철도 조성 타당성용역 교부금 9,800만원 광진구청 교부완료

○ 집행잔액 발생사유

- 광진구청 주관으로 타당성용역 진행 후 잔액 200만원 반환

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정상집행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]연구개발비/연구용역	20	19	95.5	△1

사업담당자	문화사업처장: 김찬현 ☎9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당자: 심창현 ☎9426

지하철 문화예술 활성화 연구 용역

지하철 문화예술 활성화 연구 용역

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울 문화예술철도 사업추진 계획('18.07.27 시 교통정책과)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

1회

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

20,000,0000

○ 당년 사업물량:

1회

○ 추진실적

- 지하철 테마역 만족도조사 연구용역 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 낙찰차액

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정상집행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
선로설비	800	800	100.0	-

사업담당자	문화사업처장: 김찬현 ☎9310 팀장: 이병철 ☎9311 담당자: 안웅기 ☎9315

청담역 미세먼지 프리존 2차 조성 사업

청담역 미세먼지 프리존 2차 조성 사업

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

서울 문화예술철도 사업추진 계획('18.07.27 시 교통정책과)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

1역

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

800,000,000

○ 당년 사업물량:

1역

○ 추진실적

- 청담역 미세먼지 프리존 조성 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 정상집행

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 정상집행

(단위:백만원)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	보건환경처장: 최영도 ☎9500 팀장: 오태균 ☎9501 담당: 고혜진 ☎9509

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
계	17,681	9,880	55.9	△7,801
[매]수선유지비/공기구	14	10	71.4	△4
[매]위탁비/외부위탁	14,353	7,326	51.0	△7,027
[매]일반운영비/도서인쇄	171	77	45.0	△94
[매]일반운영비/소모품비	1,935	1,687	87.2	△248
[판]위탁비/외부위탁	6	-	-	△6
공기구비품	721	414	57.4	△307
선로설비	470	366	77.9	△104
수탁자산/공기구	11	-	-	△11

코로나 바이러스 대응

√

√

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

17,681백만원

○ 총 사업비:

○ 추진실적

- 해당사항 없음

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 집행잔액 발생사유

○ 사업근거

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 47조, 제49조, 제51조, 제64조

- 예산처-1333(2020.04.27.) 「2020년 제1회 추가경정예산 확정 알림」

- 예산처-2393(2020.07.27.) 「2020년 제2회 추가경정예산 확정 알림」

- 예산처-3733(2020.11.30.) 「2020년 제3회 추가경정예산 확정 알림」

○ 사업내용

- 코로나19 확산 대비 다수 시민이 이용하는 지하철 역사 및 전동차 방역소독 실시

및 감염예방물품‧장비 확대설치

- 지하철 운영 필수인력이 상주하는 공간 추가 방역‧소독 실시로 업무공백 사전예방

[사업 개요]

- 예방물품 구매: 마스크, 손소독제, 향균필름, 장갑, 보안경, 임대상가 소독제 등

- 방역소독 실시: 전동차, 역사, 차량기지 건물, 필수인력 상주공간 방역소독(관제,승무)

- 방역장비 구입: 열화상카메라, 핸드레일소독기

- 홍보물품 제작: 포스터, 현수막 등

- 코로나19 확산 초기 재료비 급등가격으로 설계 → 가격 안정화에 따라 단가차이 발생

- 서울시 공공근로인력(방역) 지원에 따른 기간제 인력 추가채용 미실시 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	29,289	28,964	98.9	△325

사업담당자	차량계획처장 : 노인옥 ☎9600 팀장 : 전주연 ☎9601 담당 : 최용각 ☎9608

5호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차 교체

5호선 신조전동차(200칸)구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2023.11.

5호선 전동차 200칸

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

280,000백만원

○ 당년 사업물량:

-전동차 설계 및 제작

○ 추진실적

-전동차 설계 및 제작중

○ 집행잔액 발생사유

- 선금지급으로 인한 차액발생  (선금지급액: 28,800,000,003원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업근거

-철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

-철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

-4,5호선 및 7&8호선(1차분) 내구연한 도래 노후전동차 교체

기본계획(안)(차량계획처-21025)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
전동차량/전동차	19,526	19,385	99.3	△141

사업담당자	차량계획처장: 노인옥 ☎9600 팀장: 전주연 ☎9601 담당: 최용각 ☎9608

7호선 노후전동차의 사용내구연한이 도래됨에 따라 신조전동차 교체

7호선 신조전동차(136칸)구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.05.

~

2023.11.

7호선 전동차 136칸

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

190,400백만원

○ 당년 사업물량:

-전동차 설계 및 제작

○ 추진실적

- 전동차 설계 및 제작 중

○ 집행잔액 발생사유

- 선금집행에 따른 차액 발생  (선금지급액: 19,199,999,997원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 사업근거

-철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인) 제5항(차량 기대수명 고시)

-철도안전관리체계 기술기준 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)

-4,5호선 및 7&8호선(1차분) 내구연한 도래 노후전동차 교체 기본계획(안)(차량계획처-21025)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
기계장치	1,879	1,279	68.1	△600

사업담당자	신정차량사업소장: 윤화현 ☎6500 팀장: 박정선 ☎6630 담당: 박종성 ☎6633

2호선 VIVVF 200량 전동차 정비용 필수장비 도입

전동차 정비용 필수장비 도입

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.06.

10종 10대

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,975백만원

○ 당년 사업물량:

10종 10대

○ 추진실적

- 신조전동차 200칸 시험기 10대 납품완료

- 전동차 공기압축기 시험등 3종 제작구매 설치

- 전동차 제동종합시험기 등 4종 제작구매 설치

- 전동차 인버터시험기 등 3종 제작구매 설치

○ 집행잔액 발생사유

- 발주차액 및 낙찰차액 발생

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

「2호선 VIVVF 200량」전동차 정비용 필수장비 도입방안

: 차량정비처-3998(2019.07.29)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
공기구비품	3,524	3,392	96.3	△132

사업담당자	전자처장: 유웅석☎6311-9850 부장: 남궁현☎9851 담당자: 김상연☎9858

내용연수(5년) 경과 및 장기 사용중인 노후 업무용컴퓨터를 적기에 교체 구매하고, 공사 사무환경에 적합한 사양의 제품선정과 친환경 물품을 구매 보급하여 사무환경 개선

노후 업무용컴퓨터 및 복합기 교체 구매

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

전자처-1145(2020.02.21.) 2020년 업무용컴퓨터 구매계획(안)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

3,152

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,431백만원

○ 당년 사업물량:

3,152

○ 추진실적

- 업무용 컴퓨터 복합기 등 3,152대 구매 완료

1. 전자처-1308(2020.3.2.) - 4,308,641원(6대)

2. 전자처-2615(2020.5.14.) - 3,249,629,413원(2,835대)

3. 전자처-2945(2020.5.29.) - 58,679,150원(88대)

4. 전자처-4880(2020.9.2.) - 78,919,870원(223대)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액 등

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/기타	1,197	833	69.9	△364

사업담당자	기술계획처장: 나영수 ☎9700 담당: 박금희 ☎9710

기술분야 안전 중심의 협업체계구축 및 효율적 사무 공간 조성을 위한 기술센터 조성

기술센터 조성

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

12개 기술센터

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

1,200(백만원)

○ 당년 사업물량:

8개 기술센터

○ 추진실적

- 동대문1,2기술센터 조성8층 여직원 전용공간(기술, 승무) 조성, 남직원 침실 이전 조성,

공용휴게실조성

○ 집행잔액 발생사유

- 공사 조직개편 및 기술분야 여직원 침실 및 근무환경개선 검토로 인한 사업재검토 및

재협의

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 노사합의 지연에 따른 기술센터 공사 발주 지연

(※ 노사특별합의서에 따라 통합기술센터 공사 진행시 노사협의 선행)

(단위:백만원)

- 기술센터 구축 변경 계획(안)/ 기술계획처-24544호('18.11.29.) 사장 NO.20579

- 동대문1,2기술센터 조성계획(안)/기술계획처-6369호('20.09.07.) 본부장 NO.183

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	5,396	4,778	88.5	△618

사업담당자	궤도1사업소장: 정이택 ☎5270 담당: 신동석 ☎5286

1~4호선 궤도시설물 적기보수 및 마모한도가 도래된 레일, 훼손된 궤도재료를 교환하여 열차안전운행 확보

궤도시설 보수보강 공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

레일교환 9.02KM 등 다수

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

5,400백만원

○ 당년 사업물량:

레일교환 7.31KM 등 다수

○ 추진실적

- 레일교환 7.31km 등 다수

○ 집행잔액 발생사유

- 계약심사, 일상감사 시 설계금액 변동

- 낙찰차액 발생

- 2019년 1~4호선 궤도시설보수보강공사(2020년 준공) 준공정산

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 신규 발생한 제경비(고용개선지원금 등)에 대한 명확한 방침 수

(단위:백만원)

궤도1사업소-2900,2901,2902,2903호(1~4호선 궤도시설 보수보강공사 시행보고)[본부장 방침]

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	1,578	378	24.0	△1,200

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎5140 P/L: 한우진 ☎5141 담당: 이대중 ☎5163

지하철 터널 및 박스구조물 결함사항(균열, 누수 등) 보수

지하구조물 보수

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

○ 사업근거

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 추진실적

- 공정율 (12월 말 기준) 계획 43.7%, 실적 46.0%로 정상 추진

○ 집행잔액 발생사유

- 긴급보강 수량(터널라이닝 파단부)발생으로 안전예산재배정 및공사 준공기한 연기

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 긴급 보수 물량 수시 발생 및 보수물량 산재

(단위:백만원)

균열,누수,면보수 1식, 동판보강 1식, 역사누수 긴급조치 1식, 터널라이닝 보강 1식 등

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.06.

~

2021.06.

1,333백만원

○ 총 사업비:

균열,누수,면보수 1식, 동판보강 1식, 역사누수 긴급조치 1식, 터널라이닝 보강 1식 등

○ 당년 사업물량:

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	토목1사업소장: 조인석 ☎5140 P/L: 한우진 ☎5141 담당: 이병훈 ☎5589

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	1,049	400	38.1	△649

2~4호선 고가 및 철교구조물 보수, 보강

고가 및 철교 보수

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

○ 사업근거

○ 집행잔액 발생사유

- 긴급보수 물량 발생에 따른 사업 물량 변경으로 기성 등 예산 집행 어려움

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 긴급 보수 물량 수시 발생 및 보수물량 산재

- 공정율 (12월 말 기준) 계획 67.7%, 실적 68.5%로 정상 추진

○ 추진실적

(단위:백만원)

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2021.04.

~

2020.06.

849백만원

○ 총 사업비:

고가보수공 (균열보수, 방음벽 정비 등) 1식, 철교보수공 (부분도장 등) 1식 등

고가보수공 (균열보수, 방음벽 정비 등) 1식, 철교보수공 (부분도장 등) 1식 등

○ 당년 사업물량:

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	2,096	1,849	88.3	△247

사업담당자	토목1사업소장: 고희규 ☎5140 P/L: 한우진 ☎5141 담당: 김근태 ☎5166

지하철 1~4호선 지하구조물 정밀안전진단

지하구조물 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시) 및 시행령

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

총연장 33.9KM

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,096백만원

○ 당년 사업물량:

총연장 20.3KM

○ 추진실적

(단위:백만원)

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 사업추진상 문제없음

○ 집행잔액 발생사유

- 운영예산 : 2,096백만원, 집행금액 : 2,072백만원

- 집행잔액 발생 사유: 설계변경 등으로 인한 잔액

- 2,4호선 시청~을지로입구역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

: 준공(준공금액: 1,444백만원)

- 4호선 동대문~동대문역사문화공원역 등 2개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

: 준공(준공금액: 357백만원)

- 3호선 연장선 수서~가락시장역 등 5개구간 지하구조물 정밀안전점검용역

: 준공(준공금액: 108백만원)

- 3호선 무악재~독립문역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

: 정상추진중(12.31기준 계획 65.2%, 실적 63.6%), 기성금(762백만원)

- 2호선 대림~신도림역 등 10개구간 지하구조물 정밀안전진단용역

: 정상추진중(12.31기준 계획 14.6%, 실적 15.5%)

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

사업담당자	정보운영처장: 김정만 ☎9370 부장: 남궁현☎2050 차장: 나진환☎2051

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
정보화시스템취득비	20,164	12,464	61.8	△7,700

H/W(서버,저장장치 등), 솔루션 및 시스템 S/W 등 인프라 구축 *재무회계, 인사, 시설/설비, 차량, 운전, 안전환경 등 12개 업무시스템 통합 구축

차세대 통합시스템 구축

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 집행잔액 발생사유

- 집행잔액은 차기년도 검수 준공('21년 7월)완료 후 지급 완료

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

○ 사업근거

(단위:백만원)

○ 집행현황

[2020년 사업내용]

1식

1식

○ 당년 사업물량:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업기간:

2020.04.

~

2021.07.

19,860백만원

○ 총 사업비:

○ 추진실적

- 차세대 시스템 구축 추진계획(안)[사장-20274호(2018.9.7.)] *차세대 통합시스템

구축 시행(안)[사장-987호(2019.9.19.)]

* 사업 착수 및 분석단계(4~5월)

- 현행 업무시스템 분석 및 To-Be 업무 프로세스 검토

- 경영진 및 현업 인터뷰 실시(84개부서, 300명 대상 86회)

- 현장설명회 실시(5.29)  ☞ 코로나19관련 비대면(온라인, 업무넷) 시행

- 현업 요구사항 검토 및 전사 통합관점 개선과제 도출

- 데이터 전환 전략 수립, 현행 데이터 분석 및 클린징

* 설계단계(6~8월)

- To-Be 업무 프로세스 보완 및 확정(330여회 현업PI와 협의)

- To-Be 프로세스 설계 결과 설명회(8.25~26)  ☞ (코로나19관련 비대면(서면) 보고

: 전체 프로세스 1,072개 설계 결과에 대한 현업 의견 반영(총 8건)

- 현장 행정업무 경감을 위한 업무 프로세스 추가 반영 및 설계

- To-Be 데이터 분석 및 전환 설계

*구현/테스트 단계(9~12월)

- 요구사항 등에 의해 확정된 시스템 구현(개발) ☞ 전략경영 등 15개 분야 총 6,514 본구현(개발)

*인프라 구축(4~12월):  아키텍처 정의 및 설계, 개발, 운영환경 구축 및 안정화

- 차세대 통합시스템 구축 사업은 사업기간이 15개월로 '19년도에 착수하여'20년도에

사업완료를 목표로 하였으나, 계속된 유찰로 인하여 계약 및 사업착수가 지연됨

[총 사업 기간: '20. 4. 6. ~ '21. 7. 4]

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	3,208	2,859	89.1	△349

사업담당자	궤도2사업소장: 이봉락 ☎5320 P/L: 김종만 ☎5331 담당: 정우석 ☎5347

5~8호선 궤도시설물 유지관리를 통한 열차안전운행 확보

5~8호선 궤도시설 보수보강공사

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

궤도2사업소-3730(2019.06.05) 등

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.12.

레일교환 6.25KM(레일구매 9.96KM) 등

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

3,016백만원

○ 당년 사업물량:

레일교환 6.25KM(레일구매 9.96KM) 등

○ 추진실적

○ 집행잔액 발생사유

- 설계변경에 의한 물량 조정

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

(단위:백만원)

- 레일교환 6.25km(레일구매 9.96km)- 이음매해체점검 403개 및 상판교환 91개 등

- 마모 및 훼손 레일, 노후화 침목, 궤도재료 보수 및 교체로 궤도시설물 내구성 증대 및

열차안전운행 확보

- 유지보수 품질 확보를 위해 전문성이 요구되는 분야에 대해서는 필요시 유지관리 용역 등

전문화된 관리 필요

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/선로	2,369	2,124	89.7	△245

사업담당자	토목2사업소장: 이정숙 ☎5210 팀장: 조수일 ☎5211 담당: 신동섭 ☎5233 외2명

구조물의 안정성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 적기에 보수, 보강함으로써 구조물의 내구성 증진 및 지하철 안전운행을 확보

지하구조물 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제 11조 및 제 12조

- 같은 법 시행령 제 8조 및 제 10조

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2019.09.

~

2021.06.

7호선 건대입구~온수종점, 6호선 응암~신내기지

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

8,937백만원

○ 당년 사업물량:

7호선 건대입구~온수종점, 6호선 응암~신내기지

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 발주 및 낙찰차액 등

- 7호선 건대입구~신대방삼거리역간 토목시설물 정밀안전진단용역 준공(7월)

- 7호선 신대방삼거리~온수종단부간 토목시설물 정밀안전진단용역 준공(7월)

- 6호선 응암~대흥역간 토목시설물 정밀안전진단용역 기성금 지급(5억)

- 6호선 대흥~고려대역간 토목시설물 정밀안전진단용역 기성금 지금(5.5억)

- 6호선 고려대~신내기지간 토목시설물 정밀안전진단용역 정상추진중

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
기계장치	2,131	1,785	83.8	△346

사업담당자	종합관제단장: 전호성 ☎9950 부장: 이재섭 ☎2701

철도교통관제사 모의관제시스템 구축

모의관제시스템 구축 및 운영

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

철도교통관제 교육훈련기관 지정 추진 (사장-375, '19.4.5)

○ 사업근거

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2020.01.

~

2020.09.

모의운전연습기 FTS 1식 및 CAI 35식

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

2,150,000,000

○ 당년 사업물량:

모의운전연습기 FTS 1식 및 CAI 35식

○ 추진실적

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

○ 집행잔액 발생사유

- 사업추진 완료※ 종합관제단-3927(2020.9.17.) "물품 검수보고[철도교통관제사

교육훈련 모의관제시스템 제작․설치]"

- 집행잔액 346백만원(낙찰차액 207백만원 및 예산절감 139백만원)

※ 입찰제안서 평가위원 식사제공, 평가위원회관련 다과 및 물품 준비, 평가위원수당지급,

야간소음공정 숙박비 지급, 인지세반환 등 6건

※ 예산 재배정(이관) 19,030,000원: 차량계획처-8209(22020.10.27."운전실

시뮬레이터 제작설치"

구분	사업 성격
사업기간	세출사업		채무사업		계속비사업
재원조달	자체		시비매칭		국비매칭

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	B/A(%)	차이(B-A)
[매]수선유지비/전동차	1,961	1,958	99.8	△3

사업담당자	차량품질관리센터장: 정명묵 ☎9617 공정관리부장: 허문강 ☎4416 담당: 황준식 ☎9620

노후전동차 정밀안전진단

√

√

[사업 개요]

○ 사업내용:

○ 총 사업기간:

○ 총 사업물량:

○ 총 사업비:

2016.01.

~

2020.12.

953칸

[2020년 사업내용]

○ 집행현황

7,307백만원

○ 당년 사업물량:

170칸

○ 추진실적

- 2020년 노후전동차 정밀안전진단 170칸 정상추진 완료

○ 집행잔액 발생사유

- 예산편성대비 집행금액 감소

○ 사업추진상 문제점 및 개선방안

- 해당사항 없음

(단위:백만원)

-철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인)

-철도차량 정밀안전진단 시행지침

-철도안전관리체계 기술기준 [별표4] □노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리

세부기준□에 정밀안전진단 결과 계속사용여부를 결정

○ 사업근거

철도안전법에 따라 신조전동차 도입 후 20년이 도래되는 차량 및 최초 진단 이후 재정밀안전진단 시기가 도래된 1~8호선 노후전동차의 계속사용 여부 판정