문서번호	시설관리과-6248
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
오영진		이승영	04/01 고신석
협조

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

**************

2021. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

**************

『2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 감리업체인 (주)건양엔지니어링으로부터 현장실정보고서가 제출됨에 따라 검토 후 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사위치: ************

○ 공사개요: D=80mm 노후밸브 교체

○ 지시번호: 시설물정비-4

○ 시공업체: ***********

○ 감리업체: *****************

○ 관련공문: 「단수불가 현장에 대한 실정보고」 건양 남부 2021-2104-2(2021.3.25.)

□ 실정보고 내용

○ 상기 지시한 노후밸브 교체공사**************는 영등포전통시장 내의 공사로 야간에 본관(DP, D=200mm)의 단수후 교체하도록 작업지시하였으나,

○ 해당구간 내 단수가 불가하여 작업진행을 위하여 라인스토핑 공법(무단수공법)적용후 노후밸브 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 위와 같이 단수가 불가한 사항으로 시설물 단가업체에게 라인스토핑(무단수공법)후 노후밸브 정비토록 재지시코자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고서 관련공문 1부.  끝.