				★ ◎
문서번호	성동중구센터-169			부 원			부원				동북주거복지처장
보존기간	3년											03/23
				안성호			이치균				조진래
결재일자	2021.03.23
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
『서울숲2차푸르지오 홈 네트워크 설비 교체공사』
계약기간 연장 검토 보고
		서울주택도시공사
(동북주거복지처 성동중구센터)

공사 기간 연장 검토 보고

『서울숲2차푸르지오 홈 네트워크 설비 교체공사』관련 해외 자재수급 지연과 실행 프로그램 제작 소요기간에 따라 다음과 같이 계약기간을 연장 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

공사계약일반조건(행정안전부예규 제138호)

- 제32조 계약기간의 연장

Ⅱ		계약현황

공 약 명 : 서울숲2차푸르지오 홈 네트워크 설비 교체공사

계약금액 : 금7,367,000원

계약업체 : 하나정보통신  대표 김 원섭

계약일자 : 2021년 03월 18일

공사기간 : 2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 22일

준공예정일 : 2021년 03월 22일

Ⅲ		공사 진행 현황

진행현황

단지명	공사대상	공사추진현황	비고
서울숲2차푸르지오	홈네트워크 설비	홈네트워크 서버 교체 및 운용프로그램 제작

Ⅳ		공사기간 연장사유

해외 자재수급의 어려움과 운용 프로그램 호환문제 등으로 다소 소요기간이 발생되어 공사

기간 연장필요

Ⅴ		검토결과

공사계약일반조건(행정안전부예규 제138호) 제32조 계약기간의 연장사유가 시공사의 책임이 없는 사유로 발생하였음

공사기간 연장(준공예정일로부터 24일)

변경 전	변경 후
2021.03.18.~ 2021.03.22.	2021.03.18.~ 2021.04.15.

Ⅵ		행정사항

계약부 기간연장에 따른 계약변경 의뢰

공사연장에 따른 간접비는 계약상대자와 협의하여(계약금액변동없음) 지급하지 않음

붙임  1. 공사기간 연장 요청 공문 1부

2. 공사기한연기원 1부

3. 계약변경합의서 1부

4. 공기연장사유서 1부.  끝.