문서번호	시설보수과-2727
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	04/14 변봉섭
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			고흥일
	주무관			조호영

도로시설물 세척용역 작업계획(1차)

2021. 4

남부도로사업소

시설보수과

도로시설물 세척용역 작업계획(1차)

쾌적한 도로환경 조성을 위해 시행 중인 ‘2021년 도로시설물 세척용역’에 대한 작업 계획(1차) 보고 임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 도로시설물 세척용역

○ 용역기간 : 2021. 4. 8. ∼ 12.31.

○ 도 급 액 : ************

○ 용역개요 : 교량(고가차도) 2개소, 터널 7개소, 지하차도 10개소 세척

○ 도 급 자 : *******************

□ 보고내용

○ 쾌적한 도로환경 조성을 위하여 도로시설물 세척 작업(1차)을 아래와 같이 도급자에게 작업지시 하고자 함.

○ 세척시설물 : 총18개소

○ 작업기간 : 4.22(목). ~ 4.29(목)(당일22:00~익일06:00)

연번	대상시설물	작업일	작업내용
1	국사봉터널, 산복터널	4/22(목)	벽체(타일, 중앙기동) 보도바닥, 난간, 방음벽 등 세척
2	호암1터널, 호암2터널	4/23(금)
3	영등포지하차도, 난곡터널	4/24(토)
4	도림고가, 수출의다리	4/25(일)
5	대방,신길, 동작지하차도	4/26(월)
6	염곡,양재, 잠수교남단	4/27(화)
7	여의교지하차도, 서리풀터널	4/28(수)
8	선암지하차도, 사평지하차도	4/29(목)
‣상도터널은 보수공사 시행 중으로 금회 작업 제외

※ 우천시 작업 일정이 변경될 수 있음.

□ 투입인력 및 장비

○ 인력투입 계획

구분	벽체 콘크리트 세척	방음판, 벽체타일 세척	바닥(보도) 난간 세척	신호수	합계
투입인력	3	5	3	2	13

※ 1일 평균 투입인력.

○ 장비투입 계획

품목	수량	용도	비고
고압세척기-13마력	4	세척
조립식비계틀	1	고소작업시
싸인보드차량- 1톤	1	공사안내 시
발전기-220V	1	에어풍선
살수차-18톤	1	용수공급
화물차량-장비운반	3	장비운반

□ 향후계획 및 행정사항

○ 도급자에게 안전관리 및 통행불편 최소화를 위한 교통처리계획 철저 준수 지시

○ 관련기관(관할경찰서 및 언론담당관) 협조요청

붙임 : 작업계획서(1차) 및 교통처리계획 각1부.  끝.